『AI기반 중량화물이동체 물류플랫폼

육상관제센터 건립』

건축설계 과업지시서

* 공모 당선자에 대한 기본 및 실시설계 용역

목       차

제 1 장 과업개요	1

1. 과업명칭

2. 과업목적

3. 과업개요

4. 과업기간

5. 과업내용

6. 적용범위

7. 과업 준수사항

제 2 장 일반지침	9

1. 일반사항

2. 업무협의 및 보고

3. 보안성 검토

4. 발주자의 자료제공

5. 계약조건

6. 설계비의 증감

7. 납품 및 검수

8. 용역성과의 소유

9. 기타사항

10. 특기사항

제 3 장 과업의 세부지침	13

1. 설계기준

2. 설계 일반지침

3. 설계도서의 표기

4. 기술지침

가. 배치 계획

나. 토지이용계획

다. 건설안전을 고려한 지침

다. 기타지침

라. 설계세부지침

제 4-1 장 분야별 과업지시서(1)	25

□ 건축분야

1. 건축계획

2. 건축구조

□ 토목분야

□ 조경분야

□ 설계도서 작성요령

제 4-2 장 분야별 과업지시서(2)	42

□ 기계․소방분야

□ 전기분야

□ 정보통신분야

제 5 장 설계도서 납품 목록	57

1. 기본설계

2. 실시설계

붙 임	59

[붙임 1] 착수계

[붙임 2] 보안각서

[붙임 3] 책임기술자 선임계

[붙임 4] 하도급승인 요청서

[붙임 5] 월간공정보고

[붙임 6] 주간공정보고

1		과업개요

1. 과업의 명칭 :『AI기반 중량화물이동체 물류플랫폼 육상관제센터 건립』

기본 및 실시설계 용역

2. 과업의 목적

○ 조선·해운산업의 동반성장을 위해 미래선박의 핵심기자재 국산화·통합화

개발과 동시에 선박의 운항 목적인 물류(화물) 운송의 효율성과 신뢰성

확보를 위한 AI기반 중량화물이동체 물류플랫폼 육상관제센터를 구축함

3. 과업 개요

가. 위    치 : 울산광역시 동구 일산동 35번지 일원

나. 지역지구 : 자연녹지지역

다. 사업규모

1) 부지면적 : 9,212㎡(육상관제센터 부지면적 1,462㎡)

2) 용도 및 규모 : 연구시설, 지하1층, 지상3층, 연면적 845.70㎡

3) 추정공사비 : 금3,169,000,000원 (부가세 포함)

4) 설  계  비 : 금143,000,000원(부가세, 손해보험료 포함)

※ 설계용역범위 : 건축, 기계, 전기, 통신, 소방, 조경, 토목, 철거, 지질조사, 제반분야의 설계비 및 설계안정성, 건축물 보건대장, 에너지, 신재생, BF 등 제반 행정절차 이행과 건축협의, 설계자문, 심의, 심사 등 발주기관이 요구하는 신청 및 보고자료 등에 관한 용역이 포함

※ 에너지절약계획서 및 각종 예비인증 관련 수수료는 별도

5) 주요 시설

층구분	실명		면적(㎡)	용도 및 특이사항
지상3층	연구시설	선박운항관제실	74.88	⦁가상 해상교통관제센터실(멀티 모니터 등)
		데이터분석실	56.16	⦁데이터분석 사무실
		공용면적	108.89	⦁엘리베이터, 계단실, 화장실, 복도 등
	소계		239.93
지상2층	연구시설	통합서버실	33.93	⦁MDF실(서버, 클라우드, 통신, 전화, UPS 등)
		연구실	29.25	⦁연구 사무실
		기술교육실	60.84	⦁전산교육실(컴퓨터, 모니터 등)
		기업지원실	58.50	⦁입주기업실
		공용면적	95.03	⦁엘리베이터, 계단실, 화장실, 복도 등
	소계		277.55
지상1층	행정/연구시설	해상시운전실	63.18	⦁가상 선박시뮬레이션 장비(모니터, 콘솔 등)
		실증검증	58.50	⦁실증검증 사무실
		운영지원실	60.84	⦁건물운영 사무실
		공용면적	95.03	⦁엘리베이터, 계단실, 화장실, 복도 등
	소계		277.55
지하1층	기타	기전실	50.67	⦁기계실, 전기실, 발전기실, 우수조, 저수조 등
	소계		50.67
건물 총계			845.70

4. 과업 기간

본 과업은 착수일로부터 120일(공휴일 포함)까지로 한다.

가. 용역 결과물 납품 후라도 본 용역과 관련하여 관련규정 위반 또는 설계 미비 등 하자사항이 발생하여 변경이 필요할 시는 그 내용이 완료될 때까지 계약자 부담으로 변경작업을 수행하여야 하며, 다음의 경우에 한하여 발주기관의 승인을 득하여 과업수행기간을 변경할 수 있다.

1) 천재지변 또는 불가항력적 사태로 인하여 과업수행이 중단되었을 경우

2) 발주기관의 방침에 의하여 과업수행이 중단되었을 경우

3) 발주기관의 사업계획 변경으로 과업내용이 변경되었을 경우

4) 기타 발주기관이 정당하다고 인정할 수 있는 사유가 발생할 경우

나. 용역수행 기간 중 관련 법규가 제정 또는 개정될 경우 발주기관과 협의하여 반영 여부를 결정하여야 한다.

다. 기타사항

1) 본 과업지시서는 설계용역에 필요한 제반사항을 완벽하게 서술할 수 없으므로 과업수행자는 관련 법규를 기준으로 발주기관과 수시로 협의하여 업무를 수행하여야 한다.

2) 본 과업지시서에 명기되지 않은 사항이라도 중요하다고 인정되는 사항은 발주기관과 협의하여 설계에 반영토록 하여야 하며, 과업수행 시 필요하다고 판단되는 경우 관계전문가의 자문 및 관계기관의 의견을 받아 설계에 반영하여야 한다.

5. 과업 내용

가. 설계 범위

1) 건축․토목․조경․설계안정성·기계․전기․정보통신․소방․신재생 에너지 설비 등 과업지시서에 의한 전 분야의 기본 및 실시설계도서 일체

2) 각종 심의, 인․허가, 입찰, 계약 등 제반 행정절차 이행에 따른 협의, 보고 관련도서 및 필요도서 작성 등

3) 예비인증(녹색건축물, 장애물 없는 생활환경, 에너지 효율등급, 제로에너지 건축물) 및 신재생에너지 공급 의무 비율 반영 등
※ 단, 에너지절약계획서 및 각종 예비인증 관련 수수료는 별도

4) 대지조성에 필요한 관련 설계도서 일체

5) 기타 본 과업지시서에서 정하는 사항 등

나. 세부 용역범위

1) 설계에 필요한 사전조사 업무

- 시험 터파기를 실시하여 지하수위 등을 확인하고 설계에 반영할 것

- 지역지구 및 대지관련 제약 및 제한사항 확인하고 설계에 반영할 것

2) 설계자문, 계약심사 등의 건립에 필요한 행정 자료제출 및 이행

3) 지질조사 업체(별도발주)와 상호 협의하여 과업을 추진할 것

4) 기타 관련법규 및 발주기관이 요구하는 각종심의, 협의, 인ㆍ허가, 자문, 보고 등의 도서 작성 및 이행 일체

5) 각종 심의결과에 따른 설계보완 및 수정

6. 적용범위

가. 설계 범위

설계공모에서 당선된 설계안을 기준하여 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 소방, 통신, 폐기물처리 분야 등 설계지침에 따른 기본 및 실시설계도서 작성용역

※ 용역성과물은 제반 인·허가 및 인증, 심의, 검토 등을 득한 성과물이어야 함

나. 용역범위

1) 기본계획 설계도서 작성

2) 중간설계도서 작성(필요시)

3) 실시설계도서 작성(도면, 내역, 시방 등) 작성

4) 공정표 작성(산출근거작성) 및 색채계획 작성

- 각 시설별 특성에 맞는 계획이 되어야 하며, 전체적인 색상조화(외부 및 실내 마감재)가 최상으로 이루어지도록 계획(준공 시 제출)한다.

- 자재의 지정색은 주변과의 색상조화 및 전체적인 색조를 고려하여 계획한다.

5) 건축 등 각종 인허가 처리(필요시 건축 등 각종 인·허가를 득하기 위한 제반협의, 승인, 심의, 검토, 인가 등 포함)

6) 계약심사 및 일상감사 이행(각종 심사 결과에 따른 설계보완 및 수정)

7) 기술(설계)용역을 수행하는데 설계 감독관의 지시 및 지적사항에 대한 이행 및 보고서 작성

8) 기타 발주기관이 업무와 관련되어 지시하는 일체의 요구사항

다. 별도 추가 업무

건축사법, 엔지니어링기술진흥법에 의한 기본업무 이외 아래와 같은 업무가 필요한 경우에는 수급인의 업무에 포함된다.

1) 건축계획과 관련된 유사시설 자료조사

2) 각종 인·허가 및 심의에 필요한 서류작성·제출

3) 실내 투시도, 인테리어 디자인, 안내사인 등 작성 (필요시)

4) 건축물대장의 기재 및 관리 등에 관한규칙에 의한 건축물대장 작성

5) 각종 보고서 작성 및 인쇄 등

라. 제출서류

수급인은 용역착수 시에 다음 서류를 2부(착수계 1부 원본, 1부 사본) 제출한다.

1) 착수계 1부

2) 책임기술자 선임계 1부

3) 설계용역 참여기술자(책임기술자 및 분야별 책임기술자 포함)현황 1부

4) 과업수행계획서 1부

5) 설계용역수행 조직표 1부(연락처 기재)

6) 각 공종(건축, 토목, 조경, 기계, 통신, 전기, 소방 등)의 분야별 책임기술자 명단, 업무내용, 소지한 기술자격증 사본, 기술경력증명서, 이력서 등 각 1부

7) 설계용역 예정공정표 1부

8) 낙찰금액에 대한 산출내역서 1부.

9) 하도급 예정(하도급 승인요청은 착수 후 30일이내 제출)현황 1부

10) 보안각서 각 1부(보안계획서 작성 포함)

11) 기타 발주자가 필요하다고 인정하는 사항

7. 과업수행의 준수사항

가. 설계의 정의

본 설계용역의 최종도면은 건축법, 국토의 계획 및 이용에 관한법률, 정보통신공사업법, 전기사업법, 전력기술관리법, 전기공사업법, 소방 관련법, 지적법, 신에너지 및 재생에너지개발․이용․보급촉진법, 도시교통정비촉진법 등 관련법규와 각종 기술기준에 위배됨이 없고 관계기관과의 건축협의, 검사, 인증, 검토, 심의, 심사가 완료된 것이어야 한다.

나. 납 품

납품은 기본설계 및 실시설계도서 납품으로 구분하여 납품한다.

다. 설계의 책임 및 손해배상

1) 설계도서는 설계자의 책임으로 작성하며 납품 후에도 설계상의 하자로 인하여 발생되는 설계변경을 포함한 일체의 책임 및 손해에 대하여 「건축사법」 제 20조(업무상의 성실의무 등) 제2항 등에 의한 손해배상 책임을 진다.

2) 설계자는 납품 이후에 설계상의 하자(설계도서 상호 간의 모순, 건축협의 불가, 구조적인 모순 등)로 인하여 발생되는 모든 사항에 대하여 설계변경을 포함한 일체의 책임을 져야 하고 공사 착수 시 관련기관에 제출하는 설계도서 및 관련서류를 작성 제출하여야 한다.

3) 공사 중 설계도서에 관련된 문의 및 질의사항에 적극적으로 협조(답변서 제출 등)하여야 한다.

4) 발주기관의 사정에 의하여 공사발주가 지연될 경우 설계자는 내역서 수정 등 발주기관의 요구에 응해야 한다.

라. 건축법 및 관련법규 검토

설계자는 건축법 등 관련 법규상 건축이 가능한지의 여부를 판단하여 계약이행에 문제가 있을 경우에는 이에 대한 내용을 관련기관과 문서로 협의하고 설계기간 중 변경되는 법규나 기술기준을 반드시 적용하여야 한다.

마. 관계기술자 협력

건축법시행령 제91조의3(관계기술자와의협력)과 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 제3조(관계전문기술자의 협력사항)에 의한 일정 규모이상의 건축물에 대하여는 관계법에서 정하는 기술자의 협력을 받아야 한다.

바. 설계의 기본방향 및 개요

1) 대지의 입지조건에 적합한 합리적인 설계

가) 본 사업부지 주변현황을 고려하여 안정성 있고 주변건물과 조화롭게 설계

나) 대지가 안정성 있도록 하여야 하며 주변 시설물이 훼손되지 않도록 대책을  수립하여 설계에 반영하여야 한다.

다) 기능을 원활하게 수행할 수 있도록 유기적으로 공간을 연결하고 동선 및 실의 크기를 적절히 배분하여 최소비용으로 최대 효과를 얻을 수 있는 합리적인 설계가 되어야 한다.

2) 수요를 감안한 미래지향적 첨단 시설 설계

가) 성장과 변화를 예측한 합리적 규모로 외관은 조형성, 독창성 있는 설계로 쾌적한 환경을 조성하고 외형과 조경의 모든 요소에 친근한 이미지 반영

나) 부식(腐蝕)우려가 있는 모든 장소에는 자재선정 시 내구성과 미관을 동시에 고려하여 설계하여야 한다.

다) 대지주변이나 건축물 내 소음원(騷音源)이 있는 경우에는 소음(騷音)에 대한 대책을 수립하여 설계하여야 한다.

라) 모든 기준은 최근 개정된 최신법령에 해당하는 기술기준을 필히 적용

3) 에너지 절약형(Energy Saving) 설계

가) 건축물의 에너지절약 설계기준(국토해양부 고시)에 맞추어 창호, 내․외벽,  슬라브, 지붕 등 모든 요소에 방풍, 방한, 단열 등 에너지 절약형 구조로 설계하여야 한다.

나) 기계설비는 에너지 고효율 자재사용 및 고효율 시스템 설계

다) 자연채광을 최대한으로 반영하고 적정 환기로 사무 및 복무환경을 최적화하고 건물 용도와 실에 따른 적정 조도의 반영

라) 근무 직원의 쾌적성과 편리성이 확보된 설계

4) 환경 친화적 부지환경 조성

가) 합리적인 토지이용계획으로 대지이용을 극대화하고 쾌적한 근무, 대기 환경 조성

나) 조경포장 및 조경시설물, 외부 구조물, 외부 옹벽, 우․오수계획 기타 시설은 환경친화적으로 설계

다) 주변의 환경을 보존하도록 계획하고 공사시행 시 분진, 소음, 진동, 폐기물의 발생이 최소가 되도록 고려한 설계

※ 소음진동관리법 제21조(생활소음과 진동의 규제), 제29조(방음∙방진시설의 설치 등), 제40조(방음시설의 성능 및 설치기준)에 맞게 설계

5) 방범, 방재 등에 편리하고 유지관리가 용이한 설계

가) 건축물의 완성뿐만 아니라 유지관리에 대한 비용이 최소화되는 방법 등을 고려한 경제적인 설계가 되어야 한다.

나) 화재, 지진, 태풍, 홍수 등 재해에 대하여 안전하며 피난에 유리하고, 방범 및 보안관리가 용이한 구조로 설계하여야 한다.

6) 안전성과 시공성이 확보된 설계

가) 고정하중, 적재하중, 적설하중, 풍하중, 지진하중 및 건축물의 실제의 상태에 따라 하중, 수압, 진동, 충격 등에 의한 외력, 온도변화, 수축 및 크리프의 영향을 고려한 구조안정성이 확보된 설계

나) 지반상태에 따라 합리적인 기초구조계획이 이루어진 설계

사. 주요자재 사용계획

1) 기능에 적합한 환경친화적인 자재 경제적인 자재를 사용하여야 한다.

2) 국내자재 중 KS품 사용이 원칙이며 KS품이 없을 경우 국내자재 중 발주자와 협의하여 선정한다.

3) 소방관계법에 의한 방염시설기준을 적용한 자재사용

아. 관급자재의 선정

1) 근거 규정

「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」제86조와「중소기업 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령」제11조, 중소기업제품 공공구매제도 운영요령, 조달청 시설공사 맞춤형서비스 관급자재 선정 운영기준 등 에 따라 관급자재를 선정

2) 수급인은 상기 규정에 의거 해당되는 자재리스트 및 관급자재 선정검토서를 적기에 작성, 제출하여야 한다.

2		일 반 지 침

1. 일반사항

가. 설계도서의 작성방법은 발주자가 정하는 소정양식에 의하고 설계도서 작성중 이의가 있을 때에는 반드시 발주자와 협의한 후 후속작업을 진행하여야 한다. 본 설계지침서는 일반적인 사항을 규정한 것으로 과업의 목적, 공사규모, 예산액 등에 적합하게 설계가 진행될 수 있도록 합리적인 방법으로 과업을 수행해야 하며 발주자가 사전에 예측할 수 없었던 공사비의 증가 또는 설계용역 이행에 문제점이 발생되는 경우에는 즉시 서면질의 후 후속작업을 진행하여야 한다.

나. 건축, 토목(연약지반), 조경, 기계, 폐기물, 기타 부대공사에 대한 설계는 관련법규에 의한 제반규정 및 본 지침서의 기준 이상으로 한다.

다. 설계는 에너지절약형의 경제적인 구조와 기능을 갖춘 안전한 구조로 한다.

1) 저탄소 녹색성장 추진을 위해 고단열 건축자재 사용,  CO2 저감 방안 등을 고려해야한다.

2) 사용자재․장비 등 녹색성장 방안을 적극적으로 반영한다.

라. 사전조사를 철저히 하여 지반상태를 확인하고 도로 등과 연계하여 설계해야 하며 사전조사 시 도로의 연결관계, 집중호우 시 침수상황, 우․오수관 위치, 급수 인입점, 전기인입점 등 과거의 기상관련 통계자료를 검토하여 설계에 반영하여야 한다.

조 사 사 항	비 고
① 대지 주변의 인입 시설물 조사	진입도로, 상ㆍ하수관, 통신관, 전기선, 가스관 등
① 대지내 구조물, 시설물, 토질 등의 조사	폐기물 매립여부 등
② 대상 부지에 대한 각종 규제사항	각종 관련 법규, 규정 등
③ 사토장 및 운반로
④ 현황측량 및 지질조사(별도발주)

마. 발주기관에서 제공하는 자료 이외에 단계별 설계를 수행하는 과정에서 상세하고, 명확한 조사자료 획득을 위해 조사가 필요한 경우 설계자 부담으로 실시하여 설계에 반영하여야 하며, 설계자는 설계결과에 대한 책임을 진다.

바. 자재 및 장비선정 시 신기술제품, 조달청 우수제품 등 사용 검토하여야 한다.

사. 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률에 의거 직접구매 대상품목에 대하여 검토 반영하여야 한다.

아. 시인성과 접근성을 향상시킬 수 있는 안내사인을 디자인하여야 한다.

자. 기타 수요기관 요구사항 반영

2. 업무협의 및 보고

가. 업무보고

1) 월간공정보고

매월 말일 기준으로 업무수행 및 예정사항을 작성하여 붙임 양식에 의거 제출한다.

2) 수시보고

용역진행 중 문제점 발생 시 문제점을 분석하여 제출하여야 한다.

나. 업무회의

1) 일반사항

가) 설계자는 설계진행과 관련하여 업무에 대하여 발주자와 협의하고자 하는 경우에는 책임기술자로 하여금 협의하도록 하여야 한다. 단, 세부적인 공종별 설계내용에 대하여는 분야별 책임기술자가 협의할 수 있다.

나) 본 설계지침서에 제시된 내용이 불분명 또는 명시되지 아니한 경우에는 설계자 임의로 해석할 수 없으며 발주자와 협의하여 결정하여야 한다.

다) 설계자는 각종 회의 시 책임기술자로 하여금 회의장소와 참석범위 등을 협의하고 회의에 필요한 자료의 작성과 회의에 참석토록 하여야 한다.

2) 업무 착수회의

가) 업무착수회의는 착수일 또는 착수일로부터 늦어도 7일 이내에 장소와 일자를 협의하여 개최한다.

나) 업무착수회의 시 책임기술자는 착수계 내용을 기초로 전체적인 설계의 진행계획을 설명하여야 한다.

3) 기본설계 보고회

가) 지정된 일자에 기본설계 성과에 대하여 보고회(파워포인트)를 개최한다.

나) 과업수행자는 보고회 발표일 4일전까지 발표자료를 발주기관에 제출하여야 한다.

4) 실시설계 보고회

가) 발주기관에서 필요하다고 인정되어 실시설계보고회를 개최할 경우, 지정된 일자에  실시설계 성과에 대하여 보고회(파워포인트)를 개최한다.

나) 과업수행자는 보고회 발표일 4일전까지 발표 자료를 발주기관에 제출하여야 한다.

5) 수시회의

설계진행시 문제점이 발생하거나 기본설계, 실시설계 보고 시 보고에 필요한 자료를 작성․배부하여야 한다.

6) 사업수행조건

가) 본 사업에 필요한 관련 인∙허가를 받거나 검사를 받아야 할 경우, 이에 대한 업무는 사업자가 수행하여야 한다.

나) 사업자는 용역기간 동안 관련기관 또는 자문단의 회의개최 시 참석하여 진행상황과 설계내역 설명 및 의견수렴, 의견을 청취한다.

다) 과업 수행 중 정책변경 등 불가피한 사유가 발생 시에는 발주기관은 본 과업의 일부 또는 전부를 변경⦁중지할 수 있다.

3. 보안성 검토

가. 설계 용역자는 본 과업 지시서에 의거 작성 또는 제출되는 각종보고서 및 지식을 개인 또는 특정단체 등의 이익을 위하여 이용할 수 없다.

나. 설계 용역자는 보안상 다음사항을 준수해야 한다.

(1) 착수 시 보안대책을 수립하여야 한다.

(착수계제출 시 설계참여 관련자 전원 보안각서 첨부)

(2) 모든 성과품은 개인이 소유하거나 임의 복사 또는 외부로 유출시켜서는 안된다.

(3) 과업수행자 보안상 결함이 없도록 하고 보안상 불이행으로 발생되는 모든 책임은 설계 용역자가 진다.

(4) 기타 용역의 특수성 등으로 인하여 용역과업 수행 상 별도의 보안관리 등을 요하는 사항이 통보될 경우는 이를 준수하여야 한다.

4. 발주기관의 자료제공

발주기관은 “수급인”의 요구에 따라 본 과업과 관련된 보유하고 있는 기본자료 등을 제공할 수 있으며, 기타 관련기관(사) 및 공공기관에 대한 협조가 필요할 시에는 적극 협조하며 계약상대자는 용역완료 후 관련자료를 반납하여야 하며, 제공된 자료의 멸실 또는 훼손 시에는 손해를 배상하여야 한다.

5. 계약조건

발주기관에서 다음과 같은 조건이 발생되면 일방적으로 계약을 해약할 수 있다.

가. 설계이행이 불가능하다고 인정될 때

나. 발주기관의 지시에 불응하여 설계를 진행할 때

다. 기타 용역계약 조건을 위반할 때

6. 납품 및 검수

1) 최종 설계도서는 계약 납품일 5일 전에 납품명세서에 의한 설계도서를 미리 제출하여 예비 검토를 받은 다음 수정이 있을 경우 수정 완료하여 납품하고, 보완지시가 있을 때는 지체없이 응하여야 하며 최종 설계성과품 납품과 동시에 검토제안 내용에 대한 설계반영 결과를 설계보고서에 포함시키고 이를 발주기관에 제출하여야 한다.

2) 최종 납품된 설계도서에 대하여서는 납품과 동시에 발주기관에 귀속된다.

7. 용역 성과의 소유

“수급인”이 제출한 모든 용역성과는 “발주기관”의 소유로 한다.

8. 기타사항

가. 본 과업에 투입된 기술자는 과업기간 중 임의로 교체할 수 없으며 교체가 불가피한 경우에는 발주기관의 승인을 받아 교체하고, 발주기관에 의해 과업수행에 부적합하다고 판단된 기술자에 대해 발주자가 즉시 교체를 명할 수 있으며 “수급인”은 이에 따라야 한다.

나. 과업지시내용 및 계약서상의 내용이 상충되거나 의문이 있을 경우 발주기관의 지시에 따라야 한다.

다. 감독 : 모든 설계과정에서 업무담당자의 감독을 받아야 한다.

라. 계속자문 : 본 용역 수행자는 과업완료 후에도 본 과업과 관련하여 필요 시  자문에 응하여야 한다.

9. 특기사항

설계를 완료하여 납품 후 발주기관의 사정으로 인한 변경, 공사 진행 중에 시험 등 설계변경 사항이 발생할 경우에는 즉시 응하여야 하며, 이때 발생되는 설계변경 용역비는 무상으로 하며 발주기관의 요구에 의하여 설계변경도서를 납품하여야 한다.

또한, 발주기관에서 별도의 과업지시서를 제시할 경우 이를 적극 반영해야 한다.

3		과업의 세부지침

1. 설계 중점 고려사항

○ 본 설계용역과업지시서의 최종 설계도서는 대지 위치에 적용되는 관계법령과 지침, 각종 기술기준에 위배됨이 없어야 한다.

○ 주차장은 최소 법정주차 이상(장애인주차 포함) 주차공간을 최대한 확보하도록 계획한다.

○ 외장 마감은 에너지의 효율성 및 유지·관리(바닷가 주변으로 해풍, 파도 등에 의해 파손 고려)를 고려한 경제성과 실용적인 자재로 계획하되, 특히 입면구성에 있어 커튼월 위주 요소는 지양한다.

○ 이용자의 편의성과 관리자의 시설물 관리 운영을 고려하여야 하며, 장애인 및 노약자의 보행에 지장이 없도록 대지조성계획을 수립하고, 휠체어, 보행기 사용에 장애가 없도록 접근로, 경사로를 설치하며 특히 주요 수직이동 수단은  엘리베이터로써 원활한 동선 계획이 될 수 있도록 한다.

○ 패시브적 요소를 검토하여 에너지 절약 및 친환경 건축물로 계획한다.

- 고단열, 고기밀, 세부 디테일, 채광을 고려한 기능적 실배치 및 창호계획, 실의 기능 및 경제성을 고려한 층고 계획, 합리적·경제적 냉난방·환기설비 및 적정 용량계획 등

○ 소방차량 등 긴급구조 응급·화재진압 차량의 진·출입 등이 용이하도록 계획하며, 화재 등 비상상황 발생시 피난·안전·구조가 원활하도록 계획한다.

○ 건설원가 절감, 완공 후 관리·유지관리비 및 운영계획을 충분히 고려하여 계획한다.

○ 모든 관계법규(입법예고사항 포함) 및 협의내용, 필지 제약사항, 지구단위계획 및 토지이용에 관한 제반 관계 법규와 건축 관련 법규(조례포함)등을 열람 확인 후 제반규정에 대하여 적합하게 설계하여야 한다.

○ 건물 증축 계획을 검토해서 설계한다.

○ 향후 부지 활용에 지장이 없도록 건물 및 진입도로 배치를 적합하게 설계하여야 한다.

○ 연구소 시설에 적합한 설계를 위해 시설입주 연구기관과 협의해서 설계하여야 한다.

2. 설계기준

가. 일반사항

1) 본 설계는 건축설계지침을 따른다.

2) 또한 설계는 본 과업지시서에 의하여야 하며, 기본구상에 대한 설계변경 또는 수정을 요할 경우 및 이에 부수되는 사항은 승인을 득하여야 한다.

3) 건축․토목․기계․전기․통신․소방․조경 등과 부대시설에 대한 설계기준은 관련 법규와 제반 기준에 의한다.

4) 장애인, 노인, 임산부 등 사회적 약자를 고려한 시설물의 수직, 수평 동선 계획을 고려하여 설계하여야 한다.

5) 각종 사전 행정절차 이행시 보완 또는 개선요구 사항을 충족하도록 설계하여야 한다.

6) 초기투자비용 뿐만 아니라 미래의 운영/유지관리단계에서 발생되는 비용 및 해체/폐기단계의 비용을 포함한 LCC(생애주기비용)적 측면의 고려가 이루어져야 한다.

3. 설계 일반지침

가. 건축

1) 건축설계 일반사항

가) 기능 및 건축구조가 적정하여야 하며 부동침하 우려가 없고 안전하여야 한다.

나) 방수, 방습, 단열, 차음 및 소음방지에 지장이 없어야 한다.

다) 각 기능별 유기적 관련성을 고려하여야 한다.

라) 초기투자비와 운영비가 저렴한 에너지 절약형의 설계

마) 창호는 환기 및 채광이 최적화 되도록 설계반영

바) 주차장 계획과 차량 진․출입 등 동선계획을 고려한다.

사) PD, AD, EPS, TPS 등은 계획단계부터 유지관리 및 증축을 고려하여 사람과 장비가 출입이 가능하도록 충분한 크기를 확보하여야 한다.

자) 안정성과 조형미를 살리면서 공공기관 건물로서 상징성이 부각되도록 설계하며, 주변 환경과 조화를 이룰 수 있도록 설계반영

2) 구조계획

가) 기능이 적절한 구조

나) 안전한 구조(내진설계 규정에 적합한 구조)

다) 경제적인 구조

라) 대지의 지질조사 결과에 근거하여 지반에 적합한 구조가 되어야 한다.

3) 주요자재 사용계획

가) 기능에 적합하고 경제적인 자재를 사용하여야 한다.

나) 국내자재 중 K.S제품 사용이 원칙이며 K.S제품이 없을 경우 국내자재 중 동등 이상 제품으로 선정한다.

다) 관급자재 및 주요자재(골재 등)는 현지 생산 공급처를 확인 후 설계하고 내역에 반영하여야 한다.

라) 조달청 우수제품은 우선적으로 설계에 반영하여야 한다.

마) 가급적 울산지역에서 생산되는 자재를 반영한다.

나. 토목

1) 일반사항

가) 현장의 자연적인 지형조건 검토, 부지, 옹벽 및 성토 조형성과 경제성을 합리적으로 계획한다.

나) 본 공사 계획에 적용되는 모든 표고는 도로의 표고를 기본 측점으로 한다.

다) 지하매설물 조사 : 지하매설물의 이설방안을 조사하여야 하며, 조사항목은 다음과 같다.

(1) 공공시설물

(2) 전기 및 통신시설물

(3) 상․하수도 시설물 및 기존 구조물

(4) 기타 시설물

라) 설계에 임하기 전에 설계자는 반드시 현장 답사를 실시하여 현장의 지형, 지역적인 여건 및 장래계획, 배수상황 등 제반 주변 사항을 조사하여 경계를 확정하고 조사 내용은 계획설계에 반영하고 중간설계 및 실시설계에 조사내용에 의한 설계를 하여야 한다.

2) 토공사

가) 토공은 가급적 절토, 성토량이 균형을 유지하여 경제적 설계가 되도록 조치하고 부득이 토취장 또는 사토장이 필요한 경우에는 최소비용으로 처리할 수 있도록 계획하여야 한다.

나) 설계자는 토공설계 시 토취장 또는 사토장을 현지에서 직접 조사하여 중간 및 실시설계 시 운반거리에 따른 비용을 내역에 반영하여야 한다.

다) 건설기계 선정시에는 토공의 규모, 토질, 작업조건 등을 감안하여 현장에 적절한 기계를 선정하여 작업성과 장비주행성을 확보토록 한다.

라) 인접부지 및 도로와 당해 사업부지 간의 고저 차이를 감안하여 계획하되 가능한 소량의 성토만 필요하도록 설계할 것.

3) 건물 내 우․오수 설계

가) 건축물 내부에서 발생되는 오수와 외부의 우수가 원활히 배제될 수 있도록  하수도 시설기준에 적합하도록 설계하여야 한다.

나) 배수시설 계획은 인접 우․오수관로, 맨홀의 위치 및 관저고, 최종 연결처리구의 용량 등을 정확히 조사한 후 설계에 반영하여야 한다.

다) 단면 결정 시 설계 최대 유량에 여유를 두어 단면을 결정하되 관거인 경우 최소관경이 200㎜ 이상이 되도록(유관부서와 사전협의) 한다.

라) 우수관 및 오수관이 지형구배상 부득이 3.0m/sec 이상일 때는 맨홀을 설치하여 낙차를 두어 유속을 상기 범위내로 유도하도록 한다.

마) 맨홀의 위치는 기점 및 구배, 방향, 내경의 변화시점에 설치하는 것을 기본으로 하며 적당한 간격으로 설치하여야 한다.

4) 도로 및 포장 설계

가) 도로구조시설에 관한 규칙 등 관련 규정을 준용하여 설계하여야 한다.

나) 도로, 주차장 등 포장두께는 이동하중 등을 감안하여 현장 여건에 따라 단면을 결정하되 동결심도를 고려한 두께 이상으로 설치하여야 한다.

다) 포장면은 우수맨홀과 연계하여 설계하여야 하며 포장면은 적절한 구배를 주어 우천 시 우수의 흐름이 원활하여야 한다.

5) 상수도

가) 상수도는 기존 인입관로를 조사하여 가장 최단거리로 설계에 반영한다.

6) 기  타

가) 부지 경계부근은 도로, 인접대지 및 구조물 등에 피해가 없도록 조치하여야 한다.

나) 옹벽설치가 예상되는 경우에는 경제적이며 합리적인 설계를 하여야 하며 구조 계산서를 첨부하여야 한다.

다) 일반적인 부지내의 비탈면의 구배는 1 : 1.5를 기준으로 하고 그 보호방법은 현장여건에 적합한 방법으로 계획하여야 하나 비탈면의 구배가 높을 경우(5m 이상)에는 반드시 사면안정해석을 실시하여 사면구배를 결정하여야 한다.

라) 사토장(또는 토취장)의 철저한 조사 및 그 결과를 내역에 반영한다.

마) 필요시 토량이동계획도를 작성한다.

바) 설계내용은 반드시 지질조사를 실시 후 그 결과를 반영하여야 한다.

다. 조 경

1) 일반사항

가) 주변조경과 연계하여 건물의 성격에 조화되도록 한다.

2) 식재계획

가) 식수의 종류는 울산시를 상징할 수 있는 나무로 선정하며, 그 외의 수종은 주변환경 및 외부공간의 성격에 적합한 식재를 선별하는 것이 바람직하다.

나) 광장, 휴식 공간 등의 주변공간에는 지반고 2m 이상의 녹음식재를 도입하여 시계를 방해하지 않도록 한다.

다) 각종 외부공간의 특징에 적합한 식수를 선택하여 외부공간의 기능에 도움이 되도록 한다.

4. 설계도서 표기

가. 설계도서에 사용하는 언어는 기술용역계약일반조건 제5조에 의한다.

나. 약어(Abbreviation)를 사용하는 경우 약어는 대문자를 사용하며 마침표로 끝나는 것을 원칙으로 한다.

다. 도면표기의 기호문자는 특별한 경우를 제외하고는 다음을 준수한다.

1) 건축도면 : A

2) 건축 구조도면 : S

3) 토목도면 : C

4) 조경도면 : L

5) 기계설비도면 : M (소화설비도면 : MF)

6) 전기도면 : E (전기소방 : EF)

7) 통신도면 : ET

라. 설계도면을 작성함에 있어서 각종 상세도면을 충분히 작성하여 수량산출 및 시공이 용이하도록 하여야 한다.

1) 각부 치수 및 사용자재의 명확한 표기

2) 각종 부착시설물의 표시

3) 건축, 기계설비, 전기, 통신 등 관련 공사와 관련하여 명확한 구분

4) 특수공법인 경우 시공방식을 이해할 수 있도록 설계도서(상세도, 특기시방서 등)를 작성

5) 국내에서 시행된 바 없는 특수공법인 경우에는 공인기관 기술검토서 첨부

마. 도면작성

1) 도면규격은 A3 규격을 사용하는 것을 원칙으로 한다.

2) 도면은 기둥 및 옹벽선과 조적선이 식별 가능하도록 표기하여야 한다.

3) 토목, 건축, 통신설비 등 도면은 발주자의 지시에 따라 동일한 축척으로 표현하여 공종간 Overlapping에 의한 대조가 가능하도록 하여야 하며, 특히 건축구조(보 등)계획과 설비배관 평면 및 건축물 천장고 계획이 상충되지 않도록 배관 설치부분에 대한 부분 단면도를 작성하여 제출한다.

4) 설계도서 작성은 국토해양부 고시 제2015-911호(2015.12.18)의 설계도서 작성기준에 의하여 작성하여야 하며, 설계도면에는 설계자, 제도자, 검수자, 확인자, 책임기술자 등 서명날인 하고 종결보고서에는 구체적으로 공종별 참여기술자의 성명, 담당업무, 기술자격, 참여기간 등 구체적으로 명시하여야 한다.

5. 기술지침

□ 공통 설계지침

가. 배치 계획 지침

1) 경관 고려

계획 시 시설의 용도, 규모 및 입지조건 등을 충분히 파악하여 효율적인 대지의 이용에 적합한 계획이 되도록 하고, 시설의 기본설계 단계에서 다음의 사항에 관하여 특히 주의하여 주변 환경과의 조화를 도모하여 양호한 경관형성에 노력한다.

가) 지역성에 대한 배려

지역의 역사적, 문화적 환경 및 자연적 환경과의 연관성을 충분히 고려하여 주변 환경과의 조화를 도모한다.

(1) 주변의 지형, 수목, 물 등의 자연 환경 가운데 연속성, 대비성 등을 종합적으로 검토하여 자연 환경과의 조화를 도모한다.

(2) 계획시설의 부지 및 주변 지역이 갖고 있는 역사, 풍토, 문화 등을 고려하여 지역 경관과의 조화를 도모한다.

(3) 양호한 가로가 확보되어 있는 경우에는 그 연속성을 중시한다. 필요한 경우에는 미래의 바람직한 모습으로 상징되는 가로와 가구가 형성되도록 노력하며 외부 공간에 통일성을 부여함으로써 양호한 경관 형성을 도모한다.

(4) 시설의 설계에 있어서는 기존 지형을 충분히 조사․활용하여 시설물의   극대화 및 효율적인 대지 활용으로 자연 환경의 보전에 노력한다.

나) 공공성에 대한 배려

이용자의 편의성을 고려하여 외부 공간이 공공성을 가질 수 있도록 한다.

(1) 건물의 후퇴(Setback), 개방 공간(Open Space)의 집약화 등 시설 계획을 고려함으로써 여유 있는 외부 공간을 확보한다.

(2) 시설 계획상 부득이한 경우를 제외하고 대지는 적극적이고 개방적인 이용을 도모하여 폐쇄적인 인상을 주지 않도록 한다.

(3) 대지의 주요 시설로의 접근 및 보행자용 통로는 신체장애자 등의 이용을 고려하여 휠체어 사용자 등의 통행에 지장이 없도록 한다.

다) 쾌적성

문화적이고 쾌적한 환경 창조와 그 쾌적성이 항구적이 될 수 있도록 사용 및 유지관리의 편의성을 도모하고 실내공기환경 개선대책 수립(친환경자재 및 환기설비의 최적 환기량 확보 등 재료 및 공법 선정)

(1) 외부 공간 설계의 경우에는 재질, 색채 등을 고려하여 건물과의 조화를  도모한다.

(2) 시설의 옥상, 벽 및 발코니 등은 경관상 중요한 부위로 건물의 형태에 따라 녹화를 도모하는 방법이 양호한 경우에는 식재 등에 의해 계획한다.

(3) 건물 내 통로는 사람과 차의 동선을 적극적으로 분리하여 보행자가 이용하기 쉽고 안전하게 한다. 또한 현관까지의 진입로는 쾌적하고 풍요로운 공간을 만들도록 노력한다.

(4) 대지의 개방적 이용을 목적으로 하는 개방 공간(Open Space)의 경우에는 주변과 조화가 되도록 예술성, 문화성의 향상에 힘쓴다.

(5) 시설 내의 조명은 야간 이용도 고려하여 필요한 조도를 확보함과 동시에 조명기구의 디자인․설치장소에 대해서도 고려하여 주위의 야간 경관에 공헌할 수 있도록 한다. 또한 시설의 용도, 외관을 종합적으로 판단하여  필요하다고 판단되는 건물에 대해서는 외관 디자인의 주요 부분을 조명함으로써 야간에 있어서의 경관을 고려한다.

(6) 항구적으로 아름답게 보전하기 위한 보전성을 고려하며, 유지관리의  용이성을 배려한 재료 및 공법을 선정한다.

(7) 건축물 내외부 색상계획은 색상 전문가를 참여토록 하여, 전체적으로 색상의 조화를 이룰 수 있도록 한다.

2) 조  경

건축법상에 의한 조경기준에 적합하게 식재하여야 하며 다중이용에 적합한 품격 높은 조경시설을 구축하고 시민의 휴게공간이 될 수 있도록 계획한다.

3) 도시적 맥락을 고려한 계획

대지 주변의 토지이용, 접근 도로망, 자연과 인공의 기회요소와 장애요소들을 고려하는 도시설계의 접근방법을 바탕으로 건물의 배치를 비롯한 교통동선, 외부 공간 등을 계획한다.

4) 지역사회의 위상을 고려한 계획

지역의 역사적, 지리적, 자연 환경적, 인문․사회 환경적 배경을 고려한 시설로서의 기능과 대 시민 서비스적 의미와 상징성을 갖도록 한다.

5) 대지에 대한 제반 법제 사항을 준수하는 계획

나. 토지 이용 계획 지침

배치계획 시 부지의 이용을 극대화하며 시설의 용도 및 지역의 필요성에 따라 적절한 공간 확보에 노력한다. 또한 근무자의 휴게, 휴식 공간 등에 관해서 고려한다.

1) 계획의 기본 지침

가) 토지이용 구분은 기본적으로 용도별 공간수요에 따르나 여기에 밝혀져 있지 않거나 설계상 필요한 세부적인 용도 구분은 설계자가 제시하여 발주기관의 승인을 받는다.

나) 건축물의 형태와 위치는 시설의 기능, 주변 도로로부터의 접근성과 주변 경관과의 관계 등을 살펴서 계획한다.

다) 이용자 및 교통수단에 따른 동선 체계를 적절히 분산하도록 하고 사용자 측에서 편리하고 쾌적한 동선 체계를 갖도록 한다.

다. 건설안전을 고려한 지침

1) 건설안전을 고려한 위험요소와 저감대책

가) 설계에서 가정한 시공법 및 절차에 의해 발생하는 위험요소기 회피, 제거, 감소되도록 하여야 한다.

나) 시공단계에서 설치되는 가설시설물의 안전한 설치 및 해체를 고려하여야 한다.

다) 깊은 지하 굴착을 최대한 배제하여야 한다.

라) 위험장소에서의 작업을 최소화하기 위해 공장제작 자재의 활용을 적극적으로 고려하여야 한다.

마) 동일 작업장소에서 시공절차가 충돌되지 않고 안전한 작업이 이루어지도록 하여야 한다.

바) 시설물의 유지관리가 용이하도록 개·보수 및 청소를 위한 전용통로, 설비의 설치 및 제거가 용이한 반입구 등을 고려하여야 한다.

사) 부서지기 쉬운 자재 활용이 최소화되도록 하여야 하며, 석명 및 석면이 함유된 자재가 사용되지 않도록 하여야 한다.

아) 해체 및 개·보수 공사 시 기존 구조물의 안전성을 확보하여야 한다.

자) 지반굴착공사의 시행시기가 장마철, 해빙기와 겹칠 경우에는 이에 대한 안정성 검토를 실시하여야 한다.

차) 건설공사 중 근로자의 안전확보를 위하여 ‘산업안전보건법’ 제23조부터 24조 까지에서 정하는 내용을 고려하여야 한다.

라. 기타 지침

1) 에너지 절약과 설비시스템

가) 계획 시 부지의 환경조건, 시설물의 용도, 규모 등을 종합적으로 판단하여 열의 손실방지, 자연채광, 자연환기 등 쾌적한 실내환경을 조성할 수 있는 패시브 디자인 개념을 충분히 활용하여 건축계획에 반영한다.

나) 에너지이용합리화법 및 지식경제부 고시에 의하여 공공기관에서는 고효율기자재를 의무적으로 사용하여야 한다.

다) 급배수 위생설비, 공기조화설비, 환기설비 등과 관련하여 적정한 용량계획, 대수분할제어, 미 이용에너지 활용, 폐(배)열 회수, 에너지절약시스템 채택 등 에너지의 효율적인 이용을 고려하여 건축물과 관련된 최적의 설비시스템을 계획하여 에너지사용의 합리화를 도모한다.

2) 건축물 사용 연한에 관한 고려

가) 사용 연한의 확보

(1) 계획 시에 건축물의 사용 기능을 검토하여 요구되는 시설의 용도, 기능의 확보에 대응할 수 있도록 한다.

(2) 계획에 있어서는 장기적인 사용 기간을 상정하여 사용 조정 및 용도 변경에도 대응 가능토록 필요에 따라 어느 정도의 융통성을 고려한다.

나) 내구성의 확보

(1) 계획 시에 건축물의 사용 연한 내 그 기능을 확보할 수 있도록 건축 구조, 설비 및 건축 비(非)구조 부재의 합리적인 내구성의 향상에 노력한다.

(2) 건축물의 구조체는 건축물의 내용 기간에 대규모 수선이 이루어지지 않도록 내구성 향상에 특별히 고려하고 건축 설비 및 건축 비(非)구조 부재에 있어서는 건축물의 사용 기간에 수차례의 대규모 수선이 필요하며, 균형 있는 수선 주기를 고려하여 합리적인 내구성을 확보할 수 있도록 한다.

3) 비용에 대한 고려

가) 경제성에 입각하여 구조, 자재, 공법, 설비 및 부대시설 등이 제시되어야 한다.

나) 각 시설에 관해 공사비의 적정한 배분을 고려한다.

다) 사후 유지관리비 등의 경제성이 비교․검토되어야 한다.

4) 기성 규격제품 사용의 촉진

건축물에 쓰이는 재료는 국산 자재의 사용함을 최대한 고려하고 KS제품을 우선적으로 사용함을 원칙으로 하되, 기타 자재는 공인된 기관에서 인정한 규격품을 선정토록 한다. 단, 외국산 자재의 사용 시에는 선정 사유 및 근거 자료를 제시하고 사후 관리 시 편의성과 교환성이 좋은 제품을 선택하되 주요 자재는 발주기관과 협의 후 채택한다.

마. 설계 세부지침

1) 육상관제센터 근무자의 관리가 용이하도록 효율적인 공간구조로 계획한다.

2) 건물 배치 및 주·부 출입구의 인지성을 높이고 간선도로에 인접한 위치적 접근성과 이용성을 고려한 부지 이용계획 및 내·외부 공간을 구성하고 특히, 방문 시 찾기 쉽고 개방적인 출입구와 도로변 소음에 대응하는 실내·외 공간을 계획한다.

3) 설비실 등의 소음 및 진동

소음 및 진동을 유발하는 곳은 그 설비실의 주변에 거실(업무)을 배치하지 않도록 한다. 부득이 배치를 하는 경우는 벽, 슬래브 및 가구의 차음 성능의 향상을 도모하고 방진에 대해 충분히 고려하며, 주변 거실(업무)에 소음 및 진동이 영향을 미치지 않도록 한다.

4) 설비 공간

덕트, 입상샤프트 및 전기/통신용 EPS는 유효한 위치에 두고, 설비의 보수 및 관리에 지장을 주지 않는 면적이 되도록 하며, 향후 변경 및 증설에 대해서도 충분히 고려한다. 또 천정 내의 덕트, 배관 및 매립형 조명기 등으로 인한 천정 공간에 대해 고려한다. 더욱이 비상용 조명의 전원이 축전지형일 경우는 방화 구획이 되는 배선 샤프트(Shaft)로 계획한다.

5) 차  음

각 실에 대한 외부 소음을 차단하고, 내부에서의 음의 반사 등을 감소키 위하여 천정 공간 부분까지 관통된 칸막이 벽 등을 설치하여 차음 성능의 향상과 흡음판 등의 설치를 고려한다.

6) 단  열

가) 지붕, 외벽 및 필로티, 차고 등의 상부 거실 등의 바닥 슬래브 단열을 고려한다.

나) 창, 출입구 등의 개구부 및 외기에 접하는 바닥의 단열을 고려한다.

7) 결  로

가) 외벽 결로 방지를 배려함과 동시에 외부에 면하는 마감면 등의 결로의 저감, 결로수 등의 처리를 고려한다.

나) 외벽에 면하는 실런트 등의 결로 방지를 도모한다.

다) 이외에 일반적인 열교 방지를 고려한다.

8) 동  해

가) 마감재는 동해를 받지 않는 것으로 한다.

나) 탕비실, 욕실 및 화장실 등의 급배수 배관은 필요에 따라 보온처리를 하고, 원칙적으로 외벽면의 배관은 피한다.

9) 채광, 조명

자연광의 유효한 이용을 검토하고, 천정, 벽 마감재 및 색채의 선정은 조명효과에 대해 고려한다.

10) 건축자재 선정 시 친환경 건축자재 선정기준 작성하여 쾌적한 실내 환경 유지

11) 설  비

신재생에너지의 적극적인 채택으로 환경보전과 에너지 이용 합리화 방안을 추진한다.

12) 기  타

가) 외부등을 계획하는 경우는 건축물과의 조화를 고려한다.

나) 설비 및 특수 용도실은 장비 반입, 장비 보수 등을 고려하여 위치를 선정한다.

다) 인접지의 건물에 대한 도시 환경학적 영향이 최소화하고 공사로 인한 피해가 없는 설계가 되도록 고려한다.

4-1		분야별 설계지침(건축,토목,조경)

□ 건축분야

가. 건축계획

1) 배치계획

가) 기본방향

(1) 부지를 최대한 효율적으로 활용할 수 있도록 건물을 배치

(2) 시설 기능의 효율성을 최대한 확보할 수 있는 배치

(3) 차량의 수, 인접 도로(출동로) 등의 여건을 고려하여 시설물 배치

나) 세부계획

(1) 일조 : 사무‧휴게공간의 쾌적성을 높일 수 있도록 적절한 일조 확보 계획을 수립

(2) 외관

(가) 창의적으로 디자인하되 과도한 외관 치장은 지양하고 내부공간 이용  효율을 높일 수 있도록 기능에 충실하며 현대적이고 참신한 디자인을 적용

(나) 시설의 조명은 시설내부의 기능에 적합하도록 유도해야 한다.

(3) 환기 : 환기시스템을 통해 시설의 냉방부하를 줄이고 시설에 좋지 않은 냄새를 배출시켜, 시설의 쾌적성을 높이고 자연환기의 개념이 도입된 시스템으로 선정

(4) 소음 : 외부 소음으로부터의 차단과 시설내부의 소음의 인근 시설에 전해지지 않도록 하여야 하며, 시설배치는 소음을 유발하는 내외부시설과   효과적 차단 고려

2) 조경 및 외부공간계획

가) 기본방향

(1) 내방객 및 지역주민을 위한 외부 휴게 공간 마련

(2) 주차장 부분 등에 대한 차음 및 차폐 식수로서의 역할

(3) 합리적 조경을 통한 시설 내부공간의 활성화

나) 세부계획

(1) 외부공간의 배치

(가) 외부공간은 시설내부의 기능과 유기적으로 연계되어 내ㆍ외부의 통합적 계획이 되도록 한다.

(2) 식재계획

(가) 수종은 주변환경 및 외부공간의 성격에 적합한 식재를 선별한다.

(나) 각종 외부공간의 특징에 적합한 식수를 선택하여 외부공간의 기능에 도움이 되도록 한다.

3) 주차계획

가) 기본방향

(1) 차량주행 동선 및 통행차량 안전을 최대한 확보할 수 있도록 한다.

4) 평면계획 및 층별 계획

가) 기본방향

(1) 각각의 시설 기능에 적합한 합리적인 계획을 중심으로 한다.

(2) 시설에 운영비를 효과적으로 절약할 수 있는 계획적 고려가 필요하다.

나) 세부계획

(1) 시설별 면적 및 계획은 발주부서와 사전협의하며, 제시된 내용을 기본으로 하면서 운영관리에 관한 설계자의 아이디어에 따라 통합, 또는 분리․강화할 수 있다.

(2) 기능별 시설 구성에 따라 각 층별,구역별 공간배치를 계획한다.

(3) 각 기능별로 성격이 유사한 실은 하나의 공간을 다용도로 활용할 수 있도록 설계

(4) 보안이 요구되는 구역을 제외하고는 가변적 벽체구획 등을 통하여 공간 활용의 유연성을 확보

(5) 환경적(소음‧환기 등)으로 타용도시설과 분리 배치가 필요한 시설은 건물 좌‧우측 등으로 구역화(Zoning)하여 계획

(6) 에너지 절약을 위한 실별, 구획별 냉‧난방 시스템 구비

다) 기타계획

(1) 옥상 및 옥외 공간을 활용한 녹지공간 조성 및 휴게시설 설치

(2) 친환경 건축자재 적극 사용

5) 동선계획

가) 기본계획

(1) 기능에 적합한 동선계획을 통한 이용효율과 편리성을 부여한다.

(2) 수평동선과 수직동선의 연계가 원활해야 한다.

나) 세부계획

(1) 각기 다른 기능의 실의 이용 동선을 단순화한다.

(2) 각 기능이 효율적으로 이루어질 수 있도록 효율적인 동선계획이 요구된다.

(3) 적절한 Core계획을 통한 동선의 단축 등 공용면적의 중복을 최소화한다.

나. 건축구조분야

1) 기본지침

가) 구조 계획은 경제성, 안전성 및 시공성을 고려하여 합리적으로 계획한다.

나) 주요 구조부위 치수를 모듈화 하고 건물 마감을 고려도록 한다.

다) 구조계산은 객관성이 있는 국내외 관계 규준을 적용하여야 하며, 적정성 여부를 발주기관의 승인을 득한 후 구조 계산에 착수하여야 한다.

라) 구조 안전은 관계법에 따라 전문가의 확인을 받고, 사용하는 건축 재료의 품질은 관계법에 의거 공인된 것이어야 한다.

마) 지반조사에 의한 시료가 지면 바닥 슬래브를 지지하기에 부적합하다고 판단될 때 바닥시스템은 건물 기초와 기둥에 구조적으로 연결되어야 한다. 바닥시스템은 시공비 및 유지관리비가 최소화될 수 있도록 고려한다.

바) 파일설계가 필요한 경우 지질조건으로부터 발생되는 추가의 부 마찰력을 고려한다.

사) 차고 등과 같이 수분 또는 염화물의 침투가 예상되는 모든 콘크리트 구조체에서는 에폭시 코팅된 철근을 사용하여야 한다. 또한 추가적인 보호가 필요할 때 방수와 씰러를 채택할 수 있다.

아) 콘크리트의 수축과 온도에 의한 균열을 고려하여 수축 조인트, 콘트롤 조인트 팽창 조인트 등을 필요 부위에 설계하고, 보강 철근을 충분히 배근하여야 한다.

자) 안내 표시판 등 유사 부속물들은 설계자의 구조 계산으로 확인하여야 하며, 보강이 안 된 조적 파라펫과 외벽에 설치되어서는 아니된다.

2) 하중의 산정

가) 고정 하중, 적재 하중, 적설 하중 및 풍 하중, 건축법 및 동법시행령, 동법 시행규칙, 건축물의 구조기준 등에 관한규칙, 철근콘크리트구조계산규준 및 강구조계산규준 등에 의거 산정한다.

나) 지진력 : 국내 실정을 조사, 분석하고 필요 시 외국의 규준 등 참고 자료 제시한다.

다) 수압 및 토압 : 지반조사보고서를 분석, 수압 및 적정 토압을 고려하여 산정한다.

3) 적용 규준 및 해석

가) 상부 구조 설계 시 적용 기준

(1) 구조 설계에 있어 허용 응력도 설계법이나 극한 강도 설계법을 사용 시 건축물의 구조기준 등에 관한규칙 및 철근콘크리트구조계산규준을 적용

(2) 외국의 관련 기준을 적용할 수 있으나 사전에 발주기관과 협의하여야 하며 구조규준 적용은 동일 규준을 일관성 있게 적용하여야 하고 여러 규준의 혼용을 피한다.

나) 하부 설계 적용 기준

(1) 기초구조계산기준 및 철근콘크리트구조계산기준(국토해양부제정) 또는 이에 상응하는 외국의 관계 기준 및 연구 보고서

(2) 직접기초(지내력 기초) : 지반 조사 결과를 이용, 토질 및 기초 구조계산근거

다) 구조 해석

(1) 해석 방법에 대한 근거를 명시한다.(참고문헌, 적용 기준)

(2) 라멘골조나 전단벽 또는 양자 혼성 구조에 있어서는 횡력 분담율을 고려하여 구조 해석을 실시, 부재 설계에 적용한다.

(3) 조건이 상이한 각종 부재에 대한 응력 해석을 실시한다.

(4) 구조체의 주단면 해석 시 전산 처리 방식에 의거 정밀해석을 실시하고 필산(筆算)을 병행하여 검사를 실시한다.

4) 구조 재료 선정

가) 주요 재료는 KS규정에 명시된 강도 및 제반 특성의 범위 내에서 시공성과 수급 여건을 감안하여 발주기관과 협의하여 선정한다.

나) 기타 재료 및 기성 제품(PC 부재, 기타) 사용 시 재료의 물리적, 화학적 특성과 구조 안전을 증명할 수 있는 자료 또는 보고서 첨부한다.

□ 토목 분야

1) 일반지침

가) 대상지 주변의 현황을 파악하여 공사에 따른 민원 검토 및 주변 구조물의 피해 예상 등을 고려하여 적절한 공법을 선정하여 설계하여야 한다.

나) 부지내의 지하에 매설된 제반 시설물의 이상 유무를 확인하여 필요한 경우에는 보강 방법을 제시하여야 한다.

다) 굴착 및 발파에 따른 소음, 먼지, 진동 등이 발생할 수 있으므로 환경보전법 등 각종 규제 조치를 초과하지 않도록 굴착 형식을 선정하여야 한다.

라) 공법의 선정은 대지여건, 지층조건, 공사목적, 공법의 경제성 및 시공성, 굴착 심도 등의 제반 여건을 종합적으로 고려하여 최적 공법을 선정한다.

2) 세부지침

가) 가설공사

(1) 지하굴토 공사를 위한 흙막이 설계는 교육과학기술부에 신고된 토질 및 기초분야 또는 토목구조분야의 엔지니어링 활동주체 또는 기술사법에 의한 해당업체의 소속 기술사가 작성하여야 한다.

(2) 지하 굴토공사를 위한 흙막이 방법의 결정 및 설계와 계산은 지반조사보고서에 의한 시험 결과와 지중 매설물, 장애물의 조사를 참고하여 작성하되 지하수 유무, 굴착에 따른 민원 검토, 주변 구조물의 피해 예상 등을 고려하여 적합한 공법을 선정하여 설계하여야 한다.

(3) 구체 공사의 시공에 영향을 주는 공법이나 인근의 대지를 이용하는 공법을 선정하는 경우에는 미리 발주기관과 협의하여 결정하여야 한다.

(4) 흙막이 설계에 따른 구조계산서의 제반 설계 정수는 지질조사 또는 지반조사결과를 토대로 관련 전문 서적 등 객관적 자료를 참고하여 작성하여야 하며 적용 근거를 첨부하여야 한다.

(5) 흙막이 시공을 위하여 필요한 계측 사항(흙막이 벽의 지보공의 변형량 측정, 토압 및 지하수위 측정 등)에 대하여는 계측기의 종류 및 설치 계획서를 별도로 제출하여야 하며, 다음과 같은 관리를 할 수 있어야 한다.

(가)지반의 거동 관리   (나)지보공 효과의 관리  (다)안전 상태의 관리

(라)근접 구조물의 안전성 및 균열진행 확인  (마)설계, 시공의 경제성 도모

(6) 재료는 구조 역학상의 하자가 없는 것을 사용하도록 하고, 재료의 허용 응력도는 관계 제법규의 규준에서 정하는 단기허용 응력도를 기준으로 하되 신‧구 재료의 사용에 따라 보정계수를 적용한다.

(7) 설계 하중은 배면 지표에서의 작업 하중, 토압 계수 등을 종합적으로 검토하여 설계에 반영한다.

(8) 굴토공사에 따른 주변 지반의 토사 이동으로 인한 지반 침하, 균열, 함몰 등의 위해현상 등이 발생할 우려가 있을 경우 차수 및 주변 토사의 이동을 방지할 수 있는 보강 대책을 강구할 수 있어야 한다.

나) 하수도

(1) 우리시 하수도정비기본계획에 의하되 기존 및 시공 중인 배수 시설을 충분히 조사한 후 우·오수량 추정과 배수 방식 및 유량 계산을 실시하되 설계 및 사업 시행에 차질이 없도록 관계 기관의 사전 협의에 만전을 기하여야 한다.

(2) 배수 시설은 우․오수 분류식으로 계획하고, 우․오수 교차 부분은 오수관로가 우수관로보다 가급적 깊게 하고 동일 경로로 계획하여 간선 배수시설까지 분류식으로 연결하여야 한다.

(3) 관거는 직선으로 부설하고 굴곡부는 예각 및 직각으로 접합을 피하며 침하되지 않도록 설계한다.

(4) 관경 최소치는 우수관 D=450mm 이상 흄관으로 하며, 오수관 D=300mm 이상 P.E계통(이중벽관, 삼중벽관) 관종으로 한다.

(5) 두개의 관의 합류하는 경우 중심 교각은 60°이하로 한다.

(6) 관거접합의 맨홀에 있어서는 하류 관거를 상류관거 보다 2cm 이상 낮게 부설한다.

(7) 관거 내의 침전과 세굴을 방지하기 위하여 관구배는 관내 유속을 1.0～1.8m에서 유지할 수 있는 적정 구배를 유지함을 원칙으로 하고 상기 기준에 미달되거나 초과 시 감독자와 협의하여 처리하되 우수는 0.8m～3.0m/sec, 오수는 0.6～3.0m/sec 범위를 초과할 수 없다.

(8) 우수 맨홀 뚜껑은 차도에는 주철뚜껑을 사용하고 보도 및 녹지에는 보도 포장재와 조화되는 재질의 뚜껑으로 하고 오수 맨홀의 경우에는 오수문자표시 제품 및 밀폐된 주철재 뚜껑을 사용한다.

(9) 오수받이는 우수가 유입되지 못하도록 밀폐된 뚜껑을 사용하여야 하며, 저부에는 하수의 흐름이 원활하게 되도록 인버트(Invert)를 설치한다.

(10) 스크린설치는 향후 유지관리가 용이하도록 기계식(스크류) 스크린으로 설치한다.

다) 포장 공사

(1) 도로 계획은 이용자의 편의를 감안, 합리적으로 계획하여야 하고 주변도로와 유기적으로 연결되어야 하며 보행자의 안전을 고려하여 보도, 가로시설물 등을 합리적으로 배치하여야 한다.

(2) 도로의 설계 및 시공은 국토해양부 제정 도로포장 설계시공지침의 규정을 충족시켜야 한다.

(3) 도로 및 광장포장 두께는 기능에 따라 적정하중 등을 감안하여 현장여건에 따른 CBR 시험치에 의거, 단면을 결정하되 동결심도를 고려한 최소두께로 설치하여야 한다.

라) 기타사항

(1) 육상관제센터와 통합성능검증센터 간 관리·운영주체 및 조성시기가 상이하여 단계별로 사업을 진행하여야 하며, 이로 인해 주변 토목정비 등이 향후 예정사업인 통합성능검증센터와 분담사항이 있을 수 있음

(2) 본 토목설계 시 주변 토목정비 등에 대한 마감계획을 반영하도록 함

□ 조경분야

조경 공사의 공종은 식재 공사, 구조물 공사, 포장 공사, 시설물 공사를 포함하며, 부수적으로는 시설물 및 구조물의 제작 설치에 따른 방수 공사, 배수 공사, 도장 공사 등의 공종을 포함한다.

1) 기본 지침

가) 조경 계획에 대한 기본 구상은 토지이용, 동선 체계, 녹지체계, 공급 처리 체계 등을 충분히 고려한다.

나) 조경면적 및 수종, 규격, 상록비율, 식재밀도, 녹지대 토심, 일조조건, 주변여건, 수목특성 및 수급관계를 고려하여 배식계획을 수립하고, 배식계획수립 시 자연배식 구조인 상층, 중층, 하층구조로 피복을 높이도록 한다.

다) 인공 지반 상부 (지하 구조물, 지하 저수조, 공동구 등)에 녹지대를 조성 할 시에는 수목생육이 가능하도록 토심 및 배수, 구조물에 미치는 토량하중 등을 검토하여 설계에 반영하여야 한다.

라) 옥외 휴식 공간은 이용자에게 정서적 안정감을 줄 수 있도록 계획하여야 한다.

마) 각종 관련 계획(토목, 전기, 건축 등)을 검토, 지하․지상구조물을 파악하여 이를 고려한 배식 및 보완 조치를 강구하고 토목포장재료 및 배수처리 관계, 가로등, 공중전화 설치 등의 계획을 수립하여 서로 상충되지 않도록 한다.

2) 세부지침

가) 식재 설계

(1) 식재의 방침, 목적, 배식 기법, 수종의 선택, 기존 수목의 활용 등을 합리적으로 고려한다.

(2) 인공 구조물 위에 조성되는 식재의 지반 조성에 대하여 고려한다.

(3) 배식계획 수립 시 자연배식 구조인 상층, 중층, 하층, 구조로 식재하여 피복률을 높인다.

나) 구조물 설계

(1) 각 구조물의 고유하고도 독특한 기능이 충족되어야 하며 인간 척도와 관련하여 심리적 압박이 배제될 수 있도록 외부 공간과 건물의 비례에 알맞은 크기를 설정한다.

(2) 구조물이 설치되는 공간의 조경 특성, 주변 환경과의 조화를 이룰 수 있는 형태와 재료를 선택한다.

(3) 기능과 형태적 특성을 발휘하면서 경제성과 실용성이 확보되어야 한다.

다) 포장 설계

(1) 공간의 기능에 따라 포장의 변화를 유도한다.

(2) 대상(帶狀)의 포장이나 선적인 형태의 포장은 방향을 표시할 때 사용한다.

(3) 포장의 폭과 줄 눈의 반복, 재료의 질감에 따라 통행 속도 및 리듬감을 조절한다.

(4) 단위 줄눈의 작고 방향성이 없는 포장 패턴은 안정감이 있어야 하는 곳에  사용한다.

(5) 대형 차량의 진출입 및 운행으로 인한 장기적인 하중에 견딜 수 있도록 차량 이동 구간은 보강하여 설계한다.

라) 시설물 설계

(1) 조경 시설물의 형태, 재료, 규격, 수량, 배치 등에 대하여 발주기관과 협의하여 결정하도록 한다.

(2) 개성 있는 형태 및 전체적으로 단순화된 디자인으로 조화와 통일성을 유지한다.

(3) 인간공학에 근거한 기능적인 스케일로 주어진 상황에 알맞은 치수를 선택한다.

(4) 다양한 시설 요소들을 분리하지 않고 가급적 집합적으로 구성하여 효율성을 높인다.

(5) 스케일, 재료, 형태에 있어서 상호 관련성을 도모한다.

(6) 통일성 유지와 경관 혼란 방지, 그리고 분위기의 안정을 위하여 시설물의  표준화, 체계화를 도모한다.

(7) 스프링클러 등 급수시설 설치를 고려하고, 지하수나 빗물 등을 이용하는 방안을 검토하여 반영한다.

(8) 시설물의 재료는 최대한 환경친화적인 자연재료를 사용한다.

마) 옥상조경

(1) 옥상 조경 시 수목생육에 적합한 별도의 계획을 세워 설계에 반영하고, 휴게 공간 등이 가능하도록 한다.

(2) 구조물의 안전도검사, 적정 토심, 식재토양, 수종선정, 일조량, 급수, 배수, 방수, 유지관리 등에 대한 사전검토를 하여야 한다.

□ 설계도서 작성요령(건축, 토목, 조경)

1. 기본설계

가. 정의

“기본 설계”라 함은 계획설계 설계내용을 구체화하여 발전된 안을 정하고, 실시설계 단계에서의 변경 가능성을 최소화하기 위해 다각적인 검토가 이루어지는 설계단계로서, 연관분야의 시스템 확정에 따른 각종 자재, 장비의 규모, 용량이 구체화된 설계 도서를 작성하여 발주자로부터 승인을 받는 단계를 말한다.

나. 일반사항

1) 당선작을 기초로 하여 작성하되 설계지침서 및 수정․보완 지시서에 따라 작성한다.

2) 실시설계의 기본적인 기준을 제시할 수 있도록 공사별로 작성되어야 한다.

3) 주요기능의 특성, 성능, 재질, 형태 등을 기술하여 실시설계에 필요한 설계기준을 제시하여야 한다.

4) 기계 및 주요장비의 용량산출과 주요구조부의 구조계산 등 구조 계획서를 작성하고 설계기준, 참고자료, 참고도면을 첨부한다.

5) Utility(기계실, 전기실, 발전기실, 저수조 등)시설은 장비 Lay-Out을 작성하여 기계·전기·소방분야와 혐의하여야 한다.

다. 현장조사방법

1) 현장조사는 관련문헌 및 서류조사와 현장조사를 병행하여야 한다.

가) 문헌 및 서류조사

(1) 기온, 습도, 강우량, 풍속, 강설, 동결심도, 지진 등 설계에 영향을 미칠 수 있는 모든 사항에 대하여 조사하여야 한다.

(2) 해당 관할관청으로부터 대지에 관련된 토지대장, 지적도, 도시계획확인원, 등기부등본, 지방자치단체 조례 등 특이한 사항을 모두 조사하여야 한다.

나) 현장조사

(1) 대지의 지상과 지하매설물, 지형의 개황, 주변 수목, 대지 내 경작물, 대지내 소음․진동, 주변 공사현장(지하수위, 토취장, 사토장, 민원사항 등)의 특징 등에 대하여 현장조사를 실시하고 전체를 확인할 수 있는 대지 전경을 촬영․보관하여야 한다.

(2) 주변과의 환경적 조화를 고려하여 주변건축물의 외관적 특징을 조사하여야 한다.

(3) 대지 주변의 건축물이나 공작물 등 공사 진행 시 영향을 미칠 수 있는 민원요인 등 모든 요인을 조사하여야 한다.

(4) 가스, 상․하수도, 오․폐수처리방법, 전기, 통신, 도로, 지역 냉․난방 등의 도시기반시설에 관한 일체의 사항을 조사한다.

(5) 현장의 대지 내 주위경계점, 레벨 등에 대하여 현장측량을 실시하고 기록하여야 한다.

다) 지장물 조사

(1) 계획부지 내 각종 지하 매설물 및 기존 건축물을 정확히 현장 및 자료를 조사하여 설계 반영한다.

(2) 철거대상 건축물과 지장물 중 이설이 필요한 시설에 대하여 해당기관과 협의하여 적정한 공사비(이설비)를 산출하여 사업비에 반영한다.

(3) 공사 시 터파기 등으로 인해 보호공이 필요한 시설들에 대하여는 해당기관과 상의하여 적절한 보호방안을 수립하여 공사 중에 손상이 없도록 한다.

(4) 조사된 지장물은 지장물 현황도에 정확히 표기되어야 한다.

2) 문헌 및 서류조사에 의하여 조사된 결과는 기본 설계 시 현장조사보고서로 작성․제시하여야 하며, 종결보고서에 첨부하여야 한다.

라. 측량조사방법

1) 측량조사는 기본 설계, 실시설계 시 측량조사 시행에 관한 세부지침을 정하여 설계의 신뢰성을 확보하는데 있다.

2) 본 지침서에 의거 조사하며 지침내용에 명기되지 않는 사항은 측량법 및 기타 관련규정에 따라 시행한다.

3) 본 지침서에 명기되지 않았으나 수급인이 설계 목적상 필요하다고 판단되는 조사사항은 그 사유를 서면 제출하여 감독자의 승인을 득한 후 실시한다.

4) 측량작업에 필요한 관계기관의 제 수속과 비용은 수급인의 부담으로 처리한다.

5) 측량은 현황측량과 경계측량을 병행하여 실시한다.

6) 측량성과품은 설계에 참조하도록 하고 실시설계완료시 함께 제출한다.

7) 인․허가(토지 사용, 진입로, 기타 시설물 이용 등)에 관한 제반사항은 수급인이 책임지며, 수급인 부담으로 이를 해결하여야 한다.

8) 조사내용 중 현장과 불일치하는 경우 수급인은 이를 수급인 부담으로 보완하여야 하며, 조사한 내용이 미비하거나 부적당할 경우 이를 보완, 수정 또는 전면 재검토한다.

마. 지반(지질)조사(별도 발주)

1) 본 과업지시서에 의거 조사하며 과업내용에 명기되지 않는 사항은 토질 및 암석시험규정, 한국산업규격 및 기타 관련규정에 따라 시행하여야 한다.

2) 수급인은 지반조사를 시행하기 전에 발주기관에 조사계획서를 제출하여야 한다.

3) 지반(지질)조사서에 포함되어야 할 사항은 다음과 같다.

- 조사개요                                - 조사위치도

- 조사계획표(조사, 시험, 보고서)            - 조사조직표

- 주요장비 및 기기                        - 특기사항

4) 수급인은 작업시행 사항을 작업일지에 기록하여 필요 시 발주기관이 확인할 수 있도록 하여야 한다.

5) 수급인은 주변의 기존 조사자료들을 수집하여 지형 및 지질특성을 파악하여 적정한 조사계획을 수립하고 본 조사의 성과분석에 참고한다.

바. 설계서 구성

1) 건 축

가) 설계보고서

(1) 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 공사금액 등

(2) 설계개요 : 지역, 지구, 구조, 규모, 건축면적, 연면적, 건폐율, 용적률, 주차면적, 조경면적, 최고높이, 층고, 층별 면적, 각층 주용도 등

(3) 현지조사사항 : 국내의 유사한 규모의 사례를 조사한 결과와 성공 및 실패 사례를 조사. 분석. 검토 내용(반영사항 표기)

(4) 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도, 도로상황 등 사전조사 시 조사내용 표기

(5) 개략공사비 산정

※ 일위대가표는 불요하나 공종별 개략내역서가 첨부되어야 공사비관리(Cost Planning)가 가능함

(6) 주요공법, 장비, 자재선정 보고서 : 대안제시, 선정사유, 예산비교 등 포함

(7) 기타 필요한 사항

나) 구조계획서

(1) 설계근거기준

(2) 구조재료의 성질 및 특성

(3) 제반하중조건에 대한 분석

(4) 각부 구조계획 : 골조의 평면, 간 사이(Span), 층고, 바닥판 구조 등

(5) 구조성능 : 단열, 내화, 차음, 진동 등

(6) 지진에 대한 고려사항 등

다) 시방서 : 실시설계의 기준이 되는 당해공사에 필요한 특기사항

라) 도면종류

(1) 부근안내도 : 방위, 도로 및 목표가 되는 지물 등

(2) 배치도 : 축척, 방위, 대지가 면하는 도로의 위치와 폭, 대지 및 도로 경계선에서 건축물까지의 거리, 담장, 옹벽, 정화조, 배수시설, 건축물의 부속시설의 위치 기타 필요한 사항

(3) 주차장 평면도 : 주차장 배치 평면, 도로 및 출입구의 위치

(4) 대지구적도

(5) 건축면적 산출표

(6) 내․외부 마감 표 : 바닥, 내벽, 천정, 외벽, 지붕 등

(7) 각층 평면도 : 각실 크기, 용도, 벽 위치, 재료, 두께 등 실시설계 기준이 되는 사항 (축척 : 1/200정도)

(8) 입면도(정면 및 측면) : 실시설계의 기준이 되는 사항

(9) 단면도(종횡 2면 이상) : 건축물의 구조를 파악하기 좋은 위치에서 종횡 2면 이상 절단하여 단면도를 표시

(10) 계단 평․단면상세도 : 실시설계의 기준이 되는 사항

(11) 각층 창호 평․입면도 : 실시설계의 기준이 되는 사항

(12) 주요 구조부 입‧단면상세도

(13) 주요 설비배관부분 천장단면 상세도

(14) 실내투시도  평면도  각종 단면도 및 상세도

투시도(컴퓨터 그래픽 이미지 2컷 이상)

(15) 기타 실시설계에 기준이 되는 필요한 도면

2) 토 목

가) 설계보고서

(1) 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 공사금액 등

(2) 계획 및 방침 : 위치선정, 주요구조물 및 수리계획

(2) 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수 등

(4) 시공방법

(5) 개략공사비 산정

(6) 기타 필요한 사항

나) 구조 및 수리계산서

(1) 구조계산서

(2) 수리계산서

다) 개략 설계내역서 : 개략 내역서, 개략 수량산출근거 기타 산출근거

라) 도면종류

(1) 위치도

(2) 종단면도 및 횡단면도

(3) 평면도

(4) 구조물도 및 부대시설도

(5) 유역산출 면적 표(반드시 배수와 연계되어야 함) 기타

3) 조 경

가) 설계보고서

(1) 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 조경면적 산출표, 공사금액 등

(2) 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상 하수 등

(3) 개략공사비 산정

(4) 기타 필요한 사항

나) 개략 설계내역서 : 개략 내역서, 개략 수량산출근거 기타 산출근거

다) 도면종류

(1) 위치도

(2) 조경계획 평면도 : 축척, 식수 평면계획, 기타 시공에 필요한 사항 일체

(3) 조경시설물 : 조형물, Pergola, Bench, 음수대, 휴지통, 전화 Booth, 안내판류 등

3. 실시설계

가. 정의

“실시설계”라 함은 기본설계를 바탕으로 하여 입찰, 계약 및 시공에 필요한 설계 도서를 작성하는 단계로서, 공사의 범위, 양, 질, 치수, 위치, 재질, 질감, 색상 등을 구체적으로 결정하여 발주자의 요구조건 반영여부를 확인하고 최종적으로 납품하는 설계의 최종단계를 말한다.

나. 일반사항

1) 기본설계를 기초로 하여 작성하되 설계지침서 및 수정․보완 지시서에 따라 작성한다.

2) 축척에 의거 정확히 도시하고 규격, 용량 등을 모두 기록한다.

3) 설계도서 작성기준에 맞게 작성하며 분야별로 수량 및 공사비를 세밀하게 산정하여야 한다.

4) 기계설비 및 주요장비의 용량산출과 구조물의 구조계산 등 계산서를 참고하여 설계기준 등을 첨부한다.

5) 납품 전에 발주자가 검토용 설계도서 제출요구 시 이에 응하여야 한다(검토용 도서 제출일자 발주자와 협의).

다. 설계서 구성

1) 건 축

가) 설계 설명서

(1) 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 설계금액 등

(2) 설계개요 : 지역, 지구, 구조, 규모, 건축면적, 연면적, 건폐율, 용적률, 주차면적, 조경면적, 최고높이, 층고, 층별 면적, 각층 주용도 등

(3) 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도, 도로상황 등 사전조사내용을 바탕으로 설계내용에 반영

(4) 세부시공방법

(5) 공사비산정(공종별 물량 및 공사비) 요약

(6) 건물의 색채사용계획

(7) 공정계획(공정표 포함)

(8) 기타 필요한 사항

나) 구조계획서

(1) 설계근거기준

(2) 구조재료의 성질 및 특성

(3) 제반 하중조건에 대한 분석

(4) 각부 구조계획

(5) 구조성능 : 단열, 내화, 차음, 진동 등

(6) 지진에 대한 고려사항 등

(7) 구조계산서

다) 시방서

(1) 당해 공사에 필요한 일반 및 특기시방서

(2) 특기시방서에는 자재의 물성, 시험방법, 시공순서 등이 모두 기술

라) 도면종류

(1) 부근안내도 : 방위, 도로 및 목표가 되는 지물 등

(2) 조감도(투시도) : 천연색채 사용

(3) 도면 목록표

(4) 배치도 : 축척, 방위, 대지가 면하는 도로의 위치와 폭, 대지 및 도로 경계선에서 건축물까지의 거리, 담, 옹벽, 정화조, 배수시설, 건축물의 부수 시설의 위치, 레벨표시의 기준이 되는 Bench Mark 기타 시공에 필요한 사항

(5) 부분배치도 : 상기배치도를 구체적으로 표시

(6) 주차장 평면도 : 주차장 배치평면, 도로 및 출입구의 위치, 폭 등

(7) 구적도

(8) 건축면적 산출표

(9) 내․외부 마감표 : 바닥, 천정, 내벽, 외벽, 지붕 등

※ 실내재료마감표는 개정된 건축법령(2015.10.05.)에 따라 건축자재 성능 및 품명, 규격, 재질, 질감, 색상 등을 구체적 표기하여야 함

(10) 각층 평면도(축척 : 1/100정도), 단위 평면도(축척 : 1/50정도)

(11) 각층 천정평면도 : 시공에 필요한 사항 일체

(12) 단열 및 방수계획도 : 시공에 필요한 사항 일체

(13) 지붕 평면도 : 시공에 필요한 사항 일체

(14) 입면도(4면) : 시공에 필요한 사항 일체

(15) 주단면도 : 구조를 파악하기 용이한 위치에서 종횡 2면 이상 표기

(16) 주단면상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

(17) 각실 단면상세도 : 시공에 필요한 사항 일체(축척 : 1/50정도)

(18) 계단 평 ․ 단면상세도 :  시공에 필요한 사항 일체

(19) 셔터, 피트, 발코니 등 부분상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

(20) 창호일람표, 각층 창호평면도, 창호상세도

(21) 각부 구조배근상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

(22) 옹벽배근도 : 시공에 필요한 사항 일체

(23) 각부 구조평면도(축척 : 1/100정도) : 시공에 필요한 사항 일체

(24) 각부 구조단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

(25) 구조부재 접합상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

(26) 각층 기둥 ․ 보위치 및 일람표 : 시공에 필요한 사항 일체

(27) 부착시설물 상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

(28) 조경계획 평면도 : 축척, 식수평면계획, 기타 시공에 필요한 사항 일체

(29) 조경시설물 공사계획 : 잔디, 휴지통, 벤치, 안내판 등

(30) 건물 색채사용계획 도면 기타 필요한 도면

(31) 기타 시공에 필요한 사항 일체

※ 입면이 달라지는 부분은 평․입․단면상세도(축척:1/50정도)를 작성하여야 한다.

마) 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격조사자료 등

2) 토목

가) 설계보고서

(1) 공사개요 : 목적, 범위, 내용, 기간, 과업수행지침, 설계금액 등

(2) 계획 및 방침 : 위치선정, 주요구조물 및 수리계획

(3) 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도 등

(4) 세부시공계획

(5) 자재사용계획

(6) 세부공정계획

(7) 세부공사비 산정 기타 필요한 세부사항

나) 구조 및 수리계산서

다) 시방서

라) 도면 종류

(1) 위치도

(2) 종단면도 및 횡단면도

(3) 평면도, 구조물도, 부대시설도 기타

(4) 기타 시공에 필요한 사항 일체

마) 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격조사자료 등

3) 조 경

가) 설계보고서

(1) 공사개요 : 목적, 범위, 내용, 기간, 과업수행지침, 설계금액 등

(2) 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도 등

(3) 세부시공계획

(4) 자재사용계획

(5) 세부공정계획

(6) 세부공사비 산정 기타 필요한 세부사항

나) 시방서

다) 도면 종류

(1) 배치도

(2) 종단면도 및 횡단면도

(3) 평면도

(4) 조경시설물 배치도

(5) 기타 시공에 필요한 사항 일체

라) 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격조사자료 등

4-2		분야별 일반설계지침(기계·소방,전기,정보통신)

□ 기계․소방분야

【일 반 사 항】

가. 본 과업은 과업지시서에 의한 기계설비공사 일체의 설계도서 작성을 그 범위로 하며, 이에 수반되는 관련조사 및 관련심의, 협의에 필요한 도면과 구비서류, 기타 본 용역에 관한 각종보고 및 제출 자료의 작성 등, 발주기관이 업무와 연관되어 필요하다고 인정하여 지시하는 일체의 사항을 포함한다.

나. 본 과업을 수행함에 있어 과업지시서에 명기되지 아니한 사항은 발주기관과 수급인의 협의 하에 수행하며 이견이 있는 경우는 수급인은 발주기관의 의견에 따라 성실하게 수행한다.

다. 실시설계는 기본설계에서 설명은 되었으나 도서화 되지 못한 사항 등을 공사시행에 필요한 설계도서로 작성하는 것을 말하며 이 도서는 실시설계 완료 전에 건설기술심의위원회 심의절차, 건축법의 절차, 건축위원회의 심의절차(에너지절약 계획서의 심의포함) 등을 거쳐 확정된다.

1) 설계설명서

2) 일반 및 특기시방서

3) 설계도면

4) 설계내역서(내역서, 일위대가표, 수량산출근거, 단가산출근거, 각종계산근거 등)

5) 각종 장비용량계산서

6) 실시설계 종합보고서

7) 기타 울산정보산업진흥원에서 요구하는 사항

3. 설계일반지침

가. 일반사항

1) 경제적이며 효율적인 에너지 절약형시스템으로 설계한다.

2) 각종장비는 유지관리 및 보수의 용이성을 고려하고 주요장비(배수펌프 등)에 대하여는 고장 및 비상시를 대비하여 복수화한다.

3) 각 실별 적용설비는 용도에 따라 냉․난방․급수․급탕․환기시설을 고려하여야 한다.

4) 냉․난방부하 계산은 전문기술자에 의한 정확하고 적정한 설계가 되도록 고려한다.

5)「신에너지 및 재생에너지 개발･이용･보급 촉진법」제12조 및 동법시행령 제15조의 규정에 의거 설치 의무기관(연면적 1천제곱미터 이상)에 의한 신에너지 및 재생에너지 설비를 설계에 반영하여야 하며, 천공 등 제반비용(지열이용검토서)은 계약자 부담으로 한다.

6) 에너지 사용기자재는 에너지이용합리화법 제22조 규정에 의한 『고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정』(산업통상자원부고시 제2018-244호)을 참고하여 고효율에너지 기자재를 설계에 반영하여야 한다.

7) 에너지이용합리화법 제8조에 따른 『공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정』(산업통상자원부고시 제2017-013호) 제10조를 참고하여 에너지 수급 안정 및 효율향상을 위한 전력수요관리시설을 반영하여야 한다.

8) 물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률 제8조 및 동법시행령 제10조에 따른 빗물 이용시설을 반영하여야 한다.

9) 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법 제12조 및 동법 시행령 제11조에 따른『중소기업자간 경쟁제품 및 공사용자재 직접구매 대상품목 지정내역』(중소벤처기업부고시 제2018-70호)를 참고하여 공사용자재 직접구매 대상품목을 반영하여야 한다.

10) 위생기구는 수도법 제15조 및 동법시행령 제25조 규정에 의한 절수설비를 반영토록 한다.

11) 열사용기자재는 에너지이용합리화법 및 산업통상자원부 열사용기자재 관리규칙에 적합하도록 설계에 반영하여야 한다.

12) 사용자재는 국내생산품 중 KS품 및 최고품 사용을 원칙으로 한다.

단, 국내에 생산이 되지 않는 자재의 경우에는 사용계획, 사용처 및 사유를 밝히고 이와 대체할 수 있는 국내제품과 비교 검토하여 발주기관의 의견에 따라 적용한다.

13) 기기의 설치는 소음 및 공해가 관련규정에 적합한 구조로 하여야 한다.

14) 급수시설은 건물옥상의 저수조로 펌핑하여 하향 공급하는 방식과 펌프 직송방식 또는 직수방식을 비교, 검토하여 설계에 반영하여야 한다.

(저수조는 수도시설의 청소 및 위생관리 등에 관한 규칙에 적합하게 설계)

15) 급수관로는 동파가 되지 않도록 하고 동파의 우려가 있는 부분은 퇴수밸브를 설치하거나 동파방지설비를 하여야 하며, 급수장치 및 변기 후레쉬 밸브는 절수장치로 설계에 반영한다.

16) 급탕설비는 화장실 등에 시설하며 이외의 장소에도 급탕설비가 필요하다고 인정되는 곳은 급탕설비를 고려하여 중앙저탕식과 개별순간식을 비교 검토하여 감독관 협의 후 설계에 반영한다.

17) 오․배수배관은 분리배관을 원칙으로 하고, 배수시 발생되는 소음 및 진동을 최대한 방지하여야 하고 통기를 원활히 하여야 한다.

18) 본 지역이 도시가스 공급가능여부를 관련기관에 협의하여 열원기구를 결정하여야 한다.

19) 상수도설비에 대하여는 관련부서와 인입가능여부 및 공급가능용량을 협의하여 설계에 반영하여야 한다.

20) 화장실의 위생기구는 KS품을 사용함을 원칙으로 하며 수도법에 따른 절수기구를 설계에 반영토록 하고 소변기는 전자감응식 세척장치를 설치하도록 설계한다.

21) 난방 및 급수관은 동관, 스테인레스관, 염화비닐코팅강관, PP관 또는 동등이상의 기능을 갖는 재질을 비교 검토하여 감독관과 협의 후 선정하여야 한다.

22) 오․배수배관은 KSD-4307(주철관) 또는 동등이상의 기능을 갖는 재질로 한다.

23) 지하층배수펌프 용량 및 관리공간을 적정규모로 설치될 수 있도록 설계하여야 한다.

24) 실외기 위치는 소음 진동에 특히 유의하여 소음으로 인해 근무자 또는 작업자가 방해를 받지 않도록 저소음으로 계획하고, 실내 또는 시설을 이용하는 이용객들에게 불편을 주지 않도록 배치 및 시설계획을 철저히 하도록 한다.

25) 각 실별 용도를 정확히 파악하여 용도에 맞는 설비를 적용하여야 한다.

26) 배관은 안전 및 기계성능에 지장이 없는 한 배관높이를 적절한 높이로 설계하여 유사시 밸브를 개폐하는데 신속하게 접근하여 개폐할 수 있도록 하여야 한다.

27) 오․배수 분류지역 여부를 관련기관과 협의하여 용도에 맞는 설비를 설치하여야 한다.

28) 냉․난방설비(중앙식, 개별식)에 대하여는 실의 정확한 용도, 사용자의 편리성, 유지관리비, 면적 등을 종합 비교 검토하여 신․재생에너지 설비와 연계한 설비를 감독관과 협의 후 적정설비를 적용하여야 한다.

29) 동파의 우려가 있는 장소에는 동파방지설비를 설치하여야 한다.

30) 바닥 난방이 필요할 경우 보일러 등 다양한 방법을 비교검토하여 설계한다.

31) 환기설비가 필요한 경우 강제환기, 자연환기 등 원활한 환기와 에너지를 고려하여 설계에 반영하여야 한다.

32) 모든 설비는 효율, 기능, 안전을 고려하여 설계하여야 한다.

33) 본 설비에 대한 건축평면 변경 등 기타 사유로 인한 변경요인이 발생시에는 지체 없이 설계에 반영하여야 한다.

34) 제3자 단가계약, 다수공급자 계약, 우수조달물품, 특허ㆍ신기술 등에 의한 특정업체의 자재, 물품 선정이 불가피한 경우에 대하여는 세부 검토내용 등 근거자료를 제출하여야 한다.

- 특징, 장단점, 가격, 적용사례, 하자발생사례 등 자재(물품) 선정근거 제시(비교표)

- 제3자 단가계약, 우수조달물품 등 수의계약이 가능한 관급자재를 사용하고자 할 경우에는 세부 검토내용 등 근거자료를 제출하여야 한다.

35) 기타 필요한 사항은 발주기관과 협의하여 설계에 반영하여야 한다.

나. 세부사항

1) 공기조화설비

① 공기조화설비, 적정 공조방식 대비선정

② 공기의 온도, 습도 조정 / 각 실의 환기설비에 대한 검토 설계

2) 냉·난방 및 열원설비

① 에너지절약 및 유지관리가 용이하고 경제적인 시스템 채택

② 냉. 난방 부하계산, 폐열이용, 전열교환 등에 대한 검토 설계

③ 건물의 기능, 특성 및 거주인에 대한 쾌적한 환경조건 제공

④ 신․재생에너지(지열) 이용 건축물 냉․난방부하 적용검토 설계

⑤ 신․재생 에너지시스템 적용조사 : 비용은 계약자 부담으로 한다.

3) 위생설비

① 오, 배수 및 통기설비는 위생상의 문제점, 시공성 등을 감안설계

② 위생기구는 시설규모에 적절하게 선정

4) 급수설비 : 위생적인 냉수 또는 온수를 오염시키지 않고 충분하게 공급

5) 배수설비 : 전체 배수설비 계통 검토

6) 급탕설비

① 급탕장치 검토

② 신․재생에너지 이용 급탕설비 적용에 대한 검토 설계

7) 자동제어설비 : 각 시설의 조작, 관리, 통제가 용이하고 경제적 운용이 되도록 설계

8) 오폐수 정화설비 : 오･폐수량, 수질, 처리방식 결정의 적정여부 검토 설계

9) 주방기구설비 : 주방기구 선정 및 설비에 대한 검토

10) 환기설비 : 환기시설에 대한 열손실 보전장치 검토

11) 가스(도시가스, LPG)설비

① 설계유량 및 관경의 적정여부 검토 설계

② 가스배관의 점검 보수가 용이하도록 설계

12) 방음 방진설비 : 각종기기의 소음과 진동에 대한 방지대책 강구

다. 설계기준

1) 공사개요 : 위치, 규모, 공사기간, 공사금액 등

2) 주요설비

① 개요

② 세부시공계획

③ 세부공정계획

④ 에너지절감 및 유지관리에 관한사항

⑤ 기타 필요한 사항

3) 기계설비 : 공기조화설비, 냉난방설비, 열원설비, 위생설비, 급배수설비, 급탕설비, 자동 제어설비, 오폐수정화설비, 급․배기(전열교환)설비, 도시가스･LPG설비, 방음방진설비, 승강설비 등

① 개요

② 세부시공계획

③ 세부공정계획

④ 세부공사비

⑤ 에너지절감 및 유지관리에 관한사항

⑥ 설계도면

○ 일반사항 : 범례, 도면목록, 기계기구 일람표(수량, 용량, 기타사양 포함)

○ 배치도 : 기본 설계시 표기된 사항을 구체화한 내용

○ 계통도 : 주요기계설비 및 유틸리티 설비의 자동제어시스템, 공기조화, 급배수(급탕 포함)등 기타설비의 세부계통도

○ 평면도 : 각종설비평면도, 기계실 확대 평면도

○ 기계실 입체배관도

○ 단면도 : 각종설비의 기준층 및 특수층에 대한 주요단면도, 기계실단면도

○ 옥내(외) 공동구 상세도 : 각종설비 및 상세도

⑦ 설계내역서

○ 공사비원가 계산은 원가계산에 의한 예정가격 작성 준칙의 공사원가계산 방식에 의거 작성한다.

○ 공사비 적산은 정부표준품셈, 정부노임단가, 울산광역시 건설공사 설계지침 등에 의거 산출하되 아래와 같이 사전조사 및 판단하여 적산하여야 한다.

ⲻ 재료단가조사

㉮ 본 공사에 소요되는 모든 자재는 각 품목, 품질 및 규격별로 조사한다.

㉯ 단가는 조달청에서 고시하는 자료를 우선 적용하고 이에 누락된 품목은 일반 시장조사를 하되 공신력이 가장 뛰어나다고 판단되는 시중물가 자료 책자등과 직접 시장조사 된 2개 이상의 견적서 등에 의한다.

㉰ 공사자재단가 결정은 거래 실제가격에 기준한다. 단, 재료 및 자재 단가에 운반비가 포함되어 있지 않은 경우 구입 장소로부터 현장까지 운반비를 계산할 수 있다.

ⲻ 수량산출

㉮ 수량 산출시 기준에 명시되지 않은 사항은 당해공사의 목적에 부합하도록 적의 결정하여 적용한다.

㉯ 공사규모, 내용, 공기 및 현장조건 등을 고려하여 기계장비 등 경제적이고 합리적인 선정으로 예산낭비가 발생되지 않도록 하여야한다

㉰ 사용단위는 SI단위로 하되 소수점이하 2자리까지 하고 끝수는 반올림 한다.

㉱ 위의 모든 수량산출에 관한 것은 착오가 없도록 하여야 한다.

ⲻ 주요자재

㉮ 주요자재 구입에 따른 시방서를 작성하고 그 자재의 기능, 특징, 용량, 제작 방법, 부속품 등에 관하여 명시하여야 한다.

㉯ K.S에 없는 제품 사용시 공사조건에 맞는 관련규격 및 시방서(외국규격 등) 등을 검토하여 동등 이상의 재품을 사용토록 한다.

㉰ 주요자재는 울산광역시 재무회계 규칙에 따라 운용 관리하는데 지장이 없도록 하고 설계도서를 작성하여야 한다.

⑧ 설계계산서

○ 설비사양 및 용량계산서, 선정서

○ 주요 유틸리티 설비의 용량계산서 및 선정서

⑨ 시방서

○ 일반시방서 : 공사 시행상 유의하여야 할 일반적인사항을 명시

○ 특기시방서 : 일반시방서에 기술되지 않는 내용으로 공사 집행상 특별히 유의하여야 할 내용을 명시

○ 자재시방서

ⲻ 사용하고자 하는 기자재의 특성, 정격, 운영방법, 제작조건 및 기준 등의 제규격을 명시

ⲻ 기타 설비 특기시방서(오폐수 정화설비 등)

⑩ 설계 종합보고서(설명서)

○ 본 종합보고서는 기본설계에서 실시설계 완료까지의 모든 과정에 걸쳐 논리적, 사실적, 기술적으로 작성되어야 하고 구조물의 특성과 용도의 개념을 명확하게 기술하여야 하며, 관리운영에 관한 사항과 각 실면적 및 기능과 시설개요 등 각 주요 실별로 작성하여 사용자의 편의를 도모하게 해야 한다.

○ 보고서 내용은 공사수행에 이용할 수 있는 모든 자료가 포함된 종합보고서 이여야 하며 다음 사항을 상세히 수록하여야 한다.

ⲻ 과업의 목적

ⲻ 과업의 내용

ⲻ 사전 조사내용 요약

ⲻ 설계기준

ⲻ 설계안별 검토 내용

ⲻ 세부설계내용(공종별 비교검토 내역 포함)

ⲻ 기타 참고자료

라) 특기사항 : 기계설비 설계자 참여자격요건

엔지니어링산업 진흥법 제21조의 규정에 의한 엔지니어링사업자의 신고 또는     기술사법 제6조의 규정에 의한 기술사사무소를 개설한 자로 한다.

□ 전기분야 과업지시서

□ 과업내용

1. 과업범위(설계범위)

가) 본 과업은 울산정보산업진흥원(이하 “발주기관” 이라 한다)과 용역수급자(이하 “수급인” 이라 한다)가 체결한 용역계약서 및 본 과업지시서에 의한 전기 및 소방 설비 등 일체의 설계도서 작성을 그 범위로 하며, 이에 수반되는 관련조사 및 전기 관련심의, 협의에 필요한 도면과 구비서류, 기타 본 용역에 관한 각종보고 및 제출 자료의 작성 등, 발주기관이 업무와 연관되어 필요하다고 인정하여 지시하는 일체의 사항을 포함한다.

나) 본 과업을 수행함에 있어 과업지시서에 명기되지 아니한 사항 또는 오류에 관해서는 발주기관과 수급인 간의 협의에 따라 수행하며 이견이 있는 경우는 발주기관의 의견에 따른다.

2. 과업기간

본 과업의 기간은 별도의 계약기간으로 하며 수급인은 동기간 내에 성과품을 납품 완료하여야 한다. 단, 설계용역 완료 후라도 설계용역과 관련한 각종 협의업무, 설계심의 및 관련 자료의 제출과 설계미비 및 하자에 대하여는 그 내용이 완료될 때까지 별도 수행하며, 다음 경우에는 발주기관이 별도로 정하는 감독자의 승인을 득하여 과업수행기간을 연장할 수 있다.

(1) 천재지변으로 인하여 용역수행이 불가능한 경우

(2) 발주기관의 방침에 의하여 과업시행이 중단되었을 경우

(3) 발주기관의 사업계획 변경으로 과업내용이 변경되었을 경우

3. 설계시 고려하여야 할 사항

1) 기본설계검토 : 관련부서 협의 및 관계자 및 시설운영자 의견 검토 반영

2) 기타 본 용역에 관한 각종 보고 및 제출 자료의 작성 등 발주기관이 업무와 연관되어 필요하다고 인정하여 지시하는 일체의 사항

4. 과업수행 조건 등

가. 착수신고서 등 제출서류

1) 착수신고서 / 계약일로부터 7일 이내 제출

가) 착수신고서 / 붙임 참조

- 사업 책임기술자 선임계 (이력서, 기술자 면허수첩 사본 첨부)

- 예정공정표

- 용역비 산출내역서

- 설계용역수행 조직표

나) 공동도급시 용역 대표사 선임 및 사업 총괄책임기술자 지정

다) 설계용역 참여기술자 현황

라) 각 공종(전기 및 소방)의 분야별 참여기술자 보안각서

마) 기타 용역 수행에 필요한 사항

바) 각 관련주체(전기 및 소방 등)간의 업무범위와 책임한계 지정

2) 목표예산을 고려한 설계 계획

가) 발주기관이 예측할 수 없었던 공사비의 과도한 증액이나 부실설계 및 시공시 설계변경에 의한 공사비 증액이 발생하지 않도록 수급인은 초기단계부터 예측 가능한 설계를 위해 전문분야별 설계용역 협력업체와의 긴밀한 협조체계를 구축하여야 한다.

나) 예산 범위 내에서 설계가 추진될 수 있도록 업무협의 및 중간검토 단계별로 추정공사비를 과학적, 합리적인 방법으로 산출하여 발주기관의 승인을 득하여야 한다.

3) 수급인은 필요 시 다음 제반 서류를 제출하여 승인을 득하여야 한다.

가) 용역 기성부분 검사원

나) 준공기한 연기원

다) 준공 검사원

라) 기타 용역 수행에 필요한 사항

5. 공정보고 및 업무협의

1) 공정보고

가) 설계자는 설계진행 중 수시로 진행사항을 보고하여야 한다.

나) 설계용역 진행 중 문제점이 발생할 때에는 이를 분석하여 보고하여야 한다.

3) 업무협의

가) 설계자는 설계진행과 관련해 발주자와 협의하고자 하는 경우에는 책임기술자로 하여금 협의하도록 하여야 한다. 단, 세부적인 공종별 설계내용에 대하여는 분야별 책임기술자가 협의할 수 있다.

나) 본 과업지시서에 제시된 내용이 불분명 또는 명시되지 아니한 경우에는 설계자 임의로 해석할 수 없으며 발주자와 협의하여 결정하여야 한다.

다) 설계자는 각종 회의가 필요할 경우 회의장소와 참석범위 등을 협의하고 회의에 필요한 자료의 작성하고 회의에 배석하도록 한다.

라) 착수협의는 착수일 또는 착수일로부터 10일 이내에 하고, 이후 다음의 업무 절차 추진 전 반드시 감독관과 협의 후 진행한다.

□ 조사 및 자료 수집 완료 또는 사용자의 요청사항 발생시

□ 실시설계 완료시

□ 성과품 작성 시

□ 공정보고 시(필요시)

□ 준공 시

※ 수시회의 : 설계진행 중 문제점이 발생하거나 실시설계보고 등으로 수시회의를 개최할 경우 이에 필요한 자료를 작성․배부하여야 한다.

6. 기타 사항

1) 설계변경 및 조정

설계진행 중 발주기관이 필요하다고 인정하여 설계내용 변경 또는 수정을 요구할 시 수급인은 정당한 사유 없이 이를 거부할 수 없으며, 지체없이 이를 이행하여야 한다.

2) 감 독

수급인은 모든 설계과정에서 발주기관이 지정하는 감독자의 지시 감독을 받아야 한다.

3) 관계법령 준수

수급인은 설계내용이 건축법, 주차장법, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 도시계획관련 법률, 건설기술 진흥법, 소방기본법, 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률, 전기사업법, 전력기술관리법, 에너지이용 합리화법, 전기통신기본법, 전파법, 정보통신공사업법, 청소년 기본법, 장애인복지법, 노인복지법, 장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률, 공중화장실 등에 관한 법률, 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법, 울산광역시 조례, 공연장 무대시설 안전진단 시행세칙 등 기타 관련 법규 및 제반규칙 등 관계법령에 위배․저촉되지 않도록 설계용역 과업을 수행하여야 한다.

4) 용역비 정산

가) 본 과업 수행 중 발주자의 사업계획변경 등에 따라 과업내용의 변경 등이 발생될 경우에는 본 과업의 일부 또는 전부를 중지하고 정산처리 하거나 과업의 범위를 조정 변경할 수 있다.

나) 수급인의 귀책사유로 감사지적에 따른 변상요구가 있을 경우 수급인은 발주기관이 정하는 기일 내에 이를 환불하여야 하며, 이에 대하여 어떠한 이의도 제기할 수 없다.

5) 수급인은 착수와 동시에 작업일지를 작성한다.

6) 용역사업 참여자 변경은 원칙적으로 불허한다. 단, 질병, 퇴직, 기타 발주기관이 인정하는 사유로 교체시 에는 경력 및 자격 동등 이상의 자를 선정하여 사전에 반드시 발주기관 승인을 받고 교체하여야 한다.

7) 설계내역서 작성은 단위공사당 일위대가표를 만들고, 그 일위대가표에 산출수량을 곱하여 순공사비를 집계하는 방법으로 하여야 한다.

8) 본 용역 성과품으로 제출되는 설계도서의 양식 및 글씨체는 통일하여 제출하여야 한다.

7. 세부 설계 내용

가. 설계 범위

1) 전기설비분야 설계

가) 전등 및 전열 설비, 분전반

나) 동력설비

다) 수전 및 배전설비

라) 비상용 예비전력 설비, 태양광 설비

마) 자동제어 설비

바) 외등설비

라) 신재생 에너지 설비

사) 기타 건축물 신축과 관련한 전기설비

나. 설계 기준

1) 관련 법규

가) 전력기술관리법 제11조(전력시설물의 설계도서의 작성 등) 및 동법 시행규칙 제16조(설계도서의 작성기준)의 규정에 의하여 산업통상자원부장관이 승인한 작성기준에 의한다.

나) 건축, 기계, 토목 등 타분야 설계내용과 상이함이 없도록(누락․중복 등) 작성한다.

다) 전기설비기술기준, 내선규정, 한국전력공사 전기공급약관, KSC IEC 규정, KS 규정, 기술계산참고서적 등을 참고하여 작성하여야 한다.

라) 수급인은 설계내용이 건축법, 주차장법, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 도시계획관련 법률, 건설기술 진흥법, 소방기본법, 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률, 전기사업법, 전력기술관리법, 에너지이용 합리화법, 청소년 기본법, 장애인복지법, 노인복지법, 장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률, 공중화장실 등에 관한 법률, 울산광역시 조례 등 기타 관련 법규 및 제반규칙 등 관계법령에 위배․저촉되지 않도록 설계용역 과업을 수행하여야 한다.

2) 설계도면 작성 시 특기사항

가) 설계 시 작성된 건축과 기계설비등 제반설계 내용과 부합되도록 상호 협의하여 작성한다.

나) 평면도는 반드시 전등, 전열, 동력, 간선, 소방구분 각각 별도로 작성한다.

다) 주요한 부분은 반드시 상세․평면․단면․부분 상세도를 작성한다.

라) 배전반 및 분전반 결선도 내부 및 외부 상세도를 작성한다.

마) 평면도에서 표시 및 식별하기 곤란한 부분은 취부 상세 및 부분 상세도를 작성한다.

바) 모든 설계도는 전기 관련 법규 및  기타 해당 규정에 위배되지 않도록 한다.

사) 본 건물의 부하분배는 전등(일반동력 포함) 3상 380V/220V 간선을 인입한다.

아) 각 실 조명은 전반조명으로 하고 조명은 특성에 따라 등기구 및 램프를 결정한다.

자) 공사자재의 선정

(1) 본 사업에 투입되는 각종 자재와 부품은 국내 생산품의 반영을 최대한 고려하고, KS제품과 고효율 인증제품이 있는 경우 이를 우선 사용함을 원칙으로 하며, 기타 자재는 공인된 기관에서 인정한 규격품을 선정하도록 한다. 부득이, 외국산 자재 사용 시에는 선정사유 및 근거자료를 제시하고 사후관리 시 편의성과 교환성이 좋은 제품을 선택하되 주요자재의 수량, 단가, 금액 등은 발주기관과 협의 후 채택한다.

(2) 인체에 유해한 물질(예 : 석면 등)이 함유된 자재는 사용하여서는 아니 된다.

하) 기타사항

(1) 각종 자재 선정의 장단점 대비 검토 설계

(2) 전력선과 통신선 이격 관계로 유도장애 여부 검토

(3) 전기, 통신, 방재용 전원 및 접지설비 일체

다. 설계도서 작성 기준

1) 공사시방서

가) 시방서는 일반사항 및 특기사항으로 구분하고, 시방사항을 설계도면에 따라 해당 공종 누락됨이 없이 상세하게 작성한다.

나) 다음사항을 참고하고 초안을 만든 후 감독관의 승인을 받아 인쇄 제출한다.

(1) 국토교통부 제정 건축전기설비공사 표준시방서 등 공인 표준시방서 외에 도면에 표기하기 힘든 내용의 각종 기기의 설치기준, 설치방법, 주의사항 등을 명기 한다. 단, 필요한 때에는 일반적인 내용과 특별한 내용을 분리하여 작성할 수 있다.

(2) 공사의 범위, 준공기한 등의 기타 시공조건 등을 설명한다.

2) 수량산출서, 일위대가표, 공사비내역서

가) 수량산출서는 국토교통부 제정 적산기준에 의하여 산출하되 제3자가 보더라도 쉽게 알아볼 수 있도록 상세하고 체계적으로 정확히 각 항목별로 보기 및 명칭을 붙여 작성한다.

나) 내역서 및 일위대가표

(1) 설계내역서 작성은 단위공사당 일위대가표를 만들고, 그 일위대가표에 산출수량을 곱하여 순공사비를 집계하는 방법으로 하여야 한다.(공량산출서 대체금지)

(2) 정부기관에서 제정한 표준품셈에 의하고 자재단가는 국내에서 공인받은 물가조사 기관의 월보에 의하되 특수한 것은 3인이상 견적서를 첨부 최소금액으로 하고, 노임은 당시의 노임단가를 기준으로 한다.

(3) 예정공정표

공정표는 공정계획을 수립하여 공사량에 맟게 공사기간을 산정하여 작성․제출하여야 한다.

□ 정보통신분야 과업지시서

□ 과업내용

1. 기본설계

울산정보산업진흥원에서 제시하는 기본요소의 재원과 과업지시서의 내용 및 각종 자료를 참고하여 수용 면적, 구조 및 부대시설 등 제반 소요기능에 알맞은 건물배치, 평면배치, 기타 계획도서를 작성하여 발주기관과 협의 후 기본설계도서를 작성하여 별첨 기본설계 납품명세서에 따라 설계도서를 제출한다.

(가) 통신부분 기본설계

1) 접지설비 설계

2) 정보통신공사법에 의한 전화 및 LAN 기본설계

3) 전파법에 의한 MATV, DTV, CATV설비 기본설계

4) 건물 사각지대에 CCTV 기본설계

5) 실 용도에 맞게 방송 기본설계

6) 주차관제설비(필요시)

7) 기타(출입통제 시스템 및 스피드도어 필요시)

2. 실시설계

기본 설계를 바탕으로 세부적인 접지설비, LAN, 공시청, CCTV, CA/MA/DTV, 방송설비를 작성하여 실시설계 납품명세서에 따라 설계도서를 제출한다.

(가) 통신부분 실시설계

1) 접지설비 실시설계

2) 정보통신공사법에 의한 전화 및 LAN 실시설계

3) 전파법에 의한 공시청 및 CA/MA/DTV설비 실시설계

4) 건물 사각지대에 CCTV 실시설계 및 보안설비(카드키 등 필요시)

5) 실 용도에 맞게 방송 실시설계

6) 주차관제설비(필요시)

7) 기타

3. 과업지시

(가) 통신 설비설계

1) 각실의 용도를 고려하여 전화, LAN, CA/MA/DTV, CCTV, 방송 설비를 적정하게 배치한다.

(나) 공사시방서

1) 시방서는 일반사항 및 특기사항으로 구분하고, 시방사항을 설계도면에 따라 해당 공종 누락됨이 없이 상세하게 작성한다.

2) 다음 사항을 참고하고 초안을 만든 후 감독관의 승인을 받아 인쇄 제출한다.

㉮ 국토교통부 제정 건축전기설비공사 표준시방서 등 공인 표준시방서 외에 도면에 표기하기 힘든 내용의 각종 기기의 설치기준, 설치방법, 주의사항 등을 명기한다. 단, 필요한 때에는 일반적인 내용과 특별한 내용을 분리하여 작성할 수 있다.

3) 공사의 범위, 준공기한 등의 기타 시공조건 등을 설명한다.

(다) 수량산출서, 일위대가표, 공사비내역서

1) 수량산출서는 국토교통부 제정 적산기준에 의하여 산출하되 제3자가 보더라도 쉽게 알아볼 수 있도록 상세하고 체계적으로 정확히 각 항목별로 보기 및 명칭을 붙여 작성한다.

2) 일위대가표 및 공사비 내역서

국토교통부 제정 표준품셈에 의하고 자재단가는 국내에서 공인받은 물가조사 기관의 월보에 의하되 특수한 것은 2인 이상 견적서를 첨부 최소금액으로 하고, 노임은 당시의 노임단가를 기준으로 한다.

3) 상기사항은 울산정보산업진흥원 담당자와 사전검토와 협의를 가져야 한다.

4. 과업내용

- 설계도서에는 다음 분야별 서류와 도면을 작성하고, (  )안의 내용이 빠짐없이 포함되도록 한다.

- 기본설계(조사 및 계획포함) 및 실시설계는 설계심의에 합당한 규격․필요도서를 제출하며, 발주기관 요구시 모든 작업 근거자료를 제시하여야 한다.

가) 통신 설비 분야

1) 기본 및 실시설계 설명서

2) 기본 및 실시설계 시방서

3) 기본 및 실시설계 도면

4) 기본 및 실시설계 내역서

나) 통신설계도면 작성시 특기사항

1) 설계시 작성된 건축과 기계설비등 제반설계 내용과 부합되도록 상호 협의하여 작성한다.

2) 평면도는 반드시 방송, 전화, LAN, TV, CCTV, 방송설비를 구분 각각 별도로 작성한다.

3) 주요한 부분은 반드시 상세․평면․단면․부분 상세도를 작성한다.

4) 평면도에서 표시 및 식별하기 곤란한 부분은 취부 상세 및 부분 상세도를 작성한다.

5) 전화 국선단자함은 통신실, 경비실 또는 관리실등 적정한 곳에 설치한다.

6) 각 실에는 출입통제, TV․전화․LAN 수구를 적절히 설치한다.

7) 방송 및 CCTV는 관리사무실 또는 경비실과 안내데스크에서 콘트롤할 수 있어야 한다.

다) 상세통일

본 공사의 설계는 전체적으로 통일성 있게 처리되어야 하며, 각종 상세부분을 사전에 감독관에게 제출하여 승인을 받은 후, 본 설계도면을 작성한다.

5		설계도서 납품목록

1. 기본 설계 납품도서

구 분		규격	지 질	수량 (부)	비 고
기본설계서	ㆍ기본설계보고서(총괄) (구조계획, 관련법규 검토서 등 포함)	A4	백상지	3	ㆍ양면인쇄 좌철제본
	ㆍ에너지절약계획서	A4		3
	ㆍ계산서 (구조, 토목, 기계, 전기, 정보 통신, 토목, 소방 등)			3
	ㆍ공사비내역서(개략)			3
기본설계도면	ㆍ건축계획 ㆍ건축구조 ㆍ기계 ㆍ전기,정보통신 ㆍ토목 ㆍ조경 ㆍ소방(전기,기계)	A3	백상지	3	ㆍ1면인쇄 좌철제본
조감도 또는 투시도		A1	인화지	1점	ㆍ판넬
부분 조감도 또는 실내·외 부분 투시도 (발주기관이 지정하는 위치 2곳 이상)		“	“	각1점	ㆍ판넬
지반조사보고서		A4	백상지	5	ㆍ양면인쇄 좌철제본
CD		-	-	1점	ㆍ제출도서

주) 1. 납품수량과 제본방법 등은 발주기관과 협의하여 최종 결정한다.

2. 실시설계 납품도서

구 분		규격	지 질	수량 (부)	비 고
종결보고서	ㆍ완료보고서 ㆍ공사 Network 공정표 ㆍ현장설명서 ㆍ설계안전검토보고서	A4 A1(A3) A4 A4	백상지	3 2(2) 3 1	ㆍ양면인쇄 좌철제본 ㆍ( )안의 부수는 A3임
실시설계서	ㆍ실시설계보고서(종합) ㆍ시뮬레이션(음향, 조도, 기류) ㆍ계산서(분야별 각종 계산서 : 수리 계산서, 배수시설 계산서, 구조 계산서 등) ㆍ시방서(일반, 특기, 관급) (공종별) ㆍ공사비내역서 (총괄, 공종별, 관급, 폐기물포함) ㆍ수량산출서 (공종별) ㆍ일위대가표 (공종별) ㆍ단가대비표 (공종별)	A4	백상지	3 2 2 각 5 각 5 각 5 각 5 각 5	ㆍ양면인쇄 좌철제본 ㆍ단면인쇄 좌철제본
실시설계도면	ㆍ건축일반 (사인/색채/인테리어 포함) ㆍ건축구조 ㆍ기계 ㆍ전기, ㆍ정보통신 ㆍ토목 ㆍ조경 ㆍ소방	A3	백상지	각 5	ㆍ평철
투시도 또는 조감도		A1	인화지	1점	ㆍ판넬 또는 액자
실·내외부분투시도 또는 부분조감도 (발주기관이 지정하는 부분 2곳 이상)		“	“	각 1	ㆍ판넬
CD		-	-	각 1	ㆍ전 분야

주) 납품수량과 제본방법 등은 발주기관과 협의하여 최종 결정한다.

가. 완료보고서

설계설명서, 공사개요, 추진경위, 용역계약 현황, 용역의 진행과정, 참여기술자 현황(공종, 기술자격, 참여기간 등), 하도급자 현황, 수정․보완 지시사항 및 조치결과, 건축자재에 선정사유 및 칼라에 대한 의견, 건축물 유지관리계획서, 납품설계도서 목록 등 일체 기재하여 A4 규격의 책자로 양면 인쇄하고 왼쪽에 철하여야 한다.

나. 공정표는 공정계획을 수립하여 공사기간을 산정하고 PERT/CPM에 의한 Network 공정표를 공사량에 맞게 정확하게 작성․제출하여야 한다. 특기시방서에 명시되어진 공종 중 발주청이 지정하는 주요공정은 별도로 공정표를 작성한다

다 설계안정검토보고서

- 설계과정 중에 도출한 건설안전 위험요소 및 위험성에 대한 평가를 실시한 결과로서 위험요소/위험성/저감대책 형태로 작성(건설공사 안전관리 업무수행 지침의 서식반영)

- 설계에서 잔존하여 시공단계에서 반드시 고려해야 하는 위험요소, 위험성, 저감대책에 관한 사항 포함

		붙임 서식

〔붙임 1〕 착수계

착    수    계

업무담당자 경유 :          (인)

○ 사 업 명 :

○ 계약금액 : 금                 원 (금                 원)

○ 계약년월일 :      년   월   일

○ 착수년월일 :      년   월   일

○ 완료년월일 :      년   월   일

상기와 같이 착수계를 제출합니다.

2022년    월    일

상    호 :

주    소 :

대표이사 :               (인)

울산정보산업진흥원장 귀하

〔붙임 2〕 보안각서

보 안 각 서

○ 용  역  명 :                                설계용역

○ 계약  일자 : 2022.   .   .

○ 착수  일자 : 2022.   .   .

○ 완수예정일 : 2022.   .   .

본인은 상기의 용역에 참여함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약하며 그 증거로서 이 각서를 제출합니다.

1. 본인은 본 용역수행의 모든 사항이 국가의 보안상 중요 시설임을 인식하고 과업수행중 과업수행과 관련한 모든 사항이 기밀임을 인정한다.

2. 본인은 본 용역을 수행함에 있어 용역수행과정에서 알게 된 정보 또는 기밀사항을 기술용역계약일반조건 제35조(기술지식의 이용 및 비밀엄수 의무)에 의거 용역수행기간의 전후를 막론하고 일체 외부에 누설하지 않는다.

3. 본인은 본 용역수행과 관련하여 지득한 사항을 누설하거나 고의 또는 과실로 인하여 발주기관에 유무형의 손해가 발생되는 경우에는 건축사법 제20조(업무상의 성실의무 등) 제2항에 의한 손해배상 책임을 지고 보안관계법에 의거 처벌되어도 일체의 이의를 제기하지 않는다.

4. 본인은 본 용역수행 종료 이후라도 공사진행 과정에서 의견을 필요로 하는 경우에는 이에 적극 협력한다.

5. 본인은 본 계약과 관련하여 제출한 모든 설계도서, 서류 및 자료에 대한 저작권, 소유권 등 일체의 권리는 기술용역계약특수조건 제13조(저작권 및 소유권)에 의거 발주자에게 귀속됨을 알고 별도로 발주자의 승인을 얻은 경우를 제외하고는 외부에 누설하지 않는다.

2022년    월     일

주        소 :

주민등록번호 :

기 술  분 야 : 참여공종 표기

성        명 :                   (인)

울산정보산업진흥원장 귀하

〔붙임 3〕 책임기술자선임계

책임기술자 선임계

1. 용  역  명 :                           설계용역

2. 계약  금액 : ○○○원

3. 계약  일자 : 2022.   .   .

4. 착수  일자 : 2022.   .   .

5. 완수예정일 : 2022.   .   .

-  아                      래  -

가. 성        명 :

나. 주        소 :

다. 주민등록번호 :

라. 기술자격(면허)종별 :

상기 인을 본 설계용역의 책임기술자로 선임하여 제출하오며 분야별 책임기술자가 수행한 일체의 행위에 대하여 계약자를 대리하여 책임질 것을 서약합니다.

붙임 : 유자격자임을 입증할 수 있는 자격(면허)증 또는 경력증명서 사본 1부

2022.   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                (인)

울산정보산업진흥원장 귀하

〔붙임 4〕 하도급승인 요청서

하도급승인 요청서

1. 용  역  명 :                          설계용역

2. 계약  금액 : ○○○원

3. 계약  일자 : 2022.   .   .

4. 착수  일자 : 2022.   .   .

5. 완수예정일 : 2022.   .   .

-  아      래  -

가. 하도급분야 : (구조계산, 건축기계설비, 측량, 기타등)

나. 하도급금액 :

다. 하도급자

- 주    소 :

- 상    호 :

- 대 표 자 :

- 보유면허 :

붙임 : 1. 유자격을 입증하는 서류(엔지니어링활동주체신고증등) 사본 1부

2. 하도급계약서 사본 1부

3. 참여기술자 명단(기술자격 및 경력증명서 포함) 1부

상기인에게  ○○○분야 설계용역을 하도급하고자 하오며 기술용역계약특수조건 제6조에 의거 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

2022.  .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

울산정보산업진흥원장 귀하

〔붙임 5〕 월간공정보고

월간공정보고

�용 역 명 :

�용역개요

◦용역기간 : 2022 년  월  일 ～ 2022 년  월  일

◦계약금액 : ○○○원

�용역진행사항

구분	월간 업무수행 내용 (2022. . . ～ 2022. . .)	비고
첫째주		(실시/예정공정)
둘째주
셋째주
네째주
다섯째주
익월	- 공정 지연시 : 지연의 구체적 원인 표기

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

책임기술자 :           (인)

울산정보산업진흥원장 귀하

〔붙임 6〕 주간공정보고

주간공정보고

�용 역 명 :

�용역개요

◦용역기간 : 2022 년  월  일 ～ 2022 년  월  일

◦계약금액 : ○○○원

�용역진행사항

구 분	전주진행사항(2022 . . .)	금주예정사항(2022. . .)	비고(진행률)
업무내용	- 인원투입현황 - 외주작업진행현황 등 - 주요협의사항이나 회의 등이 있을 경우 반드시 표기 - 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신 등 분야별로 구분되도록 작성		실시공정/예정공정(%)을 표기
특기사항	문제점 및 해결책 등 표기

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

책임기술자 :           (인)

울산정보산업진흥원장 귀하