광역안전컨트롤타워 관제탑 구축 시설공사 건축·토목 상주감리 과업지시서

2024. 3.

						목 차

제1장 감리 개요	1

제2장 일반 사항	10

제3장 성과물 및 제출서류	15

제4장 심사항목 및 평가기준	24

양식첨부

제1장 감리 개요

1.1.  용 역 명  :  광역 안전컨트롤타워 관제탑 구축 시설공사 상주감리(건축·토목)

1.2.  감리용역기간  :  계약체결일로부터 관제탑 시설공사 준공일까지

※ 용역기간 중, 천재지변으로 인한 과업수행의 차질 또는 과업과 관련된 통념상 인정되는 부득이한 사유가 발생되었을 때 협의 후 연장 가능

가. 용역 착수일은 계약체결시 발주기관에서 지정하여 계약서에 표기함.

나. 용역대상공사의 기간연장 등으로 인하여 단순히 용역기간만 연장될 경우, 계약금액을 증액할 수 없음

1.3.  감리용역 업무의 근거 및 범위

가. 감리용역의 근거

(1) 건축법 제25조 동법시행령 제19조, 같은 법 시행규칙 제19조의 2

(2) 공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준 제5조2, 제7조

(3) 건축공사감리 세부기준(국토교통부 고시 제2020-1011호)

나. 감리용역의 범위

(1) 건축공사(토목 포함), 자재검수, 폐기물처리 등 공사전반에 대한 감리업무

(2) 설계변경 및 건축허가·행정과 관련된 공작물 축조신고 필증·항공장애표시등 설치신고 등 사용승인 관련 전체업무

(3) 「건축법 시행령」제91조의 3에 따른 관계전문기술자와의 협력 업무

※ 전기, 통신분야 제외(감리용역 별도)

(4) 본 사업 시행을 안전관리 업무 및 공종과정의 영상·사진 기록물 작성

(5) 계약목적물의 시운전 및 품질확보 보증

(6) 준공 후 유지관리지침서 작성 및 시설물 인계인수업무

(7) 감리원(건축해당)은 착공 이후 공사현장에 상주해야 하며 업무 또는 부득이한 사유로 1일 이상 현장을 이탈하는 경우에는 반드시 감리일지에 기록하고 서면으로 발주처 담당자의 승인을 받아야 한다.

1.4.  자격 기준

「건축사법」제7조에 따른 건축사 면허를 소지하고, 같은 법 제23조의 규정에   의한 건축사 자격 등록과 건축사사무소 개설·신고를 필한 자

- 상주 감리원: 건축사보(초급)

- 비상주 감독자: 건축사(고급)

1.5.  과업목적

가. 공사감리의 원활한 수행을 통한 견실한 시설물을 증축하기 위해 감리업무 전반에 걸친 구체적인 사항을 규정하여 성실한 업무수행과 건설공사의 시공 및 품질 향상을 도모할 수 있도록 공사에 대한 감리를 의뢰하여 공사 추진 만전을 기하고자 함

나. 실시설계도서와 시방서 등의 제반 관계규정에 따라 효율적인 공정관리, 품질관리, 안전관리, 원가관리 등을 수행하여 계약기간 내에 최적의 품질 확보와 향상을 도모함에 있으며, 본 과업지시서는 “광역안전컨트롤타워 관제탑 구축 시설공사(건축·토목)□에 한하여 적용된다.

1.6.  공사개요

가. 위    치 : 울산광역시 남구 부곡동 129-4번지 통합안전관리센터 부지 內

나. 공사기간 : 90일

다. 공사규모

공 사 개 요
공 사 명	광역안전컨트롤타워 관제탑 시설공사
구조 및 높이	철골구조 / 70m
건축면적	123.21㎡
용 도	원거리EOIR카메라 및 레이저 거리 측정 장비 부착을 위한 공작물 시설공사

라. 조감도

	관제탑 설치위치 및 조감도

1.6.  감리범위

가. 행정업무

(1) 공사 착공 및 준공 업무(공작물 축조신고 필증 및 항공장애표시등 설치신고)에 대해 발주처인 울산정보산업진흥원을 대신하여 대행한다.

(2) 공작물 사용승인에 관한 각종 서류작성과 업무를 시공사와 공동으로 대행한다.

* 발주처 필요에 의한 공작물 임시사용 허가 업무 대행

나. 기록관리

감리원은 감리업무 수행상 필요한 경우에는 다음 각호의 문서를 별지 서식을 참조하여 작성ㆍ비치하여야 한다.

(1) 품질시험계획(별지 제16호 서식)

(2) 품질시험ㆍ검사성과 총괄표(별지 제17호 서식)

(3) 품질시험ㆍ검사실적 보고서(별지 제18호 서식)

(4) 검측대장(별지 제19호 서식)

(5) 주요자재 수불수(별지 제8호 서식)

(6) 안전보건 관리체제(별지 제21호 서식)

(7) 재해발생 현황(별지 제22호 서식)

(8) 안전교육 실적표(별지 제23호 서식)

(9) 협의내용 등의 관리대장(별지 제24호 서식)

(10) 공사 기성부분 검사원(별지 제26호 서식)

(11) 감리기술자(기성부분, 준공) 감리조서(별지 제27호서식)

(12) 공사 기성부분 내역서(별지 제28호 서식)

(13) 공사 기성부분 검사조서(별지 제29호 서식)

(14) 준공검사원(별지 제30호 서식)

(15) 준공검사조서(별지 제31호서식)

다. 기록물 관리 및 자료작성

감리원은 시공자가 작성한 공사일지를 제출받아 확인한 후, 보관하여야 한다.감리원은 아래의 서류를 항상 비치하고 발주기관의 요구가 있으면 항상 제시하여야 한다.

(1) 감리일지

(2) 계획 및 시행공정표

(3) 사용자재의 적합성 검토내용

(4) 각종 시험성과에 관한 검토내용

(5) 설계변경사항 관리현황

(6) 폐기물처리 현황

(7) 안전관리비 사용현황

(8) 공법 등 기술검토 현황

(9) 시공자 및 감리원 인원 장비 투입현황

(10) 공사관련 회의록

(11) 공사진행 사진첩 (검측사진, 품질시험 사진 등)

라. 보 고

(1) 제출시기 : 착수시

(2) 제출서류

① 착수계

② 감리원배치표

- 상주, 비상주 감리원 경력확인서

- 감리원 조직 구성내용과 감리원별 투입기간 및 담당업무

③ 감리용역비 산출내역서

④ 감리업무 수행계획서

- 감리용역 착수일은 공사착공일로 한다.

⑤ 감리업무 수행절차서

- 감리원은 시공사의 업무내용 등을 기초로 시공감리 분야별 수행기준, 수행방법, 사용서식 등을 규정하는 감리업무 수행절차서를 제출하여야 한다.

⑥ 설계검토 업무수행

- 감리원은 공사 진행 시 불필요한 설계변경이 발생되지 않토록 설계도서 검토업무를 수행하여야 한다.

- 감독자는 동 설계도서에 대하여 용역 착수 후 10일 이내에 설계도서 상호간 모순, 누락, 오기 및 예상되는 문제점 등에 대하여 각 공정별 검토의견 제출하여야 한다.

⑦ 보안유지에 대한 이행각서

⑧ 손해보험증권 원본

마. 착공신고서 검토 및 보고할 세부내용

감리원은 용역 착수 후 10일 이내에 시공자로부터 다음 각 호의 서류가 포함된 착공신고서를 제출받아 적정성 여부를 검토하여 감독자의 확인을 받아 발주기관의 사업담당자에게 보고하여야 한다.

(1) 현장기술자 지정신고서

(현장관리조직, 현장대리인, 품질관리자, 안전관리자)

(2) 건설공사 세부 공정예정표

(3) 품질관리계획서 또는 품질시험계획서

(4) 공사도급 계약서 사본 및 산출내역서

(5) 착공 전 사진

(6) 현장기술자 경력사항 확인서 및 자격증 사본

(7) 안전관리계획서

(8) 유해ㆍ위험방지계획서

(9) 장비투입 계획서

(10) 관급자재 수급계획서

(11) 기타 발주기관이 지정한 사항

바. 감리원은 공사 착공일로부터 5일 안에 제출받아 검토 후, 3일 안에 공사추진에 지장이 없도록 시공자와 합동으로 다음 각 호의 사항을 현지 조사하여 발주기관의 사업담당자에게 보고하여야 한다.

(1) 각종 재료원 확인

(2) 지반 및 지질상태

(3) 공사차량 형장 진입도로 현황 및 교통처리 대책

(4) 지하매설물 및 장애물(지하 고압전류 인입선, 지역난방 배관, 도시가스 배관, 상, 하수도 배관 등)

(5) 각종 수요기관 의사결정사항 등

(6) 주요 공정의 시공절차 및 방법

(7) 시공일정

(8) 주요장비 동원계획

(9) 주요자재 및 인력투입계획

(10) 주요 설비사양 및 반입계획

(11) 환경, 안전관리사항

사. 공사 시행단계 중 서류 검토 보고는 아래와 같으며 시공자가 제출하는 다음 각 호의 서류를 접수하여 적정성 여부를 검토하여 감독자의 확인을 받아 발주기관의 사업담당자에게 보고하여야 한다.

(1) 안전관리 추진실적 보고서 (안전관리 활동, 안전관리비 사용실적 등)

(2) 검측 결과 통보서

(3) 기성 준공 검사원

(4) 준공기한 연기 신청서

(5) 하도급 통지 및 승인요청서

(6) 확인측량 결과보고서

(7) 물공량 확정보고서 및 물가 변동지수 조정율 계산서

(8) 기타 시공과 관련된 필요한 서류 및 도표

아. 감리원은 다음 각 호의 문서가 포함된 감리 보고서를 매월 작성하여 공사감독자의 확인을 거쳐 발주기관에게 보고하여야 한다.

(1) 공사추진현황 등(별지 제32호 서식)

(2) 감리원 업무일지(별지 제33호 서식)

(3) 주간공정보고

(4) 월간공정보고

(5) 현황사진첩

(6) 품질시험ㆍ검사대장(별지 제34호 서식)

(7) 구조물별 콘크리트 타설현황(작업자 명부 포함) (별지 제35호 서식)

(8) 검측요청ㆍ결과통보내용(별지 제36호 서식)

(9) 자재공급원 승인요청ㆍ결과통보 내용(별지 제37호 서식)

(10) 주요자재 검사 및 수불내용(별지 제38호 서식)

(11) 공사설계 변경현황(별지 제39호 서식)

(12) 주요구조물의 단계별 시공현황(별지 제40호 서식)

(13) 콘크리트 구조물 균열관리 현황(별지 제41호 서식)

(14) 공사사고 보고서(별지 제42호 서식)

(15) 그 밖에 발주기관이 필요하다고 인정하여 요청한 내용

자. 완공단계

공사완료	→	시공자 (준공검사원 제출)	→	감리자 (검토, 확인 서명)	→	발주기관 (준공검사일정 통보)	→	발주기관 (준공검사) 감리자 (입회)

감리원은 해당 감리용역이 완공 후에 준공관련 서류를 시공사와 다음 각 호의 내용이 포함된 최종 감리보고서를 감리용역기간의 만료일로부터 14일 이내에 대표자 명의로 발주기관에 제출하여야 한다.

1) 감리용역 개요(별지 제43호 서식)

2) 공사추진내용 실적(별지 제44호 서식)

3) 검측내용 실적 종합(별지 제 45호 서식)

4) 품질시험ㆍ검사실적 종합(별지 제46호 서식)

5) 주요자재 관리실적 종합(별지 제47호 서식)

6) 안전관리 실적 종합(별지 제48호 서식)

7) 그 밖에 발주기관이 필요하다고 인정하여 요청한 내용

차. 준공단계

시설물 인수ㆍ인계 시 감리원은 시공자로 하여금 당해공사의 예비준공검사(부분준공, 발주기관의 필요에 의한 기성부분 포함) 완료 후 14일 이내에 다음 각 호의 사항이 포함된 시설물의 인수인계를 위한 계획을 수립토록 하고 이를 검토하여 발주기관에 제출하여야 한다.

1) 운영 유지관리지침서

- 시설물의 규격 및 기능점검 항목

- 기능점검 절차

- 제작도면 절차서 등 관련자료

2) 시운전 결과보고서(시운전 실적이 있는 경우)

3) 예비 준공검사 결과

4) 특기사항

1.7.  업무조정회의

가. 발주처의 사업부서는 공사시행과 관련하여 공사관계자간에 발생하는 이견을 효율적으로 조정하기 위하여 업무조정회의를 개최하며, 발주처 회의 요청이 있을 시 감리원은 적극적으로 응해야 한다.

나. 감리원은 회의 관련 자료와 배포자료를 준비하고 발주기관에서 개최하는 관련내용을 시공사와 협의하여야한다.

다. 발주기관의 필요에 따라 기술사항 검토회의 및 이해관계자 회의, 자문회의를 포함한 회의를 개최할 수 있으며, 이때 감리원은 관련 자료를 작성·제출하여야한다.

1.8.  부실감리에 대한 조치

가. 조치대상

1) 시공감리를 부실하게 했을 때

2) 감리원에 해당하는 건설공사의 안전에 관한 관계법령을 위반했을 때

3) 발주기관에 감리로 인한 재산상의 손실을 발생하게 했을 때

4) 감리로 인해 발주기관 및 공중에 현저한 피해를 입혔을 때

나. 부실감리에 대한 조치 (3단계로 구분하여 조치)

1) 제1단계 : 주의 또는 경고

- 시공상태 확인 및 검토사항을 소홀히 한 경우

- 기록유지사항 및 보고사항을 소홀히 한 경우

2) 제2단계 : 감리원 교체

- 공사감독관에게 보고 없이 3회 이상 현장을 무단이탈한 경우

- 발주기관 또는 공사감독관의 정당한 지시에 대하여 불응한 경우

- 보조감리원에 대한 지휘, 감독능력 및 감리원으로 업무수행능력이 현저히 부족하다고 인정되는 경우

- 고의 또는 과실로 인하여 공사가 부실하게 시행될 경우

- 기타 감리용역의 수행 또는 관리상 부적당하다고 인정되는 경우

2) 제3단계 : 계약해지 또는 해제

- 정당한 사유 없이 착수기일을 경과하고도 감리업무에 착수하지 아니한 경우

- 계약조건에 명시된 업무를 소홀히 하거나 수행능력이 현저히 부족하여 계약목적을 달성할 수 없다고 인정될 때

- 계약기간 내 감리용역을 완료하지 못하거나 완료할 가능성이 없음이 명백하다고 인정될 경우

- 기타 용역계약일반조건에서 정한 해지 또는 해제사유에 해당할 경우

제2장 일반사항

2.1. 일반사항

감리용역을 수행함에 있어 본 공사의 설계도서, 검토기준 및 업무수행지침, 감리 과업지시서와 아래의 각종 시방서 및 규정에 의하여 수행할 수 있도록 사무실에 비치하여 이를 충분히 숙지하고 철저히 이행하여야 한다.

가. 국토교통부 제정 각종 공사 표준시방서 및 설계기준

나. 한국산업규격(KS)

다. 건설공사 품질 및 규격관리실무 편람

라. 산업안전보건법

마. 기타 본 과업 및 건설공사에 관련된 법령 및 규정

바. 발주기관의 설계 및 시공에 관한 지시사항

사. 감리원은 감리업무를 성실히 수행하고 건설공사의 품질향상에 적극 노력해야 한다.

2.2. 감리원의 기본업무

"감리원"은 건축법 제25조 동법시행령 19조, 같은법 시행규칙 19조 2항에 따라 발주기관의 감리업무를 대행하며 발주기관에 고용 또는 예속되지 아니하고 감리계약에 의해 독립적으로 그 업무를 성실히 수행하고 해당 시설물의 품질향상에 노력하여야 한다.

2.3. 감리원의 직위

가. 감리원은 해당 공사가 설계도서 및 기타 관계서류의 내용대로 시공되는지의 여부를 확인하고 품질관리, 시공관리, 안전관리 및 공정관리 등에 대한 지도를 하며, 발주기관의 위탁에 의하여 감리업무를 하게 된다.

나. 감리원의 근무지침

1) 감리원은 감리업무를 수행함에 있어서 당해 공사의 공사계약문서, 감리 과업지시서, 기타 관계규정 등의 내용을 숙지하고 당해 공사의 특수성을 파악한 후 감리에 임해야 한다.

2) 감리원은 당해 공사가 공사계약문서, 공정계획표, 발주기관의 지시사항 등 기타 관계규정 내용대로 시공되는가를 공사시행 시 수시로 입회하고 공정 단계별로 시기를 적절하게 확인, 검측하여 엄격한 품질관리에 임해야 하고 기타 시공자에게 품질, 시공, 안전, 공정관리 등에 대한 감리수행을 하고 확인하여야 한다.

3) 감리원은 시공자의 의무와 책임을 면제시킬 수 없으며, 임의로 설계를 변경시키거나 기일연장 등 공사계약조건과 다른 지시나 결정을 하여서는 아니 된다.

4) 감리원은 공사현장의 문제점이 발생되거나 시공에 관련한 중요한 변경 및 예산과 관련되는 사항에 대하여는 수시로 발주청에 보고하고 그 지시를 받아 업무를 수행한다. 다만, 인명손실이나 시설물의 안전에 위험이 예상되는 사태가 발생할 시에는 먼저 적절한 조치를 취한 후 즉시 발주기관에 보고하여야 한다.

마. 비상주 감리기술자의 업무범위

감리사의 본사 등에 근무하면서 현장 상주감리원의 업무를 지원하는 자의 업무범위는 다음과 같다.

1) 설계도서 등의 검토

2) 현장 감리원의 능력범위를 벗어난 현장 시공상의 문제점에 대한 기술검토와 민원사항에 현지조사 및 해결방안 검토

3) 설계변경에 대한 기술검토

4) 설계변경 및 계약금액 조정의 심사

5) 기성 및 준공검사

6) 정기적(주 1회 이상)으로 현장 시공상태를 종합적으로 점검, 확인, 평가하고 기술지도하여야 하며

7) 기타 감리업무 추진에 필요한 지원업무

2.4. 감리업무 절차 및 운영

가. 절차

(1) 다음과 같은 업무분담 내용에 따라 업무수행계획을 수립하고 절차에 의거 과업을 수행토록 하여야 한다.

								∙일일감리계획수립(시공감리원) ∙현장감리원 수행업무 지정, 검토지시사항 전달 ∙지정된 업무에 대한 시공 및 품질관리계획등의 검토 ∙착안 사항 준비 및 지시사항 숙지
			일일감리 계획수립
								※ 사전준비 : 설계도서의 숙지, 시공법 및 관련 작업 내용 파악, 검측요령 작성
								∙안전관리 점검 ∙시공 상태 확인 ∙시험실시 입회 및 성과확인 ∙각종 검측 등 지정업무 수행 ∙지적사항 시정조치 결과 확인 등 ∙일일업무 수행일지, 감독일지, 자재수불부 정리 등
			감리원: 건축사보 (상주)
감독자: 건축사 (비상주) 주 1회 이상 현장방문
								※ 주요구조물은 전 공종 사진·비디오 촬영기록
현장조사분석 주요구조물의 기술적 검토 기성 및 준공검사 행정지원업무 등
								∙당일 수행업무 분석 및 평가 ∙문제점 토의 및 시정 등
			일 일 평 가
								※ 시공사 현장대리인, 발주처 사업담당자와 회의 및 실시결과는 월간보고서에 수록 제출
								∙부실공사 방지대책 토의 ∙품질 및 안전관리 사항 ∙공사추진계획 및 실적 ∙공사추진 저해요인 분석 ∙지시사항에 대한 이행상태 ∙기타 문제점, 애로 및 건의사항
			주 간 평 가

라. 감독자는 업무계획을 수립, 운영하고 특히 엄격한 품질관리를 위하여 공사단계별 품질시험을 철저히 시행해야 하며, 미시행 또는 불합격일 경우 즉시 시정토록 하고 그 구간에는 재시공을 실시하여 시정이 완료될 때까지 후속 공사를 시켜서는 안 된다.

마. 감리원이 작성  비치하여야 할 일지에는 다음 내용 등이 수록되어야 한다.

(1) 일일 감리업무 수행내용

- 주요 구조물 등의 검측 결과, 지적사항 및 시정조치사항

(2) 시공과정에서의 문제점과 이의 해결방법 등 시공에 대한 전반적이 자체 평가서

(3) 민원사항 접수, 처리 및 조치계획

(4) 안전관리의 지도

(5) 민원사항 해결을 위한 업무수행

바. 발주기관의 자문요구

(1) 발주기관은 당해 공사와 관련하여 공법의 변경, 특수공법 등에 대한 기술적인 자문을 요구할 수 있으며, 이 경우 감리사는 필히 자문에 응하여야 한다.

(2) 감리원은 발주기관이 요구하는 중요한 사항에 대하여 본사 지원반을 운영 자문하여야 하며, 검토가 불가능하여 제3자에게 의뢰해야 하는 전문성을 요하는 자문은 발주청과 협의하여 국내외 전문가에게 자문을 받아 의견을 제시하여야 한다.

2.5. 상주감리원의 현장근무 수칙

가. 상주감리원은 공사현장(공사와 관련한 외부 현장점검, 확인 등 포함)에 상주하여야 하며 업무 또는 부득이한 사유로 1일 이상 현장을 이탈하는 경우에는 반드시 근무 상황부에 이를 기록하여야 하며, 발주기관 소속직원(이하“공사관리관”이라한다)의 확인(부재 시 유선보고)을 받아야 한다.

나. 상주감리원은 감리사무실 출입구 부근에 부착한 근무 상황판에 당일 현장 근무위치 및 업무내용 등을 기록하여야 한다.

다. 감리사는 감리업무에 종사하는 감리원이 감리업무 수행기간 중 건설기술진흥법에 의한 교육이나 민방위기본법 또는 향토예비군 설치법에 의한 교육을 받는 경우나 근로기준법에 따른 유급 휴가로 현장을 이탈하게 되는 경우에는 감리업무에 지장이 없도록 직무대행자 지정 및 업무인계인수 등의 필요한 조치를 하여야 한다.

라. 상주감리원의 근무는 근로기준법에 준하여 근무토록 하며 공사추진에 지장이 없도록 하기 위하여 발주기관의 요청이 있을 경우 요청내용에 따라 초과근무를 하여야 하며, 시공자의 요청이 있을 경우에는 발주기관의 승인을 받아 초과근무를 하여야 한다. 이 경우 초과근무시간은 별도의 대가 지급없이 현장여건을 고려하여 대체근무를 원칙으로 한다. (단, 시공자의 요청에 따른 경우 시공자와 협의하여 결정한다.)

2.6. 세부수행 업무

가. 감리업무 착수 시 업무연락처, 감리수행계획 및 설계도서 검토내용 보고

(1) 감리원은 현장에 착임하는 즉시 현장사무소 또는 비상연락처의 전화번호 및 FAX, 우편연락처 등을 발주기관에 보고하여 업무연락에 차질이 없도록 하여야 하며, 변경되었을 경우에도 즉시 보고하여야 한다.

(2) 해당 공사 시행 전에 설계도서의 구조적 안전성, 시공성 등에 대한 적정 여부를 검토하여 공사계약문서 등의 상호 모순되는 사항 및 현장실정과의 부합여부 등을 검토하여 발주기관에 보고하여야 한다.

(3) 도면과 시방서가 상이할 경우에는 발주기관과 별도 협의하여 시공하여야 하며, 착공 후 시공자로 하여금 공사세부시공 계획서를 작성, 제출케 하고 각 공종을 시작할 때마다 해당 공종에 대하여 구체적인 품질 확보 방안이 포함된 시공계획서를 제출하게 하여 이를 감리원의 승인을 득한 후 시공토록 하여야 한다.

나. 사무실 및 서류 등의 보관

(1) 시공자가 제공하는 감리사무실은 공사규모 및 현장실정에 부합되도록 발주기관과 협의하여 감리업무에 지장이 없도록 설치하고, 효율적인 업무추진이 이루어질 수 있도록 하여야 한다.

현장의 중요도 또는 위험도에 따라 제한구역 및 통제구역을 설정하고 출입자를 철저히 단속하도록 하여야 한다.

(가) 감리원 사무실 : 제한구역

(나) 현장사무실 : 제한구역

(2) 현장사무실 입구에 출입자를 통제할 수 있는 시설을 시공자에게 설치토록 하고, 제한구역 및 제한지역내의 출입자에 대해서는 직업, 성명, 방문목적, 시간 등을 기록, 비치토록 하여야 한다.

(3) 감리원은 착공과 동시에 공사설계도서 및 자료, 공사계약문서 등을 발주기관으로부터 인수하여 관리번호를 부여하고, 관리대장을 작성하여 공사관계자외의 유출을 방지하는 등 관리를 철저히 하여야 하며, 외부유출시 발주기관의 승인을 받아야 한다.

(4) 설계도서는 반드시 도면 보관함에 보관하며 관계자 외에는 열람, 차용 등을 금지하여야 한다. 설계도서에는 필히 우측 상단에 관리번호를 부여하여 관리하여야 한다.

“예”	1 ～ 20 20

※ 윗숫자는 관리번호, 아래숫자는 총생산 부수

(5) 감리원은 공사완료 후 인수할 설계도서는 발주청에 반납하거나 지시에 따라 폐기 처분한다.

다. 공사안내표지판 및 각종 표지판 제작설치

(1) 감리원은 공사착수 이전에 공사안내 표지판을 제작 설치하도록 하여야 하며, 기타 성실시공 등 공사와 관련된 표지판을 발주기관과 협의하여 제작, 설치하도록 하여야 한다.

(2) 공사안내 표지판 등을 설치 전 상세도면을 작성토록 하여 발주기관에 제출하여야 한다.

라. 지장물 및 용지경계 표지 등 확인

(1) 감리원은 용지경계 설정을 확인하고 수급자로 하여금 경계표시를 설치하게 하여야 한다.

(2) 지장물 조서 등을 활용, 현지를 재확인하여 공사추진에 지장이 없도록 하여야 한다.

(3) 지장물 철거 및 이설확인 등을 철저히 파악하여 공사추진 장해요소를 사전 해소하여야 한다.

(4) 공사 중 지하매설물 등 새로운 지장물 발견 시에는 수급자로부터 상세한내용을 제출받아 이를 확인한 후 발주기관에 조속히 보고하여야 한다.

마. 사업관련 인․허가 서류 등 작성

(1) 본 사업시행을 위한 각종 법령에 의한 협의서류를 검토, 확인 및 작성 제출하여야 한다.

(2) 기타 관련법에 의해 공사수행과 관련한 인․허가(공작물축조신고필증 및 항공장애표시등 설치신고 등) 및 관계기관의 협의 필요한 서류를 관계법 규정에 의거 검토, 확인, 작성 제출하여야 한다.

(3) 인허가 업무 관련 서류를 세움터에 등재하여, 행정기관의 확인이 득한 후에 감리업무를 완료한다.

바. 측점표기 및 구조물위치 표지판 설치

(1) 확인측량 및 중심점 말뚝 측량이 완료되면 매측점마다 측점표기를 하고 절토부 성토부에 각 측점마다 토공규준틀을 설치하여야 한다.

(2) 암거 및 옹벽구간 시․종점에는 구조물의 위치를 알 수 있도록 표지판을 설치토록 하여야 한다.

사. 확인측량 실시

(1) 감리원은 계약과 동시에 시공자로 하여금 발주 설계도와 실제 현장의 이상유ㆍ무를 확인하는 확인측량을 조속히 실시토록 하여야 한다.

(2) 삼각점 또는 도근점에서 측량기준점의 위치(좌표)를 확인하고 기준점은 공사 시 유실방지를 위하여 필히 인조점을 설치하여야 하며, 시공 중에도 활용할 수 있도록 인조점과 기준점과의 관계를 도면화하여 비치하여야 한다.

(3) 절취면에 암이 노출되어 있는 경우는 필히 토사, 리핑암, 발파암 등의 경계지점을 정확히 측정하여 횡단면도에 표기하여야 한다.

(4) 기준시설과의 접속부 등을 상호 확인하고 측량결과를 교환하여 이상유무를 확인하여야 한다.

(5) 감리원은 확인측량을 공동 확인 후에는 시공자에게 다음 각 호의 서류를 작성ㆍ제출토록하고 확인측량 도면의 표지에 측량을 실시한 현장대리인, 실시설계 용역회사의 책임자, 감리원의 서명ㆍ날인하고 검토의견서를 첨부하여 발주기관 담당자에게 보고하여야 한다.

- 감리원의 검토의견서

- 확인측량 결과 도면(종ㆍ횡단도, 평면도, 구조물도 등)

(6) 감리원은 사전 설계도서를 숙지하고 확인측량 시 입회ㆍ확인하여야 하며 필요시 실시설계 용역회사 등과 합동으로 이상 유무를 확인토록 하여야 한다.

아. 구조물 검토 및 검측실시

(1) 감리원은 관제탑 구조물의 시공을 동일하게 할 수 있도록 시공자가 시공상세도를 작성한 후 당해 구조물을 시공하기 전에 제출하여 이를 검토 확인하여야 한다.

(2) 각종 구조물의 구조검토, 시공계획, 시공시 예상문제 등을 재검토 하여야 한다.

(3) 감리원은 최종 검측전에 각종 구조물의 터파기, 철근가공 및 조립 설치과정을 수시 확인ㆍ검측 하여야 한다.

(4) 토질조사 시 실제로 보링하지 않고 추정치를 사용한 지점을 도면 및 특별시방서에 명기하였을 때에는 지점에 대해서 보링을 실시하여 그 결과에 따라 시공하여야 한다.

(5) 본 공사에 소요되는 각종 재료의 품질확보를 위한 재료의 소정 품질 및 규격 등을 필히 검토하여야 한다.

(6) 기타 검측시기, 검측빈도, 검측절차, 검측체크리스트 등의 상세한 검측업무는 감리업무수행지침에 따라 철저히 이행하여야 한다.

자. 수명사항의 처리

감리원은 시공자에게 공사와 관련하여 지시하는 경우에는 다음 각호와 같이 처리하여야 한다.

(1) 감리원이 공사와 관련하여 시공자에게 지시할 때에는 서면으로 함을 원칙으로 하며, 현장 여건에 따라 시급한 경우 또는 경미한 사항에 대하여는 우선 구두지시로 시행토록 조치하고 다음에 이를 서면으로 확인

(2) 감리원의 지시내용은 공사 설계도면 및 설명서 등 관계 규정에 근거, 구체적으로 기술하여 시공자가 명확히 이해 할 수 있도록 지시

(3) 지시사항에 대하여는 그 이행상태를 수시 점검하고 시공자로부터 이행 결과를 보고 받아 기록·관리

차. 발주기관의 지시 처리

감리원은 발주기관으로부터 지시를 받았을 때는 다음 각호와 같이 처리하여야 한다.

(1) 발주기관으로부터 지시를 받은 내용을 기록하고 신속하게 이행되도록 조치하여야 하며, 그 이행 결과를 점검·확인하여 발주기관에 서면으로 조치 결과 보고

(2) 당해 지시에 대한 이행에 문제가 있을 때는 의견을 제시

(3) 감리원은 각종 지시, 통보사항 등을 전원이 숙지하고 이행에 철저히 하기 위하여 교육 또는 공람

타. 사진·영상촬영 및 보관

감리원은 시공자에게 촬영 일자가 나오는 공사 사진을 공종별로 착공 전부터 준공 때까지의 공사과정, 공법, 특기사항을 촬영하고 공사내용(시공일자, 위치, 공종, 작업내용 등) 설명서를 기재, 제출토록 하여 후일 참고자료로 활용토록 한다. 공사기록 사진은 공종별, 공사추진단계에 따라 다음 각호의 사항을 촬영·정리토록 하여야 한다.

(1) 주요한 공사현황은 착공전, 시공중, 준공 등 시공과정을 알 수 있도록 될 수 있는 대로 동일 장소에서 촬영

(2) 시공 후의 검사가 불가능하거나 곤란한 부분

- 매몰 부분

파. 시공확인

감리원은 공사가 설계도서 및 시방서 등에 일치되게 시공되는가를 현장에서 확인하는 것이 감리원의 업무 중에서 가장 중요하고 기본적인 책무인 점을 명심하여 모든 업무에 우선하여 다음 각 호의 현장 시공 확인업무를 수행하여야 한다.

(1) 공사 목적물을 제조, 조립, 설치하는 시공과정에서 가 시설공사와 영구시설물 공사의 모든 작업단계의 시공 상태

(2) 시공 확인하여야 할 구체적인 사항은 당해 공사의 설계도면, 시방서 및 관계 규정에 정한 공종을 반드시 확인

하. 감리원의 공사 중지 명령 등

감리원은 시공자가 건설공사의 설계도서, 시방서, 기타 관계 서류의 내용과 적합하지 않게 당해 건설공사를 시공하는 경우에는 재시공 또는 공사 중지 명령 등 발주기관에 보고 후 필요한 조치를 할 수 있다. 감리원으로부터 재시공 또는 공사 중지 명령 등의 지시를 받은 시공자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

2.7. 안전관리

가. 감리원은 건설공사의 안전시공 추진을 위해서 안전조직을 갖추도록 하여야 하고 안전조직은 현장 규모와 작업내용에 따라 구성하며 동시에 산업안전보건법의 해당 규정에 명시된 업무도 수행되도록 조직편성을 다음과 같이 한다.

나. 감리원은 시공자가 작성한 안전관리계획서를 공사 착공 전에 제출받아 적정성을 확인하여야 하며, 보완하여야 할 사항이 있는 경우에는 시공자에게 이를 보완하도록 하여야 한다.

다. 감리사는 상주 감리원을 지정하여 시공자의 안전관리자를 지도·감독하도록 하여야 하며 공사 전반에 대한 안전관리계획의 사전검토, 실시확인 및 평가, 자료의 기록유지 등 사고 예방을 위한 제반 안전관리 업무에 관하여 확인을 하도록 하여야 한다.

라. 감리원은 시공자 중 안전보건관리책임자(현장대리인)와 안전관리자(법정 자격자)를 지도․감독하도록 하여야 하며 공사 전반에 대한 안전관리계획의 사전검토, 실시확인 및 평가, 자료의 기록유지 등 사고 예방을 위한 제반 안전관리 업무에 관하여 확인을 하도록 하여야 한다.

마. 감리원은 시공자에게 근로기준법, 산업안전보건법, 산업재해보상보험법과 기타 관계법규를 준수하도록 하여야 한다.

바. 감리원은 산업재해 예방을 위한 제반 안전관리 지도에 적극적인 노력을 기울이도록 함과 동시에 안전관계법규를 이행하도록 업무를 수행하여야 한다.

사. 감리원은 건설공사 안전관리계획 내용에 따라 안전조치·점검 등 이행을 하였는지를 확인하고 미이행 시 시공자에게 안전조치·점검 등을 선행한 후 시공하게 한다.

아. 감리원은 시공자가 자체 안전점검을 매일 실시 하였는지를 확인하여야 한다.

2.8. 안전관리 결과보고서의 검토

감리원은 매 분기 시공자로부터 안전관리 결과보고서를 제출받아 이를 검토하고 미비한 사항이 있을 때는 시정조치를 하여야 하며, 안전관리 결과보고서에는 포함한다.

2.9. 준공검사

가. 준공된 공사가 설계서대로 시공되었는지 여부

나. 공사 시공할 때의 현장 상주감리원이 비치한 제 기록에 대한 검토

다. 폐품 또는 발생물의 유무 및 처리의 적정 여부

라. 제반 설비의 제거 및 원상복구 정리 상황

마. 감리원의 준공검사원에 대한 검토의견서

바. 기타 검사자가 필요하다고 인정하는 사항

2.10. 시설물의 인수인계

가. 감리원은 시공자에게 당해 공사의 예비준공검사(부분준공, 발주청의 필요에 의한 기성 부분 포함) 완료 후 발주부서의 담당자에게 다음 각호의 사항이 포함된 시설물의 인수인계를 위한 계획을 수립도록 하고 이를 검토하여야 한다.

(1) 운영 유지관리지침서

(2) 시운전 결과보고서

(3) 예비 준공검사 결과

(4) 특기사항

2.11. 보안 및 기타 유의사항

가. 보안상 중요하다고 생각되는 모든 기록과 자료는 시건장치가 되어 있는 함에 보관하고 열쇠는 시공감리원이 소지하여야 한다.

나. 감리원은 본 업무와 관련 있는 모든 기록과 자료에 대하여 업무와 관련 없는 일에 사용할 수 없으며, 발주청의 사전 서면 승인 없이는 타인에게 제공 또는 대여할 수 없다.

다. 편집된 모든 도서 및 기타 자료를 다른 목적에 이용 또는 이용토록 할 수 없으며 감리업무수행 중 취득한 사실을 누설하여서는 않되며 누설로 인하여 문제점이 발생될 시에는 감리원은 물론 감리사가 모든 책임을 진다.

제3장 성과물 및 제출서류

3.1. 성과물 및 제출서류

가. 단계별 제출자료

항목	제출자료	수량	비고
착수 시	착수계	각 1부	계약일로부터 7일 이내
	감리용역 산출내역서
	책임기술자 선임계
	감리원 배치계획·신고서
	경력사항 확인서
	보안각서
	감리업무수행절차서
	감리업무계획서
	감리 검토의견서		설계도서 및 공정별 계획 검토보고 용역 착수 후, 10일 이내
작업보고	일일 안전점검표	1부	품질 및 안전관리를 위한 자재검수 및 사용내역 보고
	안전관리 실적 종합
	품질시험 및 검사대장
	검측결과통보서
	자재검수 승인·결과통보서
	감리작업지시서		공정보고 양식에 공사현황 사진·영상 첨부
	감리일지·현황 사진첩
	주간공정보고
	월간공정보고
	공사사고보고서
감리완료 (총괄)	공사감리보고서	1부	-
	감리작업지시서
	시험성적 보고서
	공사현황 사진첩
	설계도면
완공	준공내역서 [설계변경 및 시공상태 도면]	USB 제출	준공도면, 준공수량산출서, 준공사진 등 포함, 발주청 요구서류 및 인허가 처리업무 수행
	준공관련 서류 [준공 수량산출서, 건축물 관리대장 등]
	주요자재 수불부 (재고기록) 정리대장
	공정별 검측대장
준공	운영 유지관리지침서	1부	시설물 규격별 기능점검 항목
	사용전 검사필증		공작물 축조신고필증 항공장애표시등 설치신고필증

나. 월간보고

매월 감리보고 내용
가. 공정현황 1) 공사개요 3) 감리용역 개요 5) 분야별 공정현황 및 주요 공정사진	2) 공정별 도급액 및 시공업체 현황 4) 공사진도
나. 주요공사 시행현황 1) 금월 주요공사 실적	2) 익월 주요공사 계획
다. 공정 및 시공계획 검토 1) 공정현황 3) 공종별 주요공사 내용 5) 주요공정사진 7) 시공내용 9) 시공도 작성현황 11) 부실공사 방지 세부실천 계획 및 실적	2) 추진공정표 4) 인력 및 장비투입현황 6) 기술검토 및 공법내용(시방서 내용포함) 8) 설계변경 및 계약금액 조정 현황 10) 검측현황
라. 안전관리 1) 안전관리 현황 3) 안전점검 총괄표 5) 주요 점검사항	2) 안전점검 및 조치현황 4) 안전관리비 사용현황 6) 익월 안전관리 중점계획
마. 품질관리 1) 선정시험 현황 3) 관급자재 총괄표 5) 사급자재 총괄표 7) 자재선정 승인현황 9) 주요자재 반입현황 11) 품질시험 및 관리현황	2) 관리시험 현황 4) 관급자재 반입 및 검수현황 6) 사급자재 반입 및 검수현황 8) 기자재의 적합성 검토 10) 주요자재의 적합성 검토
바. 하도급처리 현황
사. 직접 시공 현황
아. 주요 지시사항에 대한 처리현황
자. 기타 기술검토사항 등

다. 공사감리보고서

최종 공사감리보고서 내용

가. 공사개요

1) 공사개요

2) 공종별 도급액 및 시공업체 현황

3) 감리용역 개요

나. 공정관리

1) 공정현황

2) 추진 공정표

3) 공종별 주요공사 내용

4) 인력 및 장비투입 현황

5) 주요 공정사진

다. 품질관리

1) 선정시험 현황

2) 관리시험 현황

3) 관급자재 총괄표

4) 관급자재 반입 및 검수현황

5) 사급자재 총괄표

6) 자재선정 승인 현황

7) 기자재의 적합성 검토

라. 안전관리

1) 안전관리 현황

2) 안전점검 및 조치현황

3) 안전점검 총괄표

마. 시공관리

1) 기술검토 및 공법내용(시방서 내용 포함)

2) 시공내용

3) 설계변경 및 계약금액조정 현황

4) 시공도작성 현황

5) 검측현황

6) 부실공사방지 세부실천계획 및 실적

바. 하도급 처리현황

사. 직접시공 현황

아. 주요 지시사항에 대한 처리현황

자. 문제점 및 대책

차. 건의사항

카. 기타 특기사항

제4장 심사항목 및 평가기준

4.1. 적격심사항목 및 배점한도

가. 심사 분야별 적격심사항목

심사 분야	심사 항목	평가요소	등 급		배점 한도	비고
가. 해당 용역 수행 능력	1) 경영 상태	신용평가	○ 신용평가등급에 따른 평가점수		10	※ 주1) 참조
	2) 특별신인도	가) 해당 용역의 최근 3년간 실적합계액이 해당 용역의 기초금액 이상인 경우		: 2.0	+2.0	※ 주2) 참조
나. 입찰가격		○ 입찰가격 평점산식 참조			90	※ 주3) 참조
다. 기술 인력 보유 상황		○ 입찰공고일 현재 기술자보유현황이 관련법령에 정한 업종등록기준상 미달하는 자(단, 기술 인력이 퇴사한 경우 관련법령에 정한 변경 신고기한을 초과하여 미달하는 자)			△10	※ 주4) 참조
라. 계약 질서 준수		○고용노동부 장관이 임금체불로 명단을 공개한 횟수당 △0.2			△1.0
계					100

주1) 경영상태 평가(10점)는 입찰자가 선택한 신용평가등급에 따른 평가점수로 평가하고 비영리법인은 신용평가방법으로 평가한다. 이외의 사항은 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준 제3장 기술용역 적격심사  세부기준<별표 2> 1. 추정가격이 10억 원 이상인 용역의 평가기준 주4)와 같다

-신용평가 등급에 따른 평가점수

① 회사채에 대한 신용평가등급	② 기업어음에 대한 신용평가등급	③ 기업신용평가등급	평 점
AAA		①의 AAA에 준하는 등급	15.0
AA+, AA°, AA-	A1	①의 AA+, AA°, AA-에 준하는 등급	15.0
A+, A°, A-	A2+, A2°, A2-	①의 A+, A°, A-에 준하는 등급	15.0
BBB+, BBB°, BBB-	A3+, A3°, A3-	①의 BBB+, BBB°, BBB-에 준하는 등급	15.0
BB+, BB°	B+	①의 BB+, BB°에 준하는 등급	15.0
BB-	B°	①의 BB-에 준하는 등급	14.0
B+, B°, B-	B-	①의 B+, B°, B-에 준하는 등급	13.0
CCC+ 이하	C 이하	①의 CCC+에 준하는 등급 이하	10.0

주2) 특별 신인도 평가 (+2.0점)

가) 해당용역 이행실적은 입찰 공고일을 기준으로 완성(준공)된 용역이행실적으로 평가한다.

나) 해당용역 이행실적은 관련협회나 공공기관의 확인을 받은 실적증명서(별지 제3호 서식)를 제출해야 한다. 다만, 관련협회에 신고 받지 않은 민간회사의 용역이행실적이 있는 경우에는 세금계산서 사본(원본 제시), 계약서 사본 등 증빙자료를 첨부하여 실적증명서(별지 제3호 서식)를 제출한 경우에만 인정 평가한다.

다) 특별 신인도 가산점은 ‘해당용역 수행능력’의 배점한도 안에서 인정하고 초과하는 부분은 적용하지 아니한다.

라) 계약담당자는 해당 용역의 실적인정범위와 기준규모 ․ 금액을 입찰공고에 명시해야 한다.

주3) 입찰가격 평가 (90점)

가) 입찰가격 평점산식 (87.745%)

① 평점 = 90 - 20 ×	(	88	-	입찰가격	) × 100
		100		예정가격

※ ｜｜는 절대값 표시임.

※ 입찰가격을 예정가격으로 나눈 결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우에는 소수점 다섯째 자리에서 반올림한다.

② 입찰가격이 예정가격 이하로서 예정가격의 100분의 88.25 이상인 경우의 평점은 85점으로 한다.

나) 최저평점은 2점으로 한다.

주4) 기술인력 평가(△10점)는 <별표 2> 1. 추정가격이 10억 원 이상인 용역의 평가기준 주6)과 같다.

주5) 계약질서 준수는 <별표 2> 1. 추정가격이 10억 원 이상인 용역의 평가기준 주7)과 같다.

제 출 서 류

<별지 제1호 서식>

적 격 심 사 신 청 서

◦ 관리번호 :

◦ 용 역 명 :

◦ 수요기관 :

◦ 입찰일시 :

위 기술용역입찰의 적격심사와 관련하여 적격심사 자기평가표와 제증빙 자료를 신의성실의 원칙에 따라 붙임과 같이 제출하며, 만일 제출한 서류가 허위나 부정한 방법으로 작성된 사실이 확인될 경우에는 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제92조와 기술용역 적격심사 세부기준 등에 따라 처리해도 아무런 이의를 제기하지 않을 것을 확약합니다.

입찰자  주  소 :

회사명 :

대표자 :                           (인)

붙임 : 제출서류 목록과 관련서류 1부

경리관 귀하

---------------------------------------------------------

접  수  증

1. 관리번호 :

2. 용 역 명 :

3. 제 출 자 :

위 용역입찰의 적격심사신청서와 관련서류를 접수했음을 확인합니다.

20    .     .     .

경리관               (인)

<별지 제2호 서식>

적격심사 자기평가와 심사표

1. 심사대상용역                2. 심사대상자

관리번호			업 체 명
입찰일시			대 표 자		전화번호
용 역 명			업종구분	감리( ), 설계( ), 기타( )
용역기간			3. 회사를 대표하는 연락책임자 인적사항
입찰금액			소 속
예정가격			직 위		FAX번호
제출기한			성 명		전화번호

4. 종합평가

(단위 : 점)

구 분		배 점	자기평점	심사평점
계		100
수 행 능 력
지역업체참여도
경영상태	자본비율
	유동비율
입 찰 가 격
해당지역영업활동기간
해당지역실제영업활동여부
기 술 인 력

<별지 제3호 서식>

기술용역 이행실적 증명서

신청인	업체명(상호)						대 표 자
	영업소재지						전화번호
	사업자번호						제 출 처
	증명서용도	기술용역 적격심사 신청용
	용역범위․기준 (면적․금액 등)
용역 이행 실적 내용	용 역 명						구분			설계 ( ) 감리 ( ) 기타 ( )
	용역 개요
	계약번호	계약일자	계약기간	규 모		이행실적					비고
						비율			실적
증명서 발 급 기 관	위 사실을 증명함. 년 월 일
	기 관 명	(인)			전화번호
	주 소				FAX번호
	발급부서				담 당 자

주1) 민간거래실적은 세금계산서, 계약서 등 증빙자료를 첨부해야 한다.

2) 용역이행실적은 입찰공고의 용역범위와 기준(면적, 금액 등) 등의 조건에 부합하는 실적에 한하며, 공동도급 실적은 비율과 이행실적을 기재해야 한다.

3) 이행실적란은 기재 후 투명접착테이프를 붙여 증명을 받아야 한다.

<별지 제5호 서식>

용역기술자 보유현황표

가. 일반기술자 현황

구 분	회 사 별 보 유 인 원 수						비고
	ㅇ회사	ㅇ회사	ㅇ회사	ㅇ회사	ㅇ회사	합 계
일반기술자 (인 원 수)
경력기술자 (점 수)

나. 경력기술자 현황

번호	성명	소속	주민등 록번호	기술자 등 급	용역명	참여기간	점수	비고
								증명서 첨 부
합 계

<별지 제6호 서식>

용역기술자 경력사항 확인서

소 속		직 위		공 종
성 명		주민등록번호(여권번호)		참여기간
기술분야	기술자 종류	기술자등급		용역분야 종사기간
○ 해당분야 용역참여 실적 * 금액 : 천원
발 주 자	용 역 명	해당용역 규모․금액	용역금액	참여기간	담당업무
위와 같이 우리 회사 소속직원의 기술자 경력사항을 확인하여 주시기 바랍니다. 20 . . . 주 소 : 회사명 : 대표자 : (인)
위 사실을 확인함. (발급기관명)
주1) 초급기술자 이상 기술자로서 해당용역과 동일하거나 유사한 종류(준공금액 1억원 이상)의 기술용역에 3년 이상(자격취득 전․후 포함) 종사한 기술자의 경우에 해당된다. 2) 용역규모와 금액이 불분명한 경우에는 평가에서 제외할 수 있다. 3) 기술자 등급란에는 건설기술관리법 등의 학력․경력기술자 등급이나 국가기술자격법의 기술자등급을 기재한다.

양식 첨부

[별지 제16호 서식]

품질시험계획

공사명 :                   작  성  일 :        년       월       일

시공자 :                   현장대리인 :             (인 또는 서명)

1. 시험계획회수

공 종	시험종목	시험계획물량	시험빈도	계획시험회수	비 고

2. 시험시설 및 인력배치계획

가. 시험시설

장 비 명	규 격	단 위	수 량	비 고

나. 시험인력

등 급	품질관리업무 수행기간	성 명	비 고
			* 기술자격 또는 학·경력사항 기재

[별지 제17호 서식] 품질시험․검사성과 총괄표 공사명 : ○○ 공사(공사기간 . . ～ . . 공정 : %)
공 종	시험․검사종류 (재 료)	시험․검사회수					비 고
		계 획	실 시	합 격	불합격	재시험
작성일시 : 년 월 일 작 성 자 : 소속 : 직위 : 성 명 : (인 또는 서명)

[별지 제18호 서식]

품질시험․검사실적 보고서

공 종	시험․검사 종 목	계획시험 ․ 검사회수	전월까지 시험․검사회수				금월 시험․검사회수				누계 시험․검사회수
			실 시	합 격	불합격	재시험	실 시	합 격	불합격	재시험	실 시	합 격	불합격	재시험

[별지 제19호 서식] 검 측 대 장 공사명 : ○○공사 공사감독자 : (인)
공 종	검 측 부 위 (설계규격, 단위, 수량 포함)	검측일	검 측 내 용	합격 여부	검측결과 또는 입증자료
주) 매몰부분은 사진 첨부

[별지 제8호 서식]

주요자재 검사 및 수불부

주요자재 검사 및 수불부

품명 :

설계량	단위	규격	반입일	반입량	합격량	불합격		출고일	출고량	잔량	검수자	서명
					금회 누계	불합격량	사유
※작성요령 1. 상단은 반입검수자가 하단은 출고검수자가 기재합니다. 2. 현장 반입 후 작업장 반출 시 까지는 감리원의 감독하에 관리합니다. (매 출고시마다 감리원이 확인하여 반출량 및 잔량을 확인하여야 합니다.)

[별지 제21호 서식] 안전보건 관리체제 1. 안전보건관계자
구분	선임 연․월․일	소속	직급(위)	성명	자격명	전화번호 (휴대폰)
안전보건관리책임자
안전보건총괄책임자
안 전 관 리 자
보 건 관 리 자
2. 노사협의체
구분	근로자위원			사용자위원
	소속	직급(위)	성명	소속	직급(위)	성명
대표
위원
위원
위원

[별지 제22호 서식] 재해발생 현황 1. 발생현황
구 분	재해자 수		사 망				부상(휴업기준)														업무상질병				재해율
							3-7일			8-29일				1-3월미만				3월이상
분기별
( ) 월
( ) 월
2. 재해유형
구분	계	떨어짐		넘어짐		깔림		부딪힘	맞음		무너짐	끼임	절단 베임 찔림		감전	폭발 파열	화재		깔림	화학 물질 접촉		산소 결핍	불균형 및 무리한 동작	사업 장내 교통 사고		사업 장외 교통 사고	기타
분기별
( ) 월
( ) 월

[별지 제23호 서식] 안전교육 실적표
구 분	실시회수	주요내용	교 육 인 원		비 고
			직 원	기 능 직
정기교육
특별교육
계

[별지 제24호 서식]

협의내용 등의 관리대장

1. 사업개요

사 업 명		사 업 자
사업승인기관		사 업 승 인 일
환경영향평가 협 의 기 관		환경영향평가 협 의 일
사 업 착 공 (예 정) 일		사 업 준 공 (예 정) 일
협 의 내 용 관 리 책 임 자		성 명
사 업 규 모
사 업 내 용

2. 협의내용 이행계획

구 분	협 의 내 용	이 행 계 획
		이 행 방 법	이 행 주 체	이 행 시 기

3. 협의내용 이행현황

연월일	공정률(%)	협 의 내 용	이행내역	미이행사항 및 사후대책

[별지 제26호 서식]

공사기성부분검사원(제  회)

공사감독자경유             (인)

1. 공  사  명 :

2. 위       치 :

3. 계 약 금 액 :

4. 계약년월일 :

5. 착공년월일 :

6. 준 공 기 한 :

7. 현 재 공 정 :      .    .    .     현재      %

8. 첨 부 서 류 : 공사기성부분내역서, 기성부분사진

위 공사의 도급시행에 있어서 공사 전반에 걸쳐 공사설계도서, 시방서, 품질관리기준 및 기타 약정대로 어김없이 기성되었음을 확인하오며 만약 공사의 시공·감독 및 검사에 관하여 하자 발견시에는 즉시 변상 또는 재시공할 것을 서약하고 이에 기성검사원을 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

년    월    일

주   소

상   호

성   명                       (인)

귀   하

[별지 제27호 서식]

준  공  검  사  원

공사감독자경유             (인)

1. 공  사  명 :

2. 공 사 위 치 :

3. 계 약 금 액 :

4. 계약년월일 :

5. 착공년월일 :

6. 준 공 기 한 :

7. 실지준공년월일 :

8. 첨 부 서 류 : 준공사진

위 공사의 도급시행에 있어서 공사전반에 걸쳐 공사설계도서,  제시방서, 품질관리기준 및 기타 약정대로 어김없이 준공하였음을 확인하오며 만약 하자책임기간내에 공사의 시공·감독 및 검사에 관하여 하자 발견시에는 즉시 실액변상 또는 재시공할 것을  서약하고 이에 준공검사원을 제출합니다.

년    월    일

주   소

상   호

성   명                      (인)

귀   하

[별지 제28호 서식] 공사기성부분 내역서 1. 도 급 액 : 2. 공 사 명 : 3. 기성부분금액 : 20 년 월 일 현재 4. 내 역 : (갑)
공사 내역	규 격	도 급 액			전회까지의 기성액			금회 기성액			적 요
		수량	단가	금액	수량	금액	비율(%)	수량	금액	비율(%)
(을)
공사 내역	규 격	도 급 액			전회까지의 기성액			금회 기성액			적 요
		수량	단가	금액	수량	금액	비율(%)	수량	금액	비율(%)

[별지 제29호 서식]

[별지 제30호 서식]

준공검사원

책임건설사업관리기술인 경유          (인)

1. 공  사   명  :

2. 공 사 위 치  :

3. 계 약 금 액  :

4. 계약 년월일  :

5. 착공 년월일  :

6. 준 공 기 한  :

7. 실지준공년월일  :

8. 첨 부 서 류  : 준공사진

위 공사의 수급시행에 있어서 공사전반에 걸쳐 공사설계도서, 품질관리기준 및 기타 약정대로 어김없이 준공하였음을 확인하오며 만약 공사의 시공, 건설사업관리 및 검사에 관하여 하자가 발견될 시는 즉시 실액 변상 또는 재시공할 것을 서약하고 이에 준공검사원을 제출합니다.

20     년     월    일

주  소  :

상  호  :

성  명  :

귀   하

[별지 제31호 서식]

예 비 준 공 검 사 조 서

공  사  명 :

년     월     일     준공예정

년     월     일     과 계약분

위 공사 예비준공검사의 명을 받아     년   월   일 검사한   결과를 붙임과 같이 보고합니다.

붙임 : 예비준공검사결과

년       월       일

예비준공검사관        (인)

귀   하