광역안전컨트롤타워 관제탑 구축

시설공사 과업지시서

2024. 3.

						목 차

제1장 과업 개요	1

제2장 일반 시방	2

제3장 제작 시방	15

제4장 심사항목 및 평가기준	25

양식첨부

제1장 과업 개요

1.1.  공 사 명  :  광역안전컨트롤타워 관제탑 구축 시설공사

1.2.  공사기간  :  착공일로부터 24년 6월 28일까지

※ 용역기간 중, 천재지변으로 인한 과업수행의 차질 또는 과업과 관련된 통념상 인정되는 부득이한 사유가 발생되었을 때 협의 후 연장 가능

1.3.  공사위치  :  울산광역시 남구 부곡동 129-4번지 內

	관제탑 설치위치 및 조감도

1.4.  공사목적

가. 울산 국가산단 지하배관 통합안전관리센터 부지에 구축, 산단 내 주·야간 실시간 모니터링을 통한 안전환경 구축

나. 원거리EOIR카메라 및 레이저 거리 측정 장비 부착을 위한 시설공사

1.5.  공사내용

1.5.1.  주 공 종  :  철근･콘크리트공사 외

1.5.2.  공사범위  :  지상 70M 높이, 최대면적 123.21㎡ 철골구조 공작물 조립설치

1.6.  추정금액  :  금1,201,530,000원

주 공 종	추정금액(비율)	추정가격+부가가치세
철근·콘크리트공사업	1,201,530,000원(100%)	1,092,300,000+109,230,000원

제2장 일반 시방

2.1.  적용범위

가. 적 용

본 시방서는 울산정보산업진흥원에서 발주하는『광역안전컨트롤타워 관제탑 구축공사』에 적용한다.

나. 적용순서

1) 설계도서는 상호보완의 효력을 가지고 있으며 상호 모순이 있거나 모호할 때에는 제작계약 일반조건에서 규정하는 바에 따른다.

2) 일반 및 특별 시방에 규정되지 않은 사항은 관련법규 및 국토해양부 제정 표준시방서 등 을 준용한다.

다. 법규 우선 준수

1) 계약상대자는 다음의 관계법규와 제 규정 및 계약사항 등을 준수하여야 하며, 위법으로 인해 발생되는 모든 문제에 대하여 책임을 진다.

가) 전파법 및 동 시행령

나) 정보통신공사업법 및 동 시행령

다) 전기사업법 및 전기공작물 규정

라) 산업안전보건법 및 동 시행령

마) 보안 관계 제법령 및 규정

바) 폐기물관리법

사) 기타 본 공사와 관련한 제법령, 규정 및 현장설명 사항

2) 계약상대자는 이 시방서에 “법규에도 불구하고 이 절에서 정하는 바에 따른다”라고 별도로 명시되어 있지 않는 한, 이 시방서를 포함한 설계서의 내용이 대한민국 관련법규의 규정과 상호 모순될 경우(공사 중에 관련법규가 변경되고 변경된 규정에 따라야 할 경우를 포함한다)는 대한민국 관련 법규의 규정을 우선하여 준수하여야 한다.

2.2. 용어의 정의

가. 설계서

이 시방서에서 “설계서”라 함은 "공사계약 일반조건 제2조제4호”의 “설계서”로써 시방서, 설계도면, 현장 설명서 및 공종별 물량 내역서를 말한다.

나. 계약문서

본 시방서에서 “계약문서”라 함은 "공사계약 일반조건 제3조”의 “계약문서”로써 계약서, 설계서, 공사입찰유의서, 공사계약일반조건, 공사계약특수조건 및 산출내역서로 구성되며, 상호보완의 효력을 가진다.

다. 감독자

이 시방서에서 "시설공사 감독자(이하 이 시방서에서 “감독자”라 한다)"라 함은 "공사 계약 일반조건 제2조 제3호"의 “공사감독관”을 말한다.

라. 계약상대자

이 시방서의 계약상대자라 함은 "공사계약일반조건 제2조 제2호"의 계약상대자를 말한다.

마. 용어의 해석

이 시방서에 사용된 용어의 해석은 아래 우선순위에 따라서 해석한다.

1) 계약문서(이 시방서를 포함한다)

2) 건설기술진흥법, 동법 시행령 및 동법 시행규칙

3) 기타 건설 관련

2.3. 계약상대자의 책무

2.3.1. 설계서 검토

가. 계약상대자는 공사 착수 전에 설계서를 면밀히 검토하여, 설계서의 오류, 누락 등으로 인해 공사에 잘못이 발생하거나 공기가 지연되지 않도록 적절한 조치를 하여야한다.

나. 설계서 검토 결과 아래와 같은 경우가 있을 때에는 공사 착수예정일 전까지 현장대리인의 검토의견서를 첨부하여 울산정보산업진흥원 발주부서에 통지하고 울산정보산업진흥원의 해석 또는 지시를 받은 후에 공사를 시행하여야 한다.

1) 공사협의 및 조정을 필요로 하는 사항이 있는 경우

2) 설계서와 같이 시공하는 것이 불가능한 사항이 있는 경우

3) 공사기한 연기를 필요로 하는 사항이 있는 경우

4) 기타 계약상대자가 지급받을 권리가 있다고 생각되는 추가비용이 있는 경우

5) 기타 하자발생이 우려되는 사항이 있는 경우

다. 계약상대자가 울산정보산업진흥원에 통지하지 아니하거나 울산정보산업진흥원의 해석 또는 지시를 내리기 전에 임의로 수행한 공사에 대하여는 기성량으로 인정하지 않는다. 또, 계약상대자가 임의로 시행한 공사에 대하여 감독자의 원상복구나 시정지시가 있을 때는 계약상대자의 부담으로 즉시 이행하여야 한다.

2.4.2. 공사수행

가. 계약상대자는 계약문서에 위배됨이 없이 공사를 이행하여야 하며, 감독자의 정당한 시정요구 또는 이행 촉구지시가 있을 때에는 즉시 이에 따라야 한다. 또한, 계약문서에 정해진 것에 대하여는 울산정보산업진흥원 또는 감독자의 승인, 검사 또는 확인 등을 받아야 하며, 울산정보산업진흥원의 승인을 받은 문서는 계약문서와 동등한 효력을 가진다.

나. 설계서에 명시되지 않은 사항이라도 구조상 또는 외관상 당연히 시공을 요하는 부분이 발견된 경우 감독자와 상의하고 필요에 따라 설계변경 하여야 한다.

다. 계약상대자는 건설공사와 관련하여 정부 또는 울산정보산업진흥원이 시행하는 감사, 검사 수감 및 이에 따른 시정 지시를 즉시 이행하여야 하며, 울산정보산업진흥원의 과실이 없는 한 이를 이유로 공사기한 연기 또는 추가 공사비를 요구할 수 없다.

라. 계약상대자는 공사 현장의 이용효율 및 작업효율 증대, 품질 향상, 안전사고 및 환경 공해 예방, 보건·위생 등을 위하여 공사용 자재, 기계기구, 잔재의 정리·정돈·점검·정비·청소 등을 충분히 행하여 현장 내를 청결하게 유지하여야 한다.

마. 계약상대자는 “공사계약일반조건 제47조제1항”에 따라 공사를 일시 정지한 경우에는 공사 중단으로 인하여 공사목적물의 품질이 저하되지 않도록 공사 중단부분, 공사물 및 가설재 등을 보호하거나 정비하여야 한다.

바. 건설 목적물인 모든 구조물과 시설물은 업무 중에 찔림, 긁힘, 눌림, 찢김, 베임, 꺾임, 미끄러짐, 떨어짐 및 끼임 등의 위해가 발생되지 않도록 시공되어야 한다.

2.4.3. 책임 한계

가. 계약상대자는 현장대리인 등 계약상대자가 당해 공사를 위하여 임명·지정·고용한 자 및 계약상대자와 납품계약 또는 하도급계약을 체결한 자의 공사와 관련한 행위 및 결과에 대한 일체의 책임을 진다.

나. 공사목적물을 공사에 인도하기 전에 발생한 공사목적물의 파손, 오염, 분실, 변형 등으로 인한 피해나 계약상대자 등이 제3자에게 끼친 손해에 대하여는 계약상대자가 교체, 원상복구, 손해배상 등 일체의 책임을 진다.

다. 계약상대자가 울산정보산업진흥원에 대하여 행하는 보고, 통지, 요청, 문제점 또는 이의제기는 서면으로 하여야만 그 효력이 발생한다.

2.4.4. 현장대리인 등의 현장상주

가. 계약상대자는 관련법에 의한 자격 소지자를 현장대리인으로 선정하여 현장에 상주하도록 하여야 하며, 현장대리인은 감독자의 지시에 따라 공사를 충실히 수행하여야 하고, 감독자의 승인 없이는 현장을 이탈할 수 없다.

나. 계약상대자가 지정·배치한 현장대리인, 현장요원, 안전관리자(담당자), 품질관리자 등은 현장에 상주하여야 한다.

다. 현장대리인은 현장 업무를 보다 원활히 수행하기 위한 사무요원, 도면작성원 등을 감독자와 협의하여 편성 운영한다.

라. 현장대리인은 공사착공과 함께 공사지역의 관계기관 및 업체에 공사시행에 대한 사전 설명을 하는 등 공사추진에 지장이 없도록 조치하여야 한다.

마. 감독자는 현장대리인, 현장요원 및 기타 시공자의 사용인이 공사시행 또는 관리측면에서 부적당하다고 인정될 경우에는 시공자에게 그 교체를 요구할 수 있다.

2.4.5. 화재예방 및 안전사고 방지 등

가. 건설공사 재해방지는 산업안전보건법 등 관계 법령에 따라 철저히 이행하여야 하며, 공사시행 중 현장대리인은 화재, 도난, 안전사고 등의 재해방지를 위한 계획을 수립하여 시행하여야 하며, 특히 작업자 및 기타 출입자에 대한 감시를 철저히 하여 음주, 풍기문란 등의 행위가 없도록 하여야 한다.

나. 안전관리자 또는 안전담당자를 관계법령에 적합하게 별도로 지정하여 현장을 수시로 순찰하게 하여 각종 안전사고가 없도록 하여야 하며, 관련법령에 따른 교육을 실시하고 기록을 유지하여야 한다.

다. 안전관리비의 집행에 따른 집행계획 및 집행실적을 항시 비치하고 관계 법령에 따라 적합한 용도에 사용하여야 한다.

라. 시공자는 근로자의 산업재해예방과 건강관리를 위하여 산업안전보건법등 관련규정을 준수하고 의무와 책임을 성실히 이행하여야 한다.

마. 공사 시공 중 사고가 발생하였거나 발생할 우려가 있을 경우에는 즉시 감독자에게 보고하고 적절한 응급조치를 취하여야 한다.

바. 공사 시공 중 변형이 생길 때는 그 변경사항을 확인할 수 있는 자료(사진, 변형측정도 등)를 감독자에게 제출하여야 하며, 주위 건축물 기타 제3자에게 피해가 있을 시에는 즉시 응급조치를 취함과 동시에 사후처리 하며, 이에 대한 비용은 도급자 부담으로 한다.

사. 시공자는 공사 착공 전 관련기관과 협조하여 지하 매설물, 인접건물 등이 손상되지 않도록 보호하여야 한다.

2.4.6. 손해 배상

공사 시행 중 도급자 과실로 인한 재해가 발생한 경우 또는 제3자에게 미치는 장애 및 손해에 대하여는 신속히 원상 복구 및 배상조치를 취하여야 하며, 이에 대한 모든 비용은 도급자가 부담하여야 한다.

2.4.7. 안내 및 보양

가. 감독자와 협의하여 지정하는 위치에 공사안내문을 미려하게 설치하여야 한다.

나. 기존시설, 완공부분, 신품재료 등이 손상 또는 오염이 되지 않도록 적절한 방법으로 보양하여야 하며, 공사 중 손상부분은 준공기간 내에 원상복구 하여야 한다.

2.4.8. 재 료

가. 사용재료

1) 본 공사에 사용하는 모든 재료는 신품으로 한국산업규격[KS] 제품을 사용하여야 하며, “자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률”에 따른 재활용품 및 “친환경상품 구매촉진에 관련 법률(이하 친환경상품법)에 따른 친환경상품을 적극 활용할 수 있도록 하며, 한국산업규격[KS] 제품 및 재활용품이 없을 시에는 동등 품질 이상의 재료를 사용하여야 한다.

2) 한국산업표준[KS]에 적합한 제품, 기타 관계법규에 의하여 품질검사를 받았거나 품질을 인정받은 재료는 시험을 생략할 수 있으며, 재료시험은 설계도서에 정한 조건의 적합함을 증명할 수 없는 경우에 시행한다.

나. 재료의 반입과 보관

1) 재료는 반드시 규정된 조건에 적합한지 감독자의 승인을 사전에 득한 후 반입하여야 하며, 합격된 재료는 지정된 장소에 안전하게 보관하고 불합격된 재료는 즉시 현장 밖으로 반출하여야 한다.

2) 재료의 반입과 관련하여 필요한 경우 감독자는 국가공인기관에 의뢰하여 시험을 실시할 수 있으며, 이 경우 비용은 도급자의 부담으로 한다.

2.4.9. 설계도서 작성 및 관리

가. 본 공사의 구조안정성 및 설계의도를 충분히 반영하기 위해 필요한 세부 시공상세도는 감독자가 제시하는 설계도를 기준으로 작성하여 제출, 감독자의 사전승인을 득한 후 공사에 임하여야 하며, 이로 인하여 공정에 지장이 없도록 하여야 한다.

나. 본 공사 완료 후에는 설계도서를 감독자에게 반납하고 공사 중에는 외부로 유출되지 않도록 철저히 관리한다.

2.4.10. 공사보고

가. 공정 보고

현장대리인은 공사의 진척, 예정사항 재료의 반입 및 기타 필요한 사항 등이 포함된 일일공사일지, 주간, 월간 공정보고서 등을 감독자에게 제출하여야 한다.

나. 공사 사진

“3. 공무행정서류 및 제출물 – 3.3. 공사사진” 참조

2.4.11. 공사장 관리

가. 본 공사장의 관리는 근로기준법, 근로안전관리규칙, 근로관리위생규칙 기타 관계법규에 의하여 시행하되 특히, 다음 사항을 준수하여야 하고 사고 발생의 책임은 시공자 책임으로 한다.

1) 노무자 기타출입 감시, 풍기 및 위생단속

2) 화재, 도난, 소음방지, 위험물 및 그 위치 표시, 기타 사고방지에 대한 단속

3) 인접건물, 시설물 및 수목 기타의 손상에 대한 보호시설 설치

4) 시공재료 및 시공설비의 정리와 관리, 현장 내외의 청소

5) 주변도로의 정비, 교통정리, 교통안전 관리 및 보호시설 설치

6) 공사장주변의 보안조치, 교통정리, 교통안전장비, 재해 예상시설 및 유사시 대책마련 등

7) 공사현장 내에 출입하는 모든 사람은 안전모를 착용토록 함

나. 본 공사장 내에서 감독자의 지시에 불응하는 기술자(기능공, 인부 포함) 또는 감독자가 미숙련공으로 인정하여 숙련공으로 교체 요구하면 즉시 이에 순응하여야 한다.

2.4.12. 환경관리

가. 시공자는 대기환경보전법, 수질환경보전법, 소음, 진동규제법 기타 환경관련법령을 준수하여 공사시공에 수반하는 공해가 발생하지 아니하도록 하여야 한다.

나. 시공자는 시공 중 먼지, 진동, 탁수, 충격, 소음 등으로 공항이용고객이나 통행인에게 불편이나 공해가 없도록 최선을 다해야 한다.

다. 시공자가 시공을 함으로써 발생하는 비산먼지가 환경기준을 초과하거나 초과할 우려가 있는 공사에서는 비산먼지 발생을 억제하기 위한 시설을 설치하여야 한다.

라. 특정공사로 인하여 발생하는 소음, 진동을 규제할 필요가 있다고 인정되는 지역을 건설 소음, 진동 규제지역으로 감독자가 지정할 수 있다. 그 특정공사의 종류, 규제지역의 범위 및 생활소음 규제기준범위는 관계법규의 기준을 따라야 한다.

마. 시공자는 공사 중 또는 공사 준공 후에 공사현장 및 인근의 환경에 파괴, 훼손이 없도록 하여야 한다.

2.4.13. 각종 자문조건 등 이행

가. 공사를 시행함에 있어 공사 중에 중요한 사항을 결정하는 단계에서 발주자가 필요하다고 인정할 때에 계약상대자는 자문위원회(구조안정성 및 마감자재 선정 등)를 결성하여 전문적이고 기술적인 자문을 구해야 하며, 그 결과로 제시된 의견에 대해서는 시공에 반영하여야 한다. 이에 따른 각종 준비 및 비용은 계약상대자가 부담한다.

3. 공무행정서류 및 제출물

공사의 진행을 위하여 공무행정에 관한 서류를 사실과 그 증빙자료에 준거하여 작성하여야 하며, 상시 비치를 요하는 서류는 공사 중에는 울산정보산업진흥원나 감독자가 필요시 수시로 열람 할 수 있도록 비치하고, 제출을 요하는 서류는 지정된 제출시기에 지정된 부수를 울산정보산업진흥원 발주부서에 제출하여야 한다.

3.1. 착공서류

3.1.1. 착공신고서

가. 제출서류

1) 착공신고서 [양식 1]

2) 현장기술자 지정신고서 [양식 2]

3) 현장대리인 청렴이행서약서

나. 제출시기 : 공사착공 시

3.1.2. 공사계획서류

가. 제출서류

1) 공사예정공정표(C.P.M 또는 BAR CHART)

2) 안전관리계획서

3) 유해·위험방지계획서

4) 시공상세도(샵드로잉)

5) 시공상세도에 따른 구조확인 검토서(또는 구조안전확인서)

6) 직접시공계획서

7) 확정제작설계도

8) 납품계획서

9) 품질시험계획서

10) 현장기술자 조직표(현장 담당원 조직표 및 현장기술자 조직표를 함께 제출)

나. 기술지원

위 공사계획서류와 관련하여, 해당 공작물의 구조안전을 위해 고급기술자 등급의 해당 기술자에게 기술지원을 받아야 한다. 구조검토서 및 구조안전확인서 작성을 요청 후 해당 서류는 시공상세도와 함께 제출한다.

다. 제출시기 : 공사착공 시와 계획변경 시

계약 상대자는 계약 후 제작 설계도를 제작시행에 필요한 자재의 정확한 물량과 제작 여건 및 현장설명 사항을 정확히 파악하여 관제탑(철탑)제작에 차질이 없도록 해야 한다.

3.2. 공사예정공정표

3.2.1. 공정표

가. 공사예정공정표는 C.P.M 또는 BAR CHART 방식 등으로 작성되어야 한다.

나. 공사예정공정표에는 다음 사항이 명시되거나 첨부되어야 한다.

1) 주요공정단계별 착수시점, 완료시점

2) 주간 공정률 및 누계진도

다. 제출시기 : 공사착공 시와 계획변경 시

3.3. 공사 사진

3.3.1. 비치 및 제출

공사 진행에 따라 공정별, 부위별로 감독자가 지시하는 공정, 공사 시공 중 매몰되어 나타나지 않는 부분 또는 준공 후 해체되는 가설물 등에 대하여 수시로 부분 및 전경을 분명히 나타내는 천연색 사진 또는 유사한 촬영방법으로 기록, 사진첩 및 USB등으로 정리하여 상시 현장에 비치하여야 하며, 준공 시, 필요에 의해 감독자가 요구하는 경우 울산정보산업진흥원에 제출하여야 한다.

3.3.2. 촬영방법

공사시공 중 매몰되는 주요부위에 대해서는 기술적 판단자료로 활용할 수 있도록 시공 상태가 분명히 나타나게 주요부위의 상세 및 주변을 포함한 전경을 촬영하여야 한다.

3.4. 공사작업일지

3.4.1. 제출서류

가. (일일)공사작업일지 [양식 7]

나. 주간공정보고 [양식 8]

다. 월간공정보고 [양식 9]

3.4.2. 제출시기

가. (일일)공사작업일지 : 매일(주말 및 휴일 포함) 18:00시 이전

나. 주간공정보고 : 매주 금요일 18:00시 이전

다. 월간공정보고 : 전월에 대해 매월 3일

3.5. 준공검사원

3.5.1. 제출서류 : 준공검사원

가. 준공검사원 [양식 3]

3.5.2. 제출시기 : 준공검사 요청 시

3.5.3. 준공검사원 제출 시 감독자의 확인을 받아야 하는 사항

가. 안전관리비 및 환경보전비 등 사용내역

나. 공정현황

다. 시공확인 결과에 관한 기록

라. 현장점검 지적사항 조치완료 여부

3.6. 변경승인 요청

3.6.1. 설계변경승인 요청

가. 제출서류

1) 변경요청 공문

2) 변경 사유서

3) 변경 총괄표, 내역서 및 산출근거

4) 변경 설계도면

5) 기타 관련 증빙자료(관련사진 등)

나. 제출시기 : 설계변경 승인 요청 시

3.6.2. 공사기한 연기원

가. 제출서류

1) 공사기한 연기원 [양식 4]

2) 연기사유 및 연기사유로 인한 주 공정 지연일 산출근거

3) 공사 중단 사실 확인서 및 증빙자료(공사 중단으로 인한 공사기한 연기원 제출 시)

4) 공사의 준공일정계획에 대한 의견서

5) 기타 관련증빙자료

나. 제출시기 : 공사기한 연기 요청 시

3.7. 자재관리서류

3.7.1. 자재 선정검토 요청서 [양식 5]

공사용 자재 선정을 위하여 자재선정 검토 요청 시 1부 제출한다. 이 요청서에는 해당제품에 대한 자료를 첨부하여야 한다.

3.7.2. 자재 검수부 [양식 6]

공사용 자재(지급자재를 제외한다) 반입 시마다 승인된 제출자료 및 견본과 일치하는지 여부를 확인한 후, 그 결과를 품목별로 기록하여 비치한다. 또한 자재반입 시, 각 자재에 대한 거래명세표 및 납품확인서 사본을 함께 제출하여야 한다.

3.8. 안전관리서류

3.8.1. 안전관리계획서

계획서 제출시기 및 부수는 “3.1. 착공서류 – 3.1.2. 공사계획서류”에 따른다.

3.8.2. 일일 안전점검표

계약상대자가 자체관리하며, 안전점검, 안전검사, 안전보건교육, 안전의 날 행사 등 관련법에 적법하게 시행하여야 하며 기록사항은 상시 비치하여야 한다.

3.8.3. 안전일지

계약상대자가 자체관리하며, 관리기록을 상시 비치하여야 한다.

3.8.4. 안전관리비 사용내역 및 집행영수증

계약상대자는 안전관리비 항목별 세부사용내역 및 집행영수증 사본을 월 1회, 기성검사원 및 준공검사원 제출 시 1부를 제출하여야 한다.

3.9. 공사 준공 시 관련 제출물

공사를 완성하면 시공자는 감독자의 입회하에 다음에 제시한 서류, 물품과 함께 공사의 목적물을 발주자에게 인도한다.

가. 준공도면

나. 해당 시설물의 유지관리에 관한 지침서

다. 공사 관련 서류

라. 공사시방서에 의한 예비재료 및 물품 (설비용의 예비부품을 포함한다)

마. 감독자가 지시하는 기타의 자료, 재료, 기구류

바. 열쇠인도서 및 열쇠함

3.10. 기타서류

가. 직접시공계획서

나. 폐기물 배출자신고서

다. 건설정보관리(국토교통부) 데이터 입력자료(해당 시)

라. 기타 감독자가 요청하는 자료

4. 보안업무관리

4.1. 적용범위

4.1.1. 본 공사 대상 시설물은 국가중요시설로서 공사를 수행하는 계약상대자는 보안업무와 관련되는 법률, 시행령, 규칙, 훈령, 예규 및 울산정보산업진흥원 보안업무규정, 보호구역출입증규정, 도면관리예규 등을 항상 숙지하고  이를 준수해야 하며, 계약상대자 자신이나 그의 고용인이 상기의 법률, 시행령, 규칙, 훈령, 예규 및 울산정보산업진흥원 보안업무규정, 도면관리예규 등을 위반함으로써 보안사고나 기타 책임문제가 야기되지 않도록 하여야 하며, 이에 대한 모든 책임은 계약상대자에게 있다.

4.1.2. 관련 법령 및 규칙

가. 보안업무규정 (대통령령 제21214호)

나. 보안업무규정시행규칙 (대통령훈령 제149호)

다. 국토교통부 보안업무 시행세칙 (국토교통부 훈령)

4.1.3. 보안유지

국가 주요시설의 공사인 경우 계약자, 현장대리인, 노무자 등은 보안각서를 작성하여 감독자에게 제출하여야 한다.

4.2. 보안각서 [양식 11~12]

4.2.1. 공사 착공 시 계약대상자 및 현장대리인은 울산정보산업진흥원 보안업무규정에 의거 보안각서를 제출하여야 한다.

4.2.2. 계약상대자 및 현장대리인은 울산정보산업진흥원 보안업무규정에 의거 참여자 전원에게 보안교육을 실시하고 보안각서를 징구하여 제출하여야 한다.

4.3. 도면관리

4.3.1. 도면의 대출

가. 공사에 필요한 도면은 울산정보산업진흥원 “도면관리예규 별지 제6호 서식(도면 열람․대출 신청서/서약서)”에 의거 신청한 후 울산정보산업진흥원의 승인을 받아 대출 받아야 한다. [양식 10]

나.	대출받은 도면은 대출목적 이외의 사용을 금하고 대출기간 만료 이전이라도 대출 목적이 충족되면 즉시 반납하여야 한다.

다. 대출받은 도면은 임의로 복제․복사를 하여서는 아니 되며, 필요시 울산정보산업진흥원에 추가 대출을 요청하고 이에 소요되는 비용은 계약상대자가 부담한다.

4.3.2. 도면관리

가. 대출받은 도면은 관리번호를 부여하여 철저하게 관리해야 한다.

나. 대출받은 도면을 하도급자에게 불출할 경우에는 기록유지를 철저히 하고 불출목적이 충족되면 즉시 반납을 받아야 한다. 하도급자에게 불출된 도면의 관리도 계약상대자 책임 하에 관리하여야 한다.

4.3.3. 도면반납

대출받은 도면은 공사완료 후 즉시 울산정보산업진흥원에 반납하고 도면반납영수증을 교부 받아야 한다.

제3장 제작 시방

3-1. 개요

본 시방서는 울산정보산업진흥원 광역안전컨트롤타워 구축공사에 사용되는 관제탑(철탑) 자재의 제작, 보관, 검사에 적용된다.

3-2. 제작

본 관제탑(철탑) 및 LADDER와 가대에 쓰이는 부재 또는 BOLT, NUT는 KBS에 의해 승인된 설계도 또는 구조상세도(제작도)에 준한 우량 재료를 쓰고 우수한 작업인에 의하여 제작하여야 한다.

3-3. 재료

관제탑(철탑)에 쓰이는 모든 재료는 KS규격에 맞는 우량품이어야 하며 강재 생산업체의 재료검사증명서를 소유해야 한다. 만일 KS규격 이외의 재료를 쓸 경우 사전에 울산정보산업진흥원의 승인을 받아야 한다.

가. 품   질

1) 형강, 강판, 평강은 KS-D3515 용압구조용압연강재 제2종(SM275 또는 SM420)으로 한다.

2) 봉강은 KS-D3515 일반구조용 제2종(SM-275), 제3종(SM-420) 또는 구조용 합금강, CROM 강 강재 제4종(SCR4)의 한다.

나. 형상, 규격 및 중량

1) 형상, 규격 및 중량 그리고 그 허용량은 다음 각 호에 의한 것으로 한다.

- 형강, 강판, 평강, 봉강 : KS - D3515

- BOLT : KS-D3501 철탑용 BOLT 및 철탑용 고장력간 BOLT

다. 재료의 사용구분은 아래와 같은 것으로 한다.

1) SM-275재는 L50×4 ~ L75×6까지의 ㄱ 형강 강판

2) SM-420재 및 S55C재는 BOLT & NUT류

3) SM-420재는 HL90×90×6이상의 ㄱ 형강

3-4. 재료시험 및 검사

가. 형강, 강판, 평강, 봉강의 시험은 KS-B0801-0804에 의하며 시험편은 위 규격에 의하며 인장시험에 쓰이는 시험재는 KS-B0801-0804에 준한다.

나. 형강, 강판, 평강 및 봉강 검사는 KS-D0001에 의한다.

다. 재료시험 발췌본수 철탑에 쓰이는 재료의 전 규격에 다음 수량을 취한다.

1) ㄱ형강 및 평강 : 인장시험용 2개, 굴곡시험용 2개 (절곡가공재 포함)

2) 강판 : 인장시험용 2개, 굴곡시험용 2개 (절곡가공재 포함)

3) BOLT NUT : KS-D  3501 및 철탑용 고장력강 BOLT 규격에 의한다.

3 - 12

3-5. 공작

가. 일반사항

1) BOLT 구멍의 크기 : BOLT 구멍의 지름은 아래와 같다

3 - 14

BOLT M16Φ일때 구멍지름 17.5 mm

BOLT M20Φ일때 구멍지름 21.5 mm

BOLT M22Φ일때 구멍지름 24.0 mm

BOLT M24Φ일때 구멍지름 26.0 mm

2) BOLT의 PITCH : 부재의 BOLT PITCH는 다음과 같다.

규 격	표 준 피 치	최 소 피 치	최 대 피 치
M16Φ	50	40	125
M20Φ	60	50	160
M22Φ	65	55	175
M24Φ	75	65	200

3) 부재끝 치수

부재의 절단 끝과 BOLT구멍 중심과의 거리 e1, 앞면 모서리 끝과 BOLT 구멍 중심점과의 거리 e2는 아래와 같이 하는 것이 표준이다.

가) 주 주재 및 완철 주재 : e1≥2d,  e2≥1.5d

나) 복재 및 그 외 : e1≥1.5d,  e2≥1.3d (단, d는 사용 BOLT의 지름)

4) 부재의 GAUGE는 아래와 같은 것을 표준으로 한다

	1열 GAUGE일때 : G1≥B/2 3 - 15 2열 GAUGE일때 : G2≥d+t+r1 3열 GAUGE일때 : G3=B-e2 d : 사용 BOLT 지름 e2 : 3절의 부재 끝치수를 참조할 것.

.

가) BOLT를 부재의 장축에 따라 1열로 설치할 때에는 BOLT 구멍의 중심 위치는 G1에 의함을 표준으로 한다.

나) BOLT를 부재의 장축에 따라 ZIGZAG로 설치할 때 각 BOLT의 중심 위치는 G2 또는 G3에 의함을 표준으로 한다.

5) CASSETTE PLATE의 두께

CASSETTE PLATE의 두께는 부재의 지압세기 또는 BOLT의 절단세기 이상이 되도록 한다.

6) BOLT 류

BOLT NUT는 전부 KS 규격의 PITCH로 하고 KS-D 3501 철탑용 BOLT NUT 및 철탑용 고장력 BOLT NUT 규격인 것, 또는 KBS에서 승인한 것이어야 한다.

가) BOLT의 길이

BOLT의 길이는 끼어 조인 후 아래와 같은 여유길이를 고려하여야 한다.

BOLT M 16Φ이면 여유길이 (NUT에서 나온 길이)는 5mm이상

BOLT M 20Φ이면 여유길이 (NUT에서 나온 길이)는 6mm이상

BOLT M 22Φ이면 여유길이 (NUT에서 나온 길이)는 7mm이상

BOLT M 24Φ이면 여유길이 (NUT에서 나온 길이)는 8mm이상

7) RING - FILLER 류

BOLT를 조인 점에 부재사이에 틈이 생길 때에는 적당한 두께의 RING-FILLER 또는

FILLER - PLATE를 삽입해야 한다.

가) RING-FILLER는 KS규격의 철탑용 BOLT NUT 및 철탑용 고장력 BOLT NUT 규격에 의한 것으로 하고 삽입 BOLT수가 연속 2개 이하일 때 사용한다.

3 - 16

나) FILLER-PLATE는 삽입 BOLT 수가 연속 3개 이상일 때 사용할 것이며 PLATE 폭은 다음의 표준으로 한다.

BOLT M 16Φ이면  50mm

BOLT M 20Φ이면  60mm

BOLT M 22Φ이면  70mm

BOLT M 24Φ이면  80mm

다) 틈새에 대한 RING-FILLER 및 FILLER-PLATE 두께의 조합은 삽입 후 틈이 생기지  않도록 한다.

8) 부재번호

부재번호는 검수 및 조립에 편하게 하부에서 상부로 향하여 절간마다 주 주재, 시재,

보조재의 순서로 붙이는 것을 원칙으로 한다.

나. 구조각부

1) JOINTING

가) JOINT는 원칙적으로 BOLT JOINT로 하지만 구조상할 수 없는 경우에는 LAP JOINT를 쓸 수 있다.

나) JOINT의 길이는 양단공간이 부재의 2배 FLANGE 폭(2F)보다 짧지 않도록 해야한다. 단, 부재의 FLANGE 폭이 틀릴 때에는 작은쪽 FLANGE에 의한다.

2) 부재의 장치

3 - 17

가) 부재는 BOLT로 접합함이 원칙이다. 부재를 맞추어 끼우는 부분에                           CASSETTE-PLATE를 쓸 때 소요되는 BOLT 수는 합력법에 의하여 산출한다.

나) 부재의 장치는 될 수 있는 한 각부재의 GAUGE LINE을 절점, 혹은 교접에 합치시키도록 한다.

다. 가 공

1) 부재의 정정

재료는 가공 전에 ROLL 홈 등에 대한 정밀한 검사를 하여 휘었거나 홈 등이 있으면

재질을 상하지 않는 방법으로 정정한다.

2) 절 단

재료의 절단은 CUTTER로 정확하게 행하며 특히 주재료로 쓰이는 부재는 JOINT 부를 밀착시킬 필요가 있으므로 절단, 휨 등이 생기지 않는 방법(회전톱, 기계톱 사용)으로 절단한다. 단, 작은 재료는 절단면을 충분하게 다듬을 수 있으면 CUTTER에 의하여 절단하여도 좋다.

3) 구멍 뚫기

재료에 구멍 뚫기를 하려면 다음 각 호에 의하여야 한다.

가) PUNCH에 의한 구멍 뚫기는 원칙적으로 부재의 두께 10㎜ 이하이지만 발주처에서 인정한 PUNCH기를 사용할 때에는 부재의 두께12㎜까지 PUNCHING에 의하여 행하여도 가능하며, 그 밖의 구멍 뚫기는 DRILLING에 의하여 정확하게 하여야 한다.

나) PUNCHING은 재료의 두께 12㎜이하 7㎜까지는 PUNCHING-TABLE의 지름의 차를 2㎜로 하며 두께 6㎜이하이면 그 차를 1㎜로 한다.

다) PUNCHING은 PUNCH 시의 마멸로 인하여 구멍 뚫기의 결과가 깔때기 형이 되지 않도록 하여야 한다.

라) 구멍 뚫기는 철탑조립에 있어 잘 맞지 않는 일이 없도록 정확히 하고 리-마 등으로 구멍을 확대하면 안된다.

4) 부재의 구부림 및 각도 취하기 가공

부재가 충분히 밀착하지 않았을 때(2㎜이상 경사 간격이 생긴 경우)에는 안으로 구부림 밖으로 구부림, 각도의 별림 및 각도 닫음 등의 구부림 가공을 하여 밀착시켜야 하며 구부림 가공은 다음과 같이 한다.

3 - 18

가) 구부림가공은 원칙적으로 열간가공으로 하지만 구부림 각도가 10˚(18/100) 이하이면 상온가공으로 할 수 있다.

나) KS-D3503 제4종 SB-540재로 열간 구부림가공을 하면 열에 의하여 재질 열화를             방지해야 하므로 충분한 온도관리가 필요하다.

따라서 제작업자는 가공 적정온도와 그 관리방법을 KBS에 제출하여야 한다.

다) 구부림 각도가 25˚이상일 때는 절곡가공을 하며 용접부의 강도 및 재질이 저하되지 않도록 가공하여야 한다.

5) 구 절

부재 끝이 근접한 다른 부재 또는 BOLT에 닿을 때에는 부재의 강도가 떨어지지 않는 방법에 의하여 구절 가공을 하여야 한다.

6) 용 접

가) 용접은 KS 규격 (용접기술 검정에 있어 시험방법 또는 판정기준)에 의하여 전문급에 합격한 용접공 또는 발주처에서 인정한 동등 이상의 용접공에 의하여 행한다.

나) 사용 용접봉은 일반 압연강재 용접봉 및 연강용 피복 ARC 용접봉과 고장력 강응피복 ARC 용접봉의 규격품이나 모제의 종류, 규격 및 용접조건에 가장 알맞은 것으로 발주처의 승인을 받은 다음에 사용하여야 한다.

다) 용접봉에 습기가 있으면 충분하게 건조한 뒤 사용하여야한다.

7) 동일형 철탑의 동일부재번호의 부재는 서로 바꾸어 쓸 수 있는 교환성이 있어야 한다.

8) 각 부재는 아연도금 후에도 명료하게 식별할 수 있도록 형기호와 부재번호를 각인해야 하며 표시 위치는 부재의 일단의 가까운 곳에 하여야 한다.

3-6. 아연도금

가. 모든 철탑부재는 절단, 구멍 뚫기, 가 조립, 교정 그 밖의 가공이 끝난 뒤 아연 도금을 방해하는 불순물을 제거하고 용융 아연도금법에 의하여 정량 이상의 완전한 아연도금을 하여야 한다. 단, CONCRET속에 묻히는 주 각재의 G.L이하는 아연도금이 필요하지 않다.

나. 형강, 강판 및 대강

KS-D3503에 의한 부재표면 절부에 균일한 도금을 하여야 한다. 아연도금 부착량은 평균 610g/㎡, 최소 550g/㎡ 이어야 한다.

다. BOLT NUT

1) BOLT 및 NUT는 PITCH를 자른 후 KS-D0201에 의한 전체 면에 같게 정량 이상의 아연도금을 하여야 하며, PITCH의 요철에 불순물이 있으면 안된다.

2) 아연도금 부착량은 평균 400g/㎡ , 최소 350g/㎡이어야 한다.

3) 모든 볼트에는 스프링와셔, 평와셔를 사용하도록 한다. 단, JOINT부분은 스프링와셔, 평와셔, 2NUT를 사용한다.

라. 모든 철탑 부재는 아연 도금이 끝난 후 아연 도금의 양부 등에 대하여 충분히 검사하고 불량 부재는 아연도금을 손상하지 않는 방법으로 완전히 교정한 후 부재의 정리운반 및 조립에 편하도록 MARK-ING 및 보관작업을 하여야 한다.

3-7. 제작도

가. 제작도는 울산정보산업진흥원에서 승인한 설계지침에 의해 작도할 것이며 철탑 각부 구조의 세부형상이 명확하게 표시되어야 한다.

나. 제작승인도

1) 제출기일 및 부수

제작업자는 계약 후 10일 이내에 울산정보산업진흥원 제작 승인용 도면으로 5부를 제출하여야 한다.

2) 제작 승인도의 반환

울산정보산업진흥원은 제작업자가 제출한 제작 승인도를 검토하여 승인, 조건부승인 또는 부인을 명시하여 제작업자에게 1부를 반환하여 주고, 조건부 승인된 도면은 울산정보산업진흥원 지시대로 수정하여 승인된 최종제작도로 하여 5부를 곧 울산정보산업진흥원에 제출하여야 한다.

3) 제작 승인도에는 적어도 아래 사항이 표시되어야 한다.

가) 관제탑(철탑)의 높이, 탑체, 완철의 길이 등 철탑의 주요 규격

나) 관제탑(철탑) 각 부재의 규격, 골조방법 및 ㄱ형강의 내부 또는 외부 취부도

다) 평철의 두께 및 BOLT의 지름, 위치 등 절점구조의 상세도

라) 통신설비 설치부분의 구조

3-8. 출하

가. 묵 인

1) 각 부재는 제작소 MARK, 형기호, 부재번호, 철탑번호를 묵인으로 표시해야 하며, 표시위치는 주 주재 그리고 사재는 상방 일단에 수평재는 좌우 어느 쪽 일단으로 하며, 그 이외에 부재는 이에 준하여 보기 쉬운 일정한 위치에 표시하여야 한다.

2) 두께 12mm이상의 형강에는 그 절단면에서도 상방 임단에 형기호, 부재번호를 묵인으로 표시하여야 한다.

3) BOLT류의 상자에는 빗물 등에 의하여 지워지지 않는 묵인으로 제작소 MARK, 형기호, 철탑번호, 내용품의 종류 및 수량을 표시하여야 한다.

나. 분류 및 포장

관제탑(철탑)부재 그리고 BOLT 류의 포장은 다음과 같이 한다. 단, 국외에서 제작된 제품에 대하여는 별도 지시하는 방법으로 포장하여야 한다.

1) 부재의 경우

1기에서 같은 종류의 부재는 적당한 아연도금된 선으로 결박하여야 하며 아연도금선은 운반 도중에 끊어지지 않을 정도의 강도가 있는 것을 사용하여야 한다.

2) 볼트류의 경우

BOLT 류는 1기마다 운반도중에 파손되지 않는 견고한 상자에 넣어야 하며, 2종 이상을 한 상자에 넣을 경우에는 한 규격마다 다른 주머니에 넣어야 하며, BOLT NUT 및 RING FILLER 등은 각 규격별로 5%의 예비를 가지도록 한다.

3-9. 검사 및 시험

가. 검사 및 시험은 감독원의 검사원 또는 감독원이 검사 및 시험을 의뢰한 대리인 입회하에행하여야 하며 검사 및 시험에 든 비용은 전부 제작업자가 부담한다.

나. 발주처에서 입회를 생략한 경우는 계약자의 책임 하에 검사 및 시험하여 그 결과에 대한 보고서를 1주 이내에 발주처에 제출하여야 한다.

다. 원자재검사 및 시험은 3절의 재료시험 및 검사에 의해 가공 전에 다음과 같이 한다.

1) 검 사

재료검사는 각 재료군에 대하여 주로 하자의 유무, 기준, 규격 같은 외관상의 여러 점에 관하여 검사를 하도록 한다. 또한 불량품이 있을 시 감독원의 지시에 따라서 처리한다.

2) 시 험

재료의 시험은 발주처 검사인이 지정한 인장시험기로 만든 시험편으로 하며, 규격별 시험편의 인장, 굴곡에서 1개라도 불합격이 있을 경우는 그 규격의 재료군 전부를 불합격으로 취급한다. 단, 사정에 따라서 재시험을 할 수도 있다.

마. 현촌도 검사

현촌도 검사는 기준규격의 측정, 구조상의 적부, 부재 규격의 지름 본수와 배치 등에서 설계 및 제작 사양서에 적합한가 아닌가에 대하여 검사한다.

바. 가조립 검사

1) 가조립 검사는 사전에 가조립 검사 일정을 발주처에 통보하여야 하고 3면이 조립된 상태에서 실시하여야 한다.

2) 부재는 아연도금하기 전에 각형 계각 및 각편 계각에 따라서 한 종류씩 가조립한다. 가공정도의 확인하기 위하여 기존규격의 측정, 구조상의 적부, 부재의 규격, BOLT의 지름 및 본수 등의 검사를 한다.

3-10. 아연도금 시험

부재 및 BOLT NUT류의 아연도금시험은 KS-D0201 규격에 의하며 시험은 균일성 시험과 부착량 시험을 하여야 한다.

가. 시험편의 채취

모든 작업공정을 거친 완제품 중 발주처에서 지정한 부재를 시험편으로 사용하며 사용한 부족량만큼 계약자는 추가 납품하여야 한다.

나. 시 험

3 - 22

균일성 시험 및 부착량 시험은 KS-D0201로 실시하며 도금 완료된 시험편중 1개의 시편이라도 불합격판정을 받아도 전체제품을 불합격으로 간주한다.

다. 제품검사

제품은 발송하기 전에 가공 및 아연도금의 양부 등 검사를 하여야 하며 검사결과 제품에 불량품이 있을 경우 계약자는 다시 제작 보수하여 재검사를 받아야 한다.

3-11. 납품 및 검수

가. 공장도 납품을 원칙으로 하며, 관제탑(철탑) 부재의 검수는 발주처에서 지정하는 장소에서 제작업자가 제출한 조립도 및 MEMBER LIST에 준하여 감독원의 입회하에 진행한다.

나. 검수 결과 부족재가 생긴 경우 발주처의 지시에 따라 신속하게 보충하여야 하며, 조립도 및 LIST는 제품 납품 전까지 발주처에 제출하여야 한다.

3-12. 각종시험

모든 채취된 시편의 시험 및 발주처가 요구하는 시험은 공공기관(국립공업시험원)에서 시험을 필한 후 그 기관의 합격시험 증명서 3부를 발주처에 제출하여야 한다.  끝.

제4장 심사항목 및 평가기준

4.1. 적격심사항목 및 배점한도

가. 심사 분야별 적격심사항목

(단위 : 점)

구 분

심사분야

심사항목

배점

한도

비고

합 계

100

1.해당용역수행능력

시공경험

○ 해당공사 평가대상 업종별 추정가격 대비 최근 5년간 해당공사와 동일한 평가대상 업종별 실적금액(관급·지급자재비 제외)의 비율에 해당하는 등급점수로 다음과 같이 산정한다.

◦ 종합점수 = 업종별 점수의 합(合)

◦ 업종별점수 = 해당업종등급점수×업종평가비율

○ 주계약자 관리방식으로 입찰에 참여한 경우

◦ 종합점수 = 주계약자 점수와 부계약자 점수의 합(合)

• 주계약자는 평가대상 전체 업종별 추정가격 대비 최근 5년간 실적의 비율에 해당하는 종합공사 업종등급점수에 주계약자 시공비율을 곱한 점수 부여

• 부계약자는 참여 평가대상 업종별 추정가격 대비 최근 5년간 실적의 비율에 해당하는 전문․그 밖의 공사 업종등급점수에 부계약자 시공비율을 곱한 점수 부여

15

실적은

업종별로

구분 적용

·토목

·건축

·전문

·전기

·정보통신 등

경영상태

∘ 신용평가방법(신용평가표에 따른 평점)

15

계

30

2. 입찰가격

∘ 입찰가격을 다음 산식에 의거 산출된 평점 적용

가. 입찰가격 평점산식

평점(점) =	70 - 4×		(	88	-	(입찰가격-A)	)×100
				100		(예정가격-A)

* A : 국민연금보험료, 국민건강보험료, 퇴직공제부금비, 노인장기요양보험료, 산업안전보건관리비, 안전관리비, 품질관리비의 합산액

나. (입찰가격-A)이 (예정가격-A) 이하로서 (예정가격-A)의 100분의 89.25 이상인 경우의 평점은 65점으로 한다.

70

※ ｜｜는 절대값 표시임.

※ (입찰가격-A)을 (예정가격-A)으로 나눈 결과 소수점 이하는 소수점 다섯째 자리에서 반올림하여 평가한다.

나. 세부심사기준

1) 시공실적 외

가) 종합공사 업종등급점수                                      (단위: 점)

구 분	A등급	B등급	C등급	D등급	E등급	F등급	G등급	H등급
평가 비율	100% 이상	90% 이상	80% 이상	70% 이상	60% 이상	50% 이상	40% 이상	40% 미만
점 수	15.0	13.0	11.0	9.0	7.0	5.0	3.0	1.0

나) 전문 ‧ 그 밖의 공사 업종등급점수                            (단위: 점)

구 분	A등급	B등급	C등급	D등급	E등급	F등급	G등급	H등급
평가 비율	80% 이상	70% 이상	60% 이상	50% 이상	40%이상	30%이상	20%이상	20%미만
점 수	15.0	13.0	11.0	9.0	7.0	5.0	3.0	1.0

2) 경영상태

① 회사채에 대한 신용평가등급	② 기업어음에 대한 신용평가등급	③ 기업신용평가등급	평 점
AAA		①의 AAA에 준하는 등급	15.0
AA+, AA°, AA-	A1	①의 AA+, AA°, AA-에 준하는 등급	15.0
A+, A°, A-	A2+, A2°, A2-	①의 A+, A°, A-에 준하는 등급	15.0
BBB+, BBB°, BBB-	A3+, A3°, A3-	①의 BBB+, BBB°, BBB-에 준하는 등급	15.0
BB+, BB°	B+	①의 BB+, BB°에 준하는 등급	15.0
BB-	B°	①의 BB-에 준하는 등급	14.0
B+, B°, B-	B-	①의 B+, B°, B-에 준하는 등급	13.0
CCC+ 이하	C 이하	①의 CCC+에 준하는 등급 이하	10.0

주1) 신용평가는 제2장 적격심사 기준 제5절 “3”에 정한 바에 따른다.

양식 첨부

■ 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준 제2장의1 시설공사 적격심사 세부기준 [별지 제2호 서식]

적 격 심 사 신 청 서

◦ 관리번호 :

◦ 공 사 명 :

◦ 수요기관 :

◦ 입찰일시 :

위 공사의 적격심사와 관련하여 적격심사 자기평가표와 제증빙 자료를 신의성실의 원칙에 따라 붙임과 같이 제출하며, 만일 제출한 서류가 허위나 부정한 방법으로 작성된 사실이 확인될 경우에는 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제31조와 시설공사 적격심사 세부기준 등에 따라 처리해도 아무런 이의를 제기하지 않을 것을 확약합니다.

입찰자  주  소 :

회사명 :

대표자 :                           (인)

붙임 : 제출서류 목록과 관련서류 1부

재무관 귀하

--------------------------------------------------------

접  수  증

1. 관리번호 :

2. 공 사 명 :

3. 제 출 자 :

위 공사입찰의 적격심사신청서와 관련서류를 접수했음을 확인합니다.

20    .     .     .

재무관               (인)

■ 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준 제2장의1 시설공사 적격심사 세부기준 [별지 제3호 서식]

적격심사 자기평가와 심사표

1. 심사대상 공사                   2. 심사대상자

공고번호			회사명
공 사 명			대표자		전화번호
입찰금액			3. 작성자 연락처
업종구분			소 속
			성 명		전화번호

4. 종합평가표                                                    (단위 : 점)

심사분야	심사항목	배 점	자기평점	심사평점
계		100
수행능력평가	시 공 경 험
	경 영 상 태
	신 인 도
	시 공 여 유 율
	접 근 성
입찰가격
하도급관리계획 등의 적정성 평가
자재와 인력조달 가격의 적정성 평가
그밖에 해당공사 수행능력상 결격여부
지역 업체의 해당지역 영업활동기간
해당지역 실제영업활동 여부

※ 종합평가표는 해당 항목만 기재

[양식 1]

착 공 신 고 서
	감독자 경유		(인)
1.	공 사 명	:
2.	계 약 금 액	:
3.	계 약 년 월 일	:	2024	년		월		일
4.	착 공 예 정 일	:	2024	년		월		일
5.	준 공 예 정 일	:	2024	년		월		일
6.	착공 지연사유	:
첨 부 :	1. 현장기술자 지정신고서
	2. 공사예정 공정표
3. 공사계획서(안전관리, 품질관리, 시공계획 등)
4. 착공 전 사진
		년		월		일
	수 급 인	주 소	:
	상 호	:
	대표자	:		(인)
울산정보산업진흥원장 귀하

[양식 2]

현장기술자 지정신고서
1. 공 사 명 : 2. 기술자 현황
구 분
성 명
생년월일
주 소
자격종목 및 등급
자격번호
자격등록 년 월 일
사 용 인 감 재		(인)	(인)	(인)	(인)	(인)
첨 부 :	1. 현장기술자 경력사항 확인서(건설기술관리법시행규칙 별지 제2호 서식 참조)
	2. 자격증 사본

[양식 3]

준 공 검 사 원
	감독자 경유		(인)
1.	건명	:
2.	공사위치	:	울산광역시 남구 부곡동 129-4번지 통합안전관리센터 內
3.	계약금액	:
4.	계약년월일	:	2024	년		월		일
5.	착공년월일	:	2024	년		월		일
6.	준공기간	:	2024	년		월		일	~	2024	년		월		일
7.	실준공일	:	2024	년		월		일
8.	첨부서류	:	준공내역서, 준공사진, 품질시험결과서, 각종 증빙서류 등
위 공사의 도급시행에 있어서 공사전반에 걸쳐 공사설계도서, 품질관리기준 및 기타 약정대로 어김없이 준공되었음을 확인하오며 만약 공사의 시공, 감리 및 검사에 관하여 하자가 발견될 시는 즉시 실액 변상 또는 재시공할 것을 서약하고 이에 준공검사원을 제출합니다.
2024	년		월		일
	(도 급 자)
	주 소	:
	상호	:
	성 명	:		(인)
울산정보산업진흥원장 귀하

[양식 4]

공 사 기 한 연 기 원
																			감독자 경유			(인)
1.	건명					:
2.	계약금액					:
3.	계약년월일					:		2024	년		월				일
4.	착공년월일					:		2024	년		월				일
5.	준공예정일					:		2024	년		월				일
6.	연기요청일					:			년		월				일
7.	첨부서류					:		공사기간 조정 산출내역
2024												년				월				일
		(도 급 자)
			주 소		:
			상호		:
			성 명		:												(인)
울산정보산업진흥원장 귀하

[양식 5]

자 재 선 정 검 토 요 청 서

검토번호 :          호

품 명	규 격	제조회사명	K.S여부	검 토 의 견

첨부 : 제품자료 및 견본

위 자재에 대하여 검토를 요청합니다.

2024 .    .    .

공사명 :

현장대리인 :                      □

울산정보산업진흥원장 귀하

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

검     토     서

1. 검토번호 :

2. 품    목 :

3. 검토의견 :

위와 같이 검토한 내용을 통보합니다.

2024 .    .    .

울산정보산업진흥원 :                       □

[양식 6]

자 재 검 수 부

년월일	품 명	규 격	단 위	생산업체	설계량	반입량	불합격량	품질기준	품질확인내 용	검수자	비고

[양식 7]

공 사 작 업 일 지

◦ 공사명 :					(최고)	℃
◦ 일 자 :	2023. . . 요일	◦ 날 씨 :		기 온 :	(최저)	℃
		◦ 작성자 :	현장대리인		(인 또는 서명)
		◦ 확인자 :	감 독 자		(인 또는 서명)

1. 공사추진사항

공 종	설계량	단위	전일까지 작업량	금일작업량	누계작업량	비고

2. 장비투입상황

장비명	규 격	전일까 지투입	금일 투입	누계 투입	장비명	규 격	전일까 지투입	금일 투입	누계 투입

3. 인력투입상황

구 분	전일까지투입인원	금일투입인원	누계투입인원	비 고
보통인부
특별인부

4. 주요작업내용

금일공사사항	명일예정사항	비 고

5. 감독 업무

업무내용	비 고

[양식 8]

주 간 공 정 보 고

■ 공 사 명 :

■ 공사기간 : 2023.  .  . ~ 2023.  .  .

구 분	추 진 실 적			예 정 사 항
기 간	2023. . . ∼ 2023. . .			2023. . . ∼ 2023. . .
진 도	계획 : %	실적 : %	누계 : %	주간계획 : %	예정공정 : %
공사내용
특기사항

위와 같이 주간공정을 보고합니다.

2023 .   .

(주)홍길동건설

현장대리인  홍 길 동 (인)

[양식 9]

월 간 공 정 보 고 ( 월) ■ 공 사 명 : ■ 공사기간 :
구 분	추 진 실 적			예 정 사 항
기 간	2023. . . ∼ 2023. . .			2023. . . ∼ 2023. . .
진 도	계획 : 0%	실적 : 0%	누계 : 0%	월간계획 : %	누계공정: %
공 사 내 용
특 기 사 항

붙 임 : 1. 세부공정 1부.

2. 진행사진 1부.

위와 같이 월간공정을 보고합니다.

2019.  .   .

(주) 홍길동건설

현장대리인  홍 길 동 (인)

[양식 9]

세 부 공 정 ( 월)
공정 공종	전월까지 누계(%)			금 월(%)			누 계(%)			비고
	계획	실적	대비	계획	실적	대비	계획	실적	대비
계

[양식 10]

월간 공정사진

○ 공 사 명 :

사 진 설 명
사 진 설 명

[양식 11] 공사 도면관리예규 [별지 제6호 서식]

도면대출신청서/서약서	결재	도면관리 담당자	도면관리 책임자

관리번호	도 면 명	형 태	수량(매)	기 간	용 도	비 고

위의 도면대출을 청구하오니 대출하여 주시기 바라며, 본인은 대출 받은 도면을 다른 용도에 사용치 않음은 물론 복제·복사하지 않으며 이를 위반하여 발생한 사안에 대하여 모든 책임을 질 것을 서약합니다.

20    년	월	일

위 신청 및 서약자

- 소    속 :	- 직    책 :

- 성    명 :	(서명)        - 전화번호 :

반납확인	일 자	반 납 자	확 인 자	비 고
		(서명)	(서명)

------------------------ 절 -------- 취 -------- 선 ---------------------------

도면반납영수증

관리번호	도 면 명	형 태	수 량(매)	반납일시	비 고

위 도면을 정히 반납하였음을 확인함.

20    년	월	일

확 인 자

- 소   속 :

- 직급(책) :	성 명 :	(서명)

[양식 12] 공사 보안업무 규정 (별지 제50호 서식)

보안 서약서

<<업체대표자용>>

본인은 2024년   월   일부로 광역안전컨트롤타워 관제탑 구축 시설공사를 수행함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약합니다.

1. 본인은 광역안전컨트롤타워 관제탑 구축 시설공사 수행 중 알게 될 일체의 내용이 직무상 기밀 사항임을 인정한다.

2. 본인은 이 기밀을 누설함이 국가안전보장 및 국가이익에 위해가 될 수 있음을 인식하여 업무수행 중 취득한 제반 기밀사항을 일체 누설하거나 공개하지 아니한다.

3. 본인이 이 기밀을 누설하거나 관계 규정을 위반한 때에는 관련 법령 및 계약에 따라 어떠한 처벌 및 불이익도 감수한다.

4. 본인은 하도급업체를 통한 사업 수행시 하도급 업체로 인해 발생하는 위반 사항에 대하여 모든 책임을 부담한다.

2024년      월      일

서  약  자        업   체   명 :

(업체 대표)        직        위 :

성        명 :                        (서명)

생 년 월 일  :

서약집행자        소        속 :

(담당자)          직        위 :

성        명 :                        (서명)

생 년 월 일  :

[양식 13] 공사 보안업무 규정 (별지 제50-1호 서식)

보안 서약서

<<참여 직원용>>

본인은 2024년   월   일부로 광역안전컨트롤타워 관제탑 구축 시설공사를 수행함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약합니다.

1. 본인은 광역안전컨트롤타워 관제탑 구축 시설공사 수행 중 알게 될 일체의 내용이 직무상 기밀 사항임을 인정한다.

2. 본인은 이 기밀을 누설함이 국가안전보장 및 국가이익에 위해가 될 수 있음을 인식하여 업무수행 중 취득한 제반 기밀사항을 일체 누설하거나 공개하지 아니한다.

3. 본인이 이 기밀을 누설하거나 관계 규정을 위반한 때에는 관련 법령 및 계약에 따라 어떠한 처벌 및 불이익도 감수한다.

4. 본인은 하도급업체를 통한 사업 수행시 하도급 업체로 인해 발생하는 위반 사항에 대하여 모든 책임을 부담한다.

2024년      월      일

서  약  자        업   체   명 :

(업체 대표)        직        위 :

성        명 :                        (서명)

생 년 월 일  :

서약집행자        소        속 :

(담당자)          직        위 :

성        명 :                        (서명)

생 년 월 일  :

[양식 14]

청렴이행 서약서(현장대리인)

□ 사 업 명 :

본인은 위 사업의 현장대리인으로서(또는 위 사업의 ○○분야 대표 참여자로서) 본 사업을 수행함에 있어,

관련규정과 절차에 따라 성실하게 임하겠으며, 부조리에 해당하는 일체의 행위를 하지 않고, 사업을 수행하는 과정에서 이유여하를 막론하고 울산정보산업진흥원 관계직원(협력업체 직원 포함)에게 직․간접적으로 법령이나 규정을 위반한 금품(돈, 선물, 강연료, 기부금 등)이나 향응(식사, 접대, 국내외여행 등), 편의(숙박‧교통편의, 행사협찬, 업무지원, 친인척 등에 대한 부정한 취업, 금융‧부동산거래 특혜 등) 등 일체의 부당한 이익 제공하지 않겠으며,

이를 위반할 시에는 어떠한 처벌도 감수할 것과 한국공항공사의 처리에 대하여 민․형사상 일체의 이의를 제기하지 않을 것을 서약합니다.

※ 아래 글을 다음줄에 자필로 따라적고 서명하십시오

나 ○○○는 상기 서약을 지키겠습니다 (서명)

(서명)

2024년    월    일

서약자 : 소속            직책          성명           (서명)

울산정보산업진흥원장 귀하

[양식 15]

안전보건관리 준수 서약서

본인은 귀 기관의                      계약을 수행함에 있어 재해예방을 위하여 아래의 내용과 관련 법규에서 정한 필수사항을 철저히 준수할 것을 다음과 같이 서약합니다.

｢산업안전보건법, 중대재해처벌법｣등 아래의 관련 법규를 준수하겠습니다.

: 예         (    )

: 아니오     (    )

(업체명)는 본 계약을 수행함에 있어 위에 언급한 내용대로 계약을 성실히 이행할 것이며, 만일 이를 이행하지 않을 경우 계약해지, 입찰참가자격제한조치 등 불이익 처분을 받더라도 하등의 이의를 제기하지 아니할 것을 확약하고 안전보건관리 준수서약서를 제출합니다.

2024년   월   일

주  소:

업체명:

대표자:                 (인)

[양식 16]

현장 안전관리 조직도

						안전보건총괄책임자
						현장소장
						연락처
		안전관리자								안전보건 협의체 (수급인 및 하수급인 사업주 전원)
관리감독자 (안전관리책임자)						관리감독자 (안전관리책임자)						관리감독자 (안전관리책임자)
전 근 로 자

☞ 현장 사무실에 작성 비치

「산업안전보건법」제 19조의 규정에 의한 산업안전보건위원회 설치대상 건설현장으로 위와 같이 현장 안전관리 조직도를 제출합니다.

울산정보산업진흥원장 귀하