울산항 항만기본계획 변경 용역

과 업 지 시 서

2022. 1.

【 위  치  도 】

○ 과업위치 : 울산광역시 남구 장생포고래로 244 일원

과업대상위치

목      차

Ⅰ. 설 계 설 명 서 .................................................................  1

Ⅱ. 과 업 지 시 서 .................................................................  7

1. 일반사항 ...............................................................................  7

2. 과업수행계획서 제출 .........................................................  7

3. 추진상황 보고 .....................................................................  7

4. 보안 관리 .............................................................................  8

5. 위반행위에 대한 조치 .......................................................  9

6. 과업 보완에 대한 의무 .....................................................  9

7. 성과품 제출 .........................................................................  10

8. 기타 사항   .........................................................................  10

Ⅲ. 예정공정표 .............................................................................. 11

Ⅰ. 설 계 설 명 서

1. 과 업 명 : 울산항 항만기본계획 변경 용역

2. 과업의 목적

본 과업은 기 수립된 제4차 전국 항만기본계획(울산항)을 검토하여 90m급 유람선 전용 계류시설 조성방안 마련과 계획의 적정성, 입지적 타당성 검토 및 항만기본계획 변경안 작성･협의 등을 목적으로 함

주요 제원	전체길이	89.2 m
	폭(형)	12.8 m
	높이	13.8 m
	계획만재흘수	3.3 m
	최대만재흘수	3.4 m
재화중량	계획만재흘수	240 톤
	최대만재흘수	320 톤
총톤수		2,800톤
승선인원		약 300명

【표】 유람선 주요 제원

3. 계류시설 조성 개요

3-1. 부지대상 현황 : 장생포 고래박물관 앞(계류시설 신규 조성)

· 90m 유람선 선박용 전용 계류시설(접안시설, 계선주 등) 조성 · 활용계획 : 승객 승·하선, 비활동 시에 선박 접안 등

3-2. 계류시설 평면계획

가. 선착장의 길이 및 선석 규모 산정(안)

【표】 선착장 길이 산정

선박 길이(L, m)	B/D 간격(m)		선착장의 길이 계산(m)	선착장의 길이 결정(m)
	최소 (0.25×L)	최소 (0.40×L)
89.2	22.3	35.7	22.3 ~ 35.7	40.0

【표】 선석의 길이 산정

선 박(m)		계류라인 안벽 길이(m)		여유길이(m)	선석 길이(m)
길이	폭	Bow Line	Stern Line
89.2	12.8	10.2	10.2	10.4	120.0m
※ 계류라인에 의한 안벽 길이는 선박 폭의 0.8배를 적용 선석길이 = Bow & Stern line에 의한 안벽길이 + 선박길이 + 여유길이

나. 계류시설 평면도(안)

【그림】 계류시설 평면계획

다. 선착장 단면 검토

- 스마트선박의 계류를 위한 선착장 단면은 다음과 같이 검토 중 임

【표】 접안시설 단면 비교표

구 분	제1안 (잔교식)	제2안 (부잔교식)
개 념 도
개 요	◦강관말뚝을 지지층까지 관입 후 콘크리트 슬래브 설치	◦부함(Pontoon)을 고정시설로 계류 ◦도교를 이용하여 육상과 연결
인․허가	◦공유수면 점사용허가 ◦항만기본계획	◦공유수면 점사용허가 ◦항만기본계획
시 공 성	◦강관말뚝 항타, 가시설 설치, RC슬래브 등의 공종 복잡 ◦강관말뚝은 도장, 전기방식 등으로 부식 억제	◦공장 제작 부함을 고정시설로 계류하여 공종 간단 ◦강재부함은 부식, 콘크리트 부함은 외력에 약함 ◦고정시설은 강관말뚝, 앵커체인, 삼각대 등을 사용
유지관리	◦강관말뚝의 부식 억제를 위한 주기적인 점검 및 관리 필요	◦부함, 고정시설, 도교 등의 노출된 강재에 대한 주기적인 점검 및 관리 필요
경 제 성	공사비 : 보통 유지관리비 : 보통	공사비 : 보통 유지관리비 : 높음

4. 과업의 개요

4-1. 과업의 범위

가. 시간적 범위 : 2021 ~ 2030년(10년)

나. 공간적 범위 : 울산광역시 남구 장생포고래로 244 일원

4-2. 과업의 주요내용

가. 작업계획 수립

1) 과업추진 일정 및 방향

2) 참여기술자 배치계획 등

나. 항만현황 조사

1) 자연, 인문, 산업구조 등 현황조사

2) 공간적 범위의 항만시설 등 현황조사(수심, 정온도 등)

다. 개발여건 분석

1) 제4차 전국 무역항 항만기본계획(울산항)에 따른 개발여건 분석

- 울산항 물동량, 선석개발 계획 등

2) 울산항 입지 타당성 및 필요성 등 논리 개발

- 90m급 유람선 전용 계류시설 조성방안 분석 및 검토

라. 항만기본계획 검토 및 변경

1) 임시 선착장 추진 검토(울산 남구 장생포동 60-20 고래바다여행선 선착장 일원)

2) 시설기본계획 및 준설방안 검토

3) 건설여건 조사

4) 기본계획 변경

마. 인･허가 및 행정지원

1) 「해양공간계획 및 관리에 관한 법률」에 의거한 해양공간적합성협의에 필요한 제반 도서 작성 및 협의

2) 기타 협의사항 수행, 면제사유서 작성 및 협의

바. 보고서 작성

5. 과업 수행기간

1) 과업은 착수일로부터 ‘22년 12월까지로 하고 발주기관의 사전협의 등 사유로 성과물의 일부를 조기 제출토록 요구하는 경우 계약 대상자는 이에 따라야 한다.

2) 다음의 경우에는 발주청의 승인을 받아 과업의 기간을 단축 또는 연장할 수 있다.

가. 천재지변으로 과업수행의 차질이 있을 시

나. 발주청의 계획 변경 방침에 따라 과업수행의 중단 또는 과업 내용의 현저한 변경이나 증감이 있을 시

다. 과업 시행 중 예기치 못하였던 사항의 발생으로 변경이 불가피 시

라. 항만관련 상위계획 수립, 변경을 금번 계획에 반영 필요성 등 기타 부득이한 사유가 발생하였을 시

6. 과업수행 적용기준

1) 적용기준은 가장 최근의 자료를 적용하며, 관련규정 및 설계기준이 개정된 경우 용역완료 전까지 수정된 최신의 기준을 적용하고  특별히 규정되지 않은 사항은 발주기관과 협의하여 적용한다.

2) 본 용역은 과업지시서 및 다음 항의 각종 도서를 참조하여 과업을 수행하여야 한다.

가. 제 4차 전국 무역항 항만기본계획

나. 국토종합계획, 울산광역시종합계획 등 관련계획

다. 항만 및 어항설계기준

라. 통계자료는 통계청, 울산광역시, 지방자치단체 등 공공기관 자료

7. 설계변경 조건

본 과업수행 중 다음과 같은 사유가 발생 시 예산의 범위 내에서 설계변경을 할 수 있다.

1) 과업지시서의 내용 변경 및 수량에 차이가 있을 경우

2) 과업 수행 중 직접경비 항목에 대한 추가 경비가 필요한 경우

3) 각종 비목에 계상된 금액을 사후에 정산함이 타당하다고 판단되는 경우

4) 기타 발주청의 사정에 의해 과업 변경이 필요한 경우

Ⅱ. 과 업 지 시 서

1. 일반사항

1) 본 과업지시서는 “울산항 항만기본계획(변경) 수립”을 성실히 수행하기 위하여 필요한 사항을 규정함

2) 과업의 모든 내용은 본 과업지시서에 의해 수행하되, 과업지시서에 규정하지 아니한 사항은 관계법령 또는 제반 관련규정에 의해 발주기관과 협의하여 수행하여야 함

3) 과업수행기관은 최신 통계 데이터 및 현장 조사 자료 등을 활용하여 과업을 수행하여야 함

4) 과업지시서상의 문구, 용어의 해석과 과업의 범위에 대하여   의견을 달리할 경우에는 발주기관의 해석과 지시에 따라야 함

5) 과업수행기관은 과업의 수행을 제3자에게 하도급 할 수 없으며, 일부 업무 중 협력업체 및 타 전문기관을 활용코자 할 때에는 발주기관의 승인을 받아야 함

2. 과업수행계획서 제출

1) 과업수행기관은 계약일로부터 10일 이내에 참여기술자의 명단, 착수계획, 예정공정표, 보안서약서 등과 함께 과업수행계획서를 첨부한 착수보고서를 제출하여야 함

2) 과업수행계획서는 계약서, 과업수행지침 등의 내용을 근거로 작성 제출하여야 함

3) 수급자는 본 과업에 따른 착공계, 현장대리인계, 세부 수행계획서 등 필요한 서류를 발주청에 제출하여야 함

3. 추진상황 보고

1) 착수보고 : 착수일로부터 10일 이내

- 보고내용 : 추진일정 등 과업 수행계획 보고

2) 중간보고 : 착수일로부터 120일(1차) 이내

- 보고사항 : 과업 진행상황 및 향후 추진계획 등

- 보고일자, 내용, 방법 등에 대하여 발주기관과 사전협의

3) 수시보고 : 매월 말일을 기준으로 과업 추진상황을 익월 5일까지 발주청에 보고하되, 세부 수행계획서에 의하여 계획과 실적을 알 수 있도록 정량적으로 작성하여야 한다.

4) 최종보고 : 계약 만료일 10일전 이내

- 보고사항 : 과업지시서에 명시된 과업결과에 대한 최종보고

- 보고 전 최종보고(안)를 작성하여 보고내용 및 일자, 방법 등에 대하여

발주기관과 협의

4. 보안관리

1) 과업수행기관 대표자는 과업착수와 동시에 보안각서를 제출하고 과업참여자(외국인 포함)에 대한 보안각서는 과업수행기관 대표자 책임하에 작성한 후 착수보고서 제출시 제출하여야 한다

2) 보안사항의 누설과 과련 자료의 도난, 분실, 기타 손괴 등을 방지하고 제반 보안사항을 조치를 강구 또는 감독하기 위하여 정·부 보안책임자를 지정하여야 하며, 자료 보관함은 별도 비치하되 대외비, 일반자료 보관함으로 구분하여 보관하여야 한다.

3) 용역보고서 등 관련 문서는 보안성을 면밀히 검토하여 보안 관계 제 규정을 준수하여야 하며, 성과품에는 발간근거를 명시(업체명, 인가근거, 참여자, 발간일자)하고 원지·폐지 등을 완전 회수·소각하여야 한다.

4) 과업 중 과업참여자를 교체할 경우 인계인수를 철저히 하여 자료의 외부유출을 사전에 방지하여야 하며, 발주처의 승인을 받아야 한다.

5) 보안이 요구되는 과업을 수행하는 경우에는 작업실을 제한구역으로 지정하여 외부인의 출입을 금하도록 하여야 하며, 용역과업 참여자 이외의 자에게 부득이한 사정으로 성과품 등 관계 자료를 취급하게 할 경우 반드시 보안각서를 작성 후 취급하여야 한다.

6) 본 과업수행과 관련된 자료 및 정보 등은 본 과업이외의 여타 목적을 위해 사용할 수 없으며, 발주처의 승인 없이는 타인에게 제공 또는 대여하거나 외부에 공개할 수 없다.

7) 과업수행상 발생한 자료 등의 폐기물은 보안관리 책임자 책임하에 완전 폐기하여야 한다.

8) 용역계약자는 과업수행과정에서 발생한 각종 자료와 용역성과품은 용역준공시 전부 납품하여야 하며, 추가로 성과품을 인쇄하여 보관할 수 없다.

9) 용역계약자는 용역사업 수행과정에서 취득한 내용을 사용하여 국가가 손해를 입었을 시에는 이에 대한 손해배상을 하여야 한다.

10) 그 밖의 내용은 보안업무시행세칙 제61조 용역업체에 대한 보안사항을 준수한다.

5. 위반행위에 대한 조치

1) 다음 사항의 위반행위 등에 대하여 계약을 해지할 수 있으며, 이 경우 과업수행기관은 어떠한 보상도 받을 수 없다.

- 과업지시서 등에 명기된 사항을 위반하였을 경우

- 성과품의 허위작성 및 규격(내용의 수준) 미달

- 보안사항 유출 및 관련 자료의 악용 등

- 계획공정에 비하여 현저하게 공정이 미달되거나 중간성과품이 미흡하여 계약기간 내 완료할 능력이 없다고 판단될 경우

- 과업수행 중 성실치 못하거나 제반 지시사항을 기간 내에 이행치 않는 등 소기의 성과를 얻을 수 없다고 판단될 때

- 과업 전부 또는 일부를 부당한 방법으로 하도급을 주었을 경우

- 계약상대자의 부도 및 기타 경영상 등의 중대한 사유로 과업수행이 불가능하다고 인정되었을 경우

6. 과업 보완에 대한 의무

1) 본 과업 완료 이후에도 과업에 관련된 사항에 대하여 재검토, 보완이 필요할 때에는 별도의 용역비 청구 없이 재검토 보완하여 제출하여야 함

2) 발주기관의 승인･협의를 거친 사항이라도 추후 계획상의 잘못이 발견된 경우에는 추가 용역비의 청구 없이 과업수행기관의 책임 하에 수정･보완하여야 함

3) 과업수행결과가 효율성이 떨어져 사업계획에 중대한 차질이 발생하였을 때에는 과업수행기관은 이에 상응하는 책임을 져야 하며, 발주기관은 관계법령에 의한 조치를 취할 수 있음

7. 성과품 제출

1) 착수보고자료, 중간보고자료, 최종성과품 등을 아래와 같이 제출 하여야 함

항 목	부수	비 고
착수보고자료(A4)	15	경인쇄 한글, PDF 등
중간보고자료(A4, 1회)	15	경인쇄 한글, PDF 등
최종성과품(A4) - 고시자료(고시문 등) - 도면 - 기타(인·허가 및 검토)	30 30 10	경인쇄 한글, PDF, 그림파일 등
전자파일	1	USB(한글프로그램, PDF 파일)

2) 항만기본계획 변경 관련 해수부 등 관계기관 협의자료 1식

3) 기타 용역수행결과로 인해 생산되는 각종 자료 1식

8. 기타사항

1) 과업수행기관은 계약기간이 완료된 이후에도 발주기관의 요청이 있을 시에는 설명회, 간담회 등에 참석하여 발표, 토론하는 등 사업성과물의 활용에 적극 응해야 함

2) 계약기간 완료 시점에서 울산항 기본계획 변경이 수립되지 않을 경우 계약기간만 연장하여 최종 계획변경이 반영되도록 함

Ⅲ. 예 정 공 정 표

사 업 내 용	공 정 진 행
	2월		3월		4월		5월		6월		7월		8월		9월		10월		11월		12월
착수보고
항만현황 조사
개발여건 분석
임시 선착장 추진 검토
기본계획 변경
중간보고
인·허가 및 행정 지원
최종보고
성과품 제출